설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 정문수		요청일		2014년 12월 일
공 사 명	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
공사개요	공사규모		도로개설(L=1.23km, 도로폭 B= 40.0m, 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m))
	공사기간		2010. 09. 29. ~ 2015. 12. 30.
	감 리 사		(주)수성엔지니어링
	설 계 사		(주)도화엔지니어링, (주)경동엔지니어링
	시 공 사		보훈종합건설(주)
자문 안건명			기존 수로구간 퇴적지반 처리비 반영				요청금액		증)33,690천원
자문요청사유			☑ 3,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의
설계변경사항(요약) ○ 내용 : "남부순환로~오정대로간 도로개설공사"를 시행함에 있어 STA.NO.0+220,STA.NO.0+390 구간의 기존수로 바닥에 퇴적된 지반에 의한 장.단기적인 침하량을 최소화하기 위하여 비교 검토 방안 중 가장 적합한 방안(구입암 성토를 한 후 양질토사로 되메우고 다짐)으로 지반을 처리함을 반영함
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 없음
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초 : - - 변 경 : 기존수로 바닥 퇴적지반 처리비 설계 반영 ▪ 물량 증감내역 ○당초물량 : - ○변경물량 : - 순쌓기 : 971㎥ - 되메우고 다짐 : 1,799㎥ - 사석채움 : 1,089 ton					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 0천원 - 변 경 : 33,690천원 - 증 감 : 증 33,690천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토공외
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 신규공종 단가결정 근거 1부. 4. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2014년 11월 ▪ 소요관급자재 -없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	남부순환로~오정대로간 도로개설공사
계약금액	10,549,300천원	계약일	2010.09.01	시공사	보훈종합건설(주)
공사기간	2010.09.29 ~ 2015.12.30	낙찰율	85.515%	설계자	(주)경동엔지니어링 (주)도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)수성엔지니어링
공사규모	-도로개설(폭 40m, 연장 1.23km) 교량1개소(L=43.08m, 폭11.9m)			※ 작성자 : 업무담당 정문수 (☎3708-2561)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	- 순쌓기 : 0 ㎥ - 되메우고 다짐 : 0㎥ - 사석채움 : 0 ton		- 순쌓기 : 971㎥ - 되메우고 다짐 : 1,799㎥ - 사석채움 : 1,089 ton	증액
공 사 비	- 천원		33,690천원	증 33,690천원
적 용 요 율	낙찰율 85.515%		신규비목 협의율 92.75%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	계약금액 조정협의 자료
설계변경 근거	방 침	업무연락전 SMIH-14-38149호(2014. 9.23)-실정보고 승인알림
	관련규정	지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1 - 가 – 2) (현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	"남부순환로~오정대로간 도로개설공사"를 시행함에 있어 STA.NO.0+220,STA.NO.0+390 구간의 기존수로 바닥에 퇴적된 지반에 의한 장.단기적인 침하량을 최소화하기 위하여 비교 검토 방안중 가장 적합한 방안(구입암 성토를 한후 양질토사로 되메우고 다짐)으로 지반을 처리함을 반영함
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행 여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 검토요청(기존수로구간 불량지반 처리방안 검토요청에 대한 회신) – 천호수 제2014-546호(2014.8.25.)

· 현장실정보고(기존수로구간 퇴적지반 처리)제출 – 오정 제2014-180호(2014.8.25)

· 업무연락전 SMIH-14-38149호(2014. 9.23)- 실정보고 승인알림