시설물 유지관리 실적 및 계획

□ 단일공사

시설물명	2021 실적			2022 계획
	보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합 계		3,297			2,427
가락 지하차도	-가락지하차도 보수공사 ․강성포장 2,700㎡ ․단면보수 2,160㎡	1,430	‘20.10.12~ ’21.10.29
탄천교	-탄천교 보수공사 ․교면포장 60.2a ․상판보수 2,034.6㎡	1,867	‘21.4.19~ ’21.11.03
영동3교	-영동3교 보수공사 (공사계약)	0	‘21.12.17~ ’22.10.31	-영동3교 보수공사 ․LMC포장 52.22a ․단면보수 118.1㎡	2,097	‘21.12.17~ ’22.10.31
위례터널				-위례터널 보수공사 ․유공관 교체 200m	330	‘22.04.01~ ’22.09.30

□ 일상유지보수공사(연간단가)

시설물명 (교량)	2021 실적			2022 계획
	보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합계		789.253			1,390
소계		376.053			849.7
여의천교	주입보수 0.3m 단면보수 0.01㎡ 수밀코킹 36.9m 배수구뚜껑교체 10개소	1.7	1.25~12.15 (2,3차)
광평교	투명방음판 교체 1개소 조류방지시설물설치 882㎡ 소파포장복구 21.8㎡ 강관배관 4m 표면보수 48.8㎡ 논슬립교체 70m	93.0	1.25~12.15 (2,3,5,8차)
대곡교	강관배관 교체 28m 주입보수 8.2㎡ 단면보수 28.4㎡ 누수차단장치 20m 교량받침 재도장 84개소 표면보수 80.5㎡ 강관배관 15.2㎡	28.8	1.25~12.15 (1,3,4,5차)	ASP균열보수 421.8m 단면보수 8.19㎡ 주입보수 18.46m	109.5	1.01~12.31
삼성교	메타조인트 설치 24m 주입보수 57.8m 단면보수 12.44㎡ 난간지주설치 1개소 조합폐인트칠 0.2㎡ 소파포장복구 173㎡ 신축이음 보수 30.6m 차선도색 126.75m	160.137	1.25~12.15 (2,4차)	주입보수 50.16m 단면보수 285.64㎡ 표면보수 377.3㎡	200.8	1.01~12.31
헌릉교	주입보수 9.8m	0.7	1.25~12.15 (4차)	주입보수 15.36m 단면보수 56.3㎡ 표면보수 7.19㎡ 후타재보수 39.83㎡	38.6	1.01~12.31
잠실호수교	주입보수 1m 단면보수 1.56㎡	0.6	1.25~12.15 (2,4차)	주입보수 1.3m 단면보수 3.7㎡	1.8	1.01~12.31
탄천교
세곡1교	표면보수 0.09㎡	0.006	1.25~12.15 (2차)
세곡3교	단면보수 0.25㎡	0.11	1.25~12.15 (5차)
복정2교	표면보수 7㎡ 교각표지판정비 1식	0.7	1.25~12.15 (3,5,8차)
서부교
장지2교
탄천2교	주입보수 9.7m 표면보수 71.1㎡ 단면보수 40.5㎡ 소규모포장보수 4㎡	31.4	1.25~12.15 (2,5,8차)
성내교	배수관정비 1식 차량방호책 단부 설치 1식 점검계단 설치 4개소	58.9	1.25~12.15 (1,3,5,8차)	단면보수 2.48㎡ 주입보수 8.97m 신축이음 보수 214.9m	499	1.01~12.31

시설물명 (교량)	2021 실적			2022 계획
	보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
소계		413.2			540.3
대치교	배수홈통 정비 1식 강관배관 20.5m 표면보수 3㎡ 단면보수 2.86㎡	6.7	1.25~12.15 (2,3,4차)	표면보수 48.84㎡ 주입보수 12.86m 단면보수 10.5㎡	17.2	1.01~12.31
영동2교	배수관정비 1식 아스팔트균열 19m 수밀코팅 0.3m	1.6	1.25~12.15 (1,3차)
영동3교	후타재보수 104.8m	66.5	1.25~12.15 (1차)	주입보수 252m 단면보수 56.36㎡ 구조물보강 288㎡	496.9	1.01~12.31
영동5교	후타재보수 63.8m 방호울타리정비 1식 강관배관 11m	45.4	1.25~12.15 (1,2,3차)
오륜교	미끄럼방지공 설치 23.4㎡ 주입보수 2.2m 자전거도로정비 1식 난간,표지판등 정비 1식	0.5	1.25~12.15 (1,4,5,8차)
강일육교	능형망휀스 설치 56경간 운행재한표지판 4개소 운행재한현수막 3개소	16.0	1.25~12.15 (8차)
고덕교				받침상부 재도장 12ea	0.2	1.01~12.31
상일2교				실링재 재시공 2.5m 주입보수 0.45m 단면보수 4.46㎡ 유도배수시설 30m	25.0	1.01~12.31
성내5교	신축이음 보수 48.4m 표면보수 7㎡	51.3	1.25~12.15 (2차)
장지1교	유도배수로 교체 3m 울타리,난간정비 1식 주입보수 1.5m	0.9	1.25~12.15 (2,4,8차)	배수구정비 2개소 주입보수 9.8m	1	1.01~12.31
방이고가	신축이음 보수 30.5m 방호벽차수조인트 2.4m 단면보수 0.78㎡ 조합페인트칠 0.75㎡ 절삭후아스팔트 덧씌우기 9.97a	224.3	1.25~12.15 (2,5,7,,8차)

시설물명 (터널,지하차도 등)		2021 실적			2022계획
		보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합계			1,612.68			1,300
소계			470.478			123.1
터널	매 봉	타일철거 및 붙임 0.31㎡ 강재바탕처리 19.8㎡ 철재기둥 페인트칠 39.6㎡ 아스팔트포장 26a 택코팅 26a 상판보수 57.1㎡ 차선도색(백색) 654m 차선도색(황색) 510m 점검사다리설치 2개소 강화유리철거 및 설치 1개소	200.7	2021.03.31 ~12.18 (2차,7차,10차)	균열보수 418.5m 단면보수 t=10mm 26.1㎡ 단면보수 t=20mm 4.88㎡ 단면보수 t=30mm 0.08㎡ 섬유보강 0.49㎡ 타일재설치 1.18㎡ 유공관설치 32.4m	70.1	1.05~ 12.31
	일 원	반사경설치 12개소 강화유리철거 및 설치 2개소	9.478	2021.10.19 ~11.30 (8차)	균열보수(건식) 152.6m 균열보수(습식) 10.8m 단면보수 t=10mm 5.3㎡	20	1.05~ 12.31
	위 례	배수로퇴적물청소 56㎡ 신축이음보수 7m 유도배수판설치 17.6m 하수관준설 8.8㎥ 준설토처리 13.2ton 준설토운반 13.2ton 아스팔트포장절단 100m 무근콘크리트깨기 60㎥ 소파포장복구 72㎡ 택코팅 0.72a PC방호벽설치 8ea 신구콘크리트접착제 120㎡ 초속경콘크리트타설 60㎥ 유공관설치 100m 다웰바설치 16ea 타이바설치 223ea 하수관준설 및 CCTV촬영 100m 배수로청소 28㎡ 표지판재설치 1개소 차선도색(백색) 4880m 차선도색(황색) 2440m CCTV촬영 1식	220.8	2021.02.06 ~08.30 (1차,2차,4차, 5차,8차)	유공관교체 200m 균열보수(건식) 268.8m 단면보수 t=30mm 0.06㎡ 골재포설+재포장 420㎡ 신축이음 및 유도배수관설치 18m 탄성조인트설치 18m	20	1.05~ 12.31
지하차도	석촌	균열보수 1.6m 잡철물제작 및 설치 16.9kg 난간파이프교체 12m 배수홈통철거 및 설치 2m 충격흡수시설보수 1개소	7.4	2021.02.06 ~12.18 (1차,6차,10차)	균열보수(건식) 17.9m 균열보수(습식) 3.6m 단면보수 t=30mm 6㎡ 신축이음보수 15.6m	13	1.05~ 12.31
	청계산	타일붙임 0.5㎡ 도로표지병설치 24개소 차선규제봉설치 15개소	1.7	2021.07.12 ~08.30 (5차)
	신 원	신축이음보수 24m 점검로발판철거 2개 스틸그레이팅설치 2개 타일붙임 0.9㎡ 도로표지병설치 49개소 차선규제봉설치 26개소	19.8	2021.07.09 ~08.30 (4차,5차)
	신원 지하차도 관리동	무근콘크리트깨기 0.47㎥ 수밀코킹 40.3m U형배수로철거 8본 U형배수로설치 8본 렉산캐노피설치 1개소 인력다짐 0.76㎥ 배수로시트방수 1.7㎡ 콘크리트타설 0.47㎥	10.6	2021.06.02 ~08.31 (3차)

시설물명 (터널,지하차도 등)		2021 실적			2022계획
		보 수 내 용	집행액 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
소계			1,142.2			1,176.9
지하차도	내 곡
	신원박스
	가 락	단면보수 t=10mm 120㎡ 표면보수 t=1mm 3.3㎡	40.9	2021.11.02 ~12.18 (9차,10차)	균열보수(건식) 109.8m 단면보수 t=10mm 53.1㎡ 단면보수 t=20mm 0.24㎡ 단면보수 t=30mm 0.54㎡	30	1.05~ 12.31
	천 호				균열보수(건식) 7.8m 단면보수 t=10mm 14.9㎡	4.8	1.05~ 12.31
	대 치	기전반 출입문설치 1개소	3.3	2021.10.19 ~11.30 (8차)	아스팔트 포장 37.6a 균열보수(건식) 16.5m 단면보수 t=30mm 1.7㎡ 신축이음보수 104m 스틸그레이팅설치 15개소	299.5	1.05~ 12.31
	송 파	아스팔트포장 81.6a 택코팅 81.6a 유공관 및 성형줄눈 800m 성형줄눈 800m 주입줄눈 1600m 단면보수 t=30mm 0.75㎡ 타일철거 및 붙임 0.58㎡ 차선도색(백색) 1624m 차선도색(황색) 800m 차선도색(청색) 1600m 타일철거 및 붙임 0.5㎡ 배수로퇴적물청소 1.4㎡	391.2	2021.06.02 ~12.18 (3차,10차)
	위례지하 보·차도				유도배수관시공 84m	27.1	1.05~ 12.31
	위례중앙	강화유리철거 및 설치 1개소 하수관준설 6.9㎥ 준설토처리 10.35ton 준설토운반 10.35ton 배수로퇴적물청소 52㎡ 점검로발판철거 1개 점검로발판설치 1개	13.5	2021.02.06 ~03.26 (1차,2차)
	석촌지하차도외11개소	우회도로간판설치 20개소	11.8
성내 유수지교		단면보수 t=10mm 0.12㎡ 난간파이프교체 9.5m 신축이음보수 48m 콘크리트단면보수 0.13㎡	73.5	2021.03.31 ~11.30 (2차,4차,8차)	단면보수 t=10mm 2.7㎡ 신축이음보수 42m	87.5	1.05~ 12.31
터널 지하차도		터널 및 지하차도 세척 -터널: 일원,매봉,위례 -지하차도:석촌,청계산,F램프,염곡IC-A,염곡IC-B, 파인시티-C,위례중앙	608	2021.04.13 ~12.07	터널 및 지하차도 세척 -터널: 일원,매봉,위례 -지하차도:석촌,청계산,F램프,염곡IC-A,염곡IC-B,파인시티-C,위례중앙	728	22.04.01.~12.31