설계변경 자문회의 결과에 대한 조치계획 검토의견

【전구간 육상구조물 확인보링 변경시행】

2 0 1 4.  1 2

월드컵대교 건설공사

(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2014. 12
현 장 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	전구간 육상구조물 확인보링 변경시행

1. 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

2. 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동(증산로) ~ 영등포구 양평동(서부간선도로)

3. 공사종류  : 교량신설

4. 사업개요  : 총연장 L=1,980M(주경간교 855M)

폭  원 B=31.4M(왕복 6차로)

연결로 : 5개소/4,030M(북단)

6개소/2,893M(남단)

5. 공사기간  : 2010년 03월 22일~2015년 08월 22일(66개월)

6. 도 급 자 : 삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

7. 설계변경 자문회의(소위원회) 심의 지적사항에 따른 조치현황

(단위 : 원)

구 분	심 의 지 적 사 항	조 치 결 과	증.감액	비 고
전구간 육상구조물 확인보링 변경시행	○설계당시 구조물과 근접된 보오링에 대해서는 설계사와 협의하여 과다 보링이 되지 않도록 적정성 여부를 재검토하여 반영할 것	○육상구간 구조물 위치의 지반 확인결과 연암상단의 차이가 12m 발생하여, 타 주요구조물의 위치에 추가 확인보링이 필요할 것으로 판단되어 실정보고함.	-	첨부 #4
	○당초 실시설계시 시방서 대로 육상구간 구조물 위 치에 지질조사를 시행하지 않은 이유를 보완할 것	○설계사 의견 첨부.	-	첨부 #5
	○기타, 시추공 되메우기는 지하수 오염이 발생되지 않도록 폐공처리기준을 준 수하여 처리할 것	○준수하여 처리 하겠음.
소 계

8. 설계변경 자문회의(소위원회) 결과에 따른 공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	자문 요청금액 (A)	설계변경 자문회의 절감금액 (B)	최종 반영금액 (C=A-B)	비 고
전구간 육상구조물 확인보링 변경시행	254,180,000	-	254,180,000

9. 검토결과

월드컵대교 건설공사 전구간 육상구조물 확인보링 변경시행 실정보고는 발주처 승인 및     설계변경 자문회의(소위원회)가 완료된 상태로서,

설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항에 대하여 보완 조치하였으며 발주처 조치계획 보고   후 추후 설계변경시 반영하고자 함.

검토자 : 책임감리원 김 동 귀(인)