8호선 추가역 사업개요

□ 사업개요

○ 근    거 : 위례신도시 광역교통개선대책사업

○ 위    치 : 8호선 복정역~산성역 사이

(성남시 복정동 57번지 개발제한구역 일원)

○ 규    모 : 지상 3층 정거장

(부지면적 12,910㎡, 연면적 4,202㎡)

○ 총사업비 : 460억 원 (LH공사)

○ 시 행 자 : 서 울 교 통 공 사

□ 추가역 조감도 및 위치도

○ ‘14.05.13. : 광역교통개선대책(변경) 확정

○ ‘16.07.25. : 개발제한구역 관리계획변경인가 승인

○ ‘17.08.14. : 도시관리계획(철도)결정 및 지형도면 고시

○ ‘18.04.16.  : 실시계획인가 고시

○ ‘19.09.04. : 토지(사유지) 보상완료 통보(LH공사)

○ ‘19.12.03. : 도시관리계획(철도) 변경결정 및 실시계획 변경인가 고시

○ ‘19.12.06. : 개발제한구역 내 행위허가

○ ‘20.01.10. : 건축토목공사 착공

□ 향후 계획

○ 추진 목표

- 2021년 6월 말까지 모든 공사를 완료하고, 약 5개월간 종합시험운행 후 2021년 12월 역사 개통

역 사 분 야		설 계		공 사
		완 료		‘20.1.~’21.6.		종합시험 운행		개 통
시스템 분 야 (차량 포함)		설 계		공 사
						‘21.7.~’21.11.		‘21.12.
		일부 진행 중		‘20.3.~’21.6.

추가역 조감도

복정택지지구 상관도