〈제출서식 2〉하천내 공사장 현황(각 부서,자치구 포함)

연번	공 사 개 요					비상연락망				추 진 현 황
	사 업 명 (공사 명)	위 치	규 모	공사기간	시행부서	업무담당명 전화번호	감리사 감리단장명 전화번호	시공사 현장대리인명 전화번호	현장사무실	공정율 (%)	현 공 정
1	잠원2빗물 펌프장 신설공사	강남구 강남대로 708	-관로부설 640m 방류 및 유출수문 설치	‘13.1.3 ~ ‘16.12,31	도시기반 시설본부 방재시설부	이병환 *************	㈜신명건설기술공사 허종만 *************	에스트건설(주) 이충진 *************	3446-8386	71	-유출, 방류수문 설치 -관로(2□3x2.5~1.5m) 640m중 470m 부설 ※ 하천내 관로(156m) 전량 부설 완료
2	용두3 빗물 펌프장 신설공사	동대문구 용두동 255-43호	펌프장 신설 170㎥3/분 유입관거 부설 185m	‘13.1.3 ~ ‘16.6.30	도시기반 시설본부 방재시설부	노태학 *************	서울시설공단 홍창문 *************	동도건설(주) 이성준 *************	927-4027	93	-펌프장 구종물 설치