			지역발전본부

1. 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율

(1) 연 번	지역발전본부 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		김남식		전화번호	2133-8236
(4) 상위 전략목표	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(5) 전략/성과목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		15
(9) 지 표 산 식	○ 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 잠실종합운동장내 주, 보조경기장 - 총 사업기간 : 2015.11 ~ 2018. 12 - 기간 : 기본계획 ‘16. 8 ~ ’17. 9. 설계용역 ‘17. 8 ~ ’18. 12. - 진행 : 기본계획 수립완료 → 설계공모 착수 → 공모공고 → 당선작발표 → 기본구상 설계 → 설계용역추진 ○ 사업추진계획 - 타당성조사 완료(20%) - 기본계획수립 완료(50%) - 설계공모 공고(70%) - 설계공모 당선작 발표 (80%) - 기본구상 설계 (90%) - 설계용역 추진(100%) ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		-
	2016년(Y-2) 실적		20%
	2017년(Y-1) 실적		50%
	2018년(Y) 목표		90%
	2019년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정 4개년 계획 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	80%				90%

2. 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율

(1) 연 번	지역발전본부 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		우종우		전화번호	2133-8267
(4) 상위 전략목표	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(5) 전략/성과목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		25
(9) 지 표 산 식	영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진률
(10) 정의 및 설명	○ 주요내용 - 분야별 기본설계 및 관계기관 협의 - 복합환승센터 지정∙고시 및 분야별 제 영향평가 등 행정절차 시행 ○ 추진 계획 - 1/4분기 (23%) : 기본설계 착수 및 시∙중앙투자심사 완료 - 2/4분기 (50%) : 교통∙환경∙안전 제 영향평가, 추진협의체 등 거버넌스 운영 - 3/4분기 (75%) : 국토부-서울시 건설협약 체결, 통합운영방안 수립 - 4/4분기 (90%) : 복합환승센터 개발실시계획 수립, 착공 사전절차 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적		-
	2017년(Y-1) 실적		-
	2018년(Y) 목표		90%
	2019년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기
	40%				90%

3. 창동·상계 신경제중심지 조성 사업 추진율

(1) 연 번	지역발전본부 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북권사업반	담당자		강대양		전화번호	2133-8284
(4) 상위 전략목표	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		창동·상계신경제중심지 조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	동북권 일자리·문화중심의 신경제거점 조성
(6) 2018년 목표값	40	(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치		15
(9) 지 표 산 식	2018년 단위사업별 추진공정율(업무비중에 따라 가중치 부여)
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : 2017. ∼ 2021.12. ○ 사업내용 : 마중물사업에 대한 공사 착공과 및 기반시설 조성사업 기반 구축 - 추진공정 : 타당성조사(10%) - 설계공모(15%) - 투자심사(17%) - 기본 및실시설계(20%) - 공사착공(45%)- 준공(100%) ○ 2018년도 단위사업별 추진 공정율 ① 동북권 창업센터건립 등 (비중 40%) - 설계공모(15%) - 설계자선정(17%) - 기본및실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 공사준공(100%) ② 문화예술공방 조성 (비중 17%) - 기본계획(15%) - 기본 및 실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 공사준공(100%) ③ 문화예술테마거리 조성 (비중 3%) : 기본 및 실시설계(20%) – 공사착공(45%) - 준공(100%) ④ 동부간선도로(창동·상계구간) 지하차도건설 (1단계) (비중25%) - 타당성조사(10%) - 투자심사(15%) - 기본및실시설계(20%) - 공사착공(45%) ⑤ 창동·상계 동서간 연계 보행교량 건설(1단계) (비중15%) - 타당성조사(10%) - 투자심사(15%) - 기본 및 실시설계(20%) ⑥ 마들로11길, 상계로변 가로환경개선 (비중10%) - 기본계획(10%) - 실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 준공(100%) ▶ 2018년도 공정율 값 = ①추진공정×비중 ………+⑥추진공정×비중 ○ 2018년 추진계획 : 40%, - 1/4분기(26%) : 창업 및 문화산업단지 국제설계공모(1단계) 추진 - 2/4분기(30%) : 세대융합형 복합화 기본 및 실시설계 및 공사착공 - 3/4분기(34%) : 문화예술공방 조성공사 완료 - 4/4분기(40%) : 서울아레나 적격성조사 및 의회 동의, 제3자제안공고 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2014년(Y-4) 실적		10%
	2015년(Y-3) 실적		80%
	2016년(Y-2) 실적		100%(활성화계획수립 완료)
	2017년(Y-1) 목표		22%
	2018년 목표		40%
	2019년(Y+1) 목표		60%
	목표값 설정근거		조성사업 공정율(마중물사업)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	30				40

4. 마곡 공공산업지원시설 건립 추진율

(1) 연 번	지역발전본부 – 4
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서남권사업과	담당자		엄태민		전화번호	2133-1516
(4) 상위 전략목표	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		창동·상계신경제중심지 조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	신성장동력 경제거점 육성 및 주민 생활기반 강화
(6) 2018년 목표값	67	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		15
(9) 지 표 산 식	공정 추진기간/준공까지 총 소요기간
(10) 정의 및 설명	○ 목표달성 지표 확인수단 : 추진목표 대비 달성결과 ① 공공산업지원시설 건립 계획수립(비중 33%) : 24개월 - ’15년 : 타당성조사(~6개월, 25%), 추진방침 수립 및 기본계획 용역(~13개월, 54%) - ‘16년 : 투자심사, 설계공모 및 건축자문 등 사전절차 이행(~24개월, 100%) ② 설계 및 공사(비중 67%) : 49개월 - ’17년 : 기본설계(~13개월, 27%), - ’18년 : 실시설계(~17개월, 35%), 공사착공 및 연차별 공사(~25개월, 51%), - ’19년 : 연차별 공사(~37개월, 76%), - ’20년 : 공사준공(~49개월, 100%) ▶ 2018년 공정률 값: (①×비중+②×비중)
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		18
	2016년(Y-2) 실적		33
	2017년(Y-1) 실적		51
	2018년(Y) 목표		67
	2019년(Y+1) 목표		84
	목표값 설정근거		※ 시정4개년 계획 일반과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	59%				67%

5. 수색역 일대 도시개발 활성화 수립 추진율

(1) 연 번	지역발전본부 - 5
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서북권사업과	담당자		장종희		전화번호	2133-1555
(4) 상위 전략목표	옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울			상위 KPI		창동·상계신경제중심지 조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	역사문화도심 위상 강화 및 미래 먹거리를 창출하는 수색·서북권 경제거점 육성
(6) 2018년 목표값	100	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		10
(9) 지 표 산 식	수색역 일대 도시개발활성화 수립 공정률로 산정
(10) 정의 및 설명	□ 사업목적 ○ 수색역 일대 개발 추진 - 철도로 단절된 상암·수색을 연계하여 사업추진 기틀 마련으로 민간 투자촉진 및 지역경제 활성화 - 철도부지 개발에 따라 DMC의 기능 확장, 보완 및 광역중심기능 확충 □ 사업개요 ○ 기 간 - 2017.11. ~ 2018.12. ○ 추진내용 - 구역별 개발계획(안)에 대한 코레일 공동 수립 - 사업시행 방안 도출 ○ 총사업비 : 445백만원 □ 향후계획 ○ 사전협상 추진을 위한 기틀마련(시-코레일 실무협의) ○ 사업자 공모 및 사업추진 방안 실무 협의 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적		10
	2017년(Y-1) 실적		70
	2018년(Y) 목표		100
	2019년(Y+1) 목표		-
	목표값 설정근거		시정4개년계획 일반과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	80				100

			동남권사업단

1. 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율

(1) 연 번	동남권사업단 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		김남식		전화번호	2133-8236
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율
(5) 전략/성과목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		35
(9) 지 표 산 식	○ 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 잠실종합운동장내 주, 보조경기장 - 총 사업기간 : 2015.11 ~ 2018. 12 - 기간 : 기본계획 ‘16. 8 ~ ’17. 9. 설계용역 ‘17. 8 ~ ’18. 12. - 진행 : 기본계획 수립완료 → 설계공모 착수 → 공모공고 → 당선작발표 → 기본구상 설계 → 설계용역추진 ○ 사업추진계획 - 타당성조사 완료(20%) - 기본계획수립 완료(50%) - 설계공모 공고(70%) - 설계공모 당선작 발표 (80%) - 기본구상 설계 (90%) - 설계용역 추진(100%) ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		-
	2016년(Y-2) 실적		20%
	2017년(Y-1) 실적		50%
	2018년(Y) 목표		90%
	2019년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정 4개년 계획 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	80%				90%

2. 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율

(1) 연 번	동남권사업단 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		우종우		전화번호	2133-8267
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(5) 전략/성과목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		45
(9) 지 표 산 식	영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진률
(10) 정의 및 설명	○ 주요내용 - 분야별 기본설계 및 관계기관 협의 - 복합환승센터 지정∙고시 및 분야별 제 영향평가 등 행정절차 시행 ○ 추진 계획 - 1/4분기 (23%) : 기본설계 착수 및 시∙중앙투자심사 완료 - 2/4분기 (50%) : 교통∙환경∙안전 제 영향평가, 추진협의체 등 거버넌스 운영 - 3/4분기 (75%) : 국토부-서울시 건설협약 체결, 통합운영방안 수립 - 4/4분기 (90%) : 복합환승센터 개발실시계획 수립, 착공 사전절차 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적		-
	2017년(Y-1) 실적		-
	2018년(Y) 목표		90%
	2019년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기
	40%				90%

			동남권계획반

1. 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율

(1) 연 번	동남권계획반 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		김남식		전화번호	2133-8236
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		50
(9) 지 표 산 식	○ 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 잠실종합운동장내 주, 보조경기장 - 총 사업기간 : 2015.11 ~ 2018. 12 - 기간 : 기본계획 ‘16. 8 ~ ’17. 9. 설계용역 ‘17. 8 ~ ’18. 12. - 진행 : 기본계획 수립완료 → 설계공모 착수 → 공모공고 → 당선작발표 → 기본구상 설계 → 설계용역추진 ○ 사업추진계획 - 타당성조사 완료(20%) - 기본계획수립 완료(50%) - 설계공모 공고(70%) - 설계공모 당선작 발표 (80%) - 기본구상 설계 (90%) - 설계용역 추진(100%) ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		-
	2016년(Y-2) 실적		20%
	2017년(Y-1) 실적		50%
	2018년(Y) 목표		90%
	2019년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정 4개년 계획 핵심과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	80%				90%

2. 국제교류복합지구 시민참여관 및 홈페이지 방문자 수

(1) 연 번	동남권계획반 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권계획반	담당자		김학두 임경민		전화번호		2133-8237 2133-8228
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	80,000	(7) 단 위		명		(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	○ 국제교류복합지구 시민참여관 및 홈페이지 방문객 수
(10) 정의 및 설명	1. 국제교류복합지구 시민참여관 운영 ○ 기 간 : '17.11. ~ '25.7.(신축야구장 완공 후 운영방안 추후 검토) ○ 방 법 : 직영(기간제 근로자 3명), ’19년도 민간위탁 예정 ○ 개 관 : 매주 화~일요일, 10시~19시(월요일․공휴일 휴관) ○ 추진내용 - 견학․체험 프로그램 운영, 및 시민과의 소통 장소로 활용 ○ 총사업비 - ’18년도 예산 : 219백만원(인건비 117, 운영비 102) ○ 목표달성 지표 확인수단 : 방문자 카운트, 각종 프로그램 결과보고서 등 2. 국제교류복합지구 홈페이지 운영 ○ 기 간 : ’18. 1 ~ 12월 ○ 추진내용 - 국제교류복합지구 사업과 관련된 각종 정보 업데이트 및 소통·참여 기회 제공 ○ 총사업비 : 42백만원 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 웹로그시스템 방문자 수 측정
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적
	2017년(Y-1) 실적		6,841
	2018년(Y) 목표		80,000
	2019년(Y+1) 목표		120,000
	목표값 설정근거		’18년 국제교류복합지구 시민참여관 운영계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( ■ )
	실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( ■ )
	상 반 기						하 반 기
	-						80,000명

			동남권조성반

1. 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율

(1) 연 번	동남권조성반 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		우종우		전화번호	2133-8267
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	90	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		40
(9) 지 표 산 식	영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 주요내용 - 분야별 기본설계 및 관계기관 협의 - 복합환승센터 지정∙고시 및 분야별 제 영향평가 등 행정절차 시행 ○ 추진 계획 - 1/4분기 (23%) : 기본설계 착수 및 시∙중앙투자심사 완료 - 2/4분기 (50%) : 교통∙환경∙안전 제 영향평가, 추진협의체 등 거버넌스 운영 - 3/4분기 (75%) : 국토부-서울시 건설협약 체결, 통합운영방안 수립 - 4/4분기 (90%) : 복합환승센터 개발실시계획 수립, 착공 사전절차 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적		-
	2017년(Y-1) 실적		-
	2018년(Y) 목표		90%
	2019년(Y+1) 목표		100%
	목표값 설정근거		시정4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기
	40%				90%

2. 잠실종합운동장 일대 민간제안 등 추진율

(1) 연 번	동남권조성반 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		백대열		전화번호	2133-8272
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류 복합지구 조성			상위 KPI		영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	100	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		25
(9) 지 표 산 식	잠실종합운동장 일대 민간제안 등 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 - 국제교류복합지구의 핵심공간인 잠실종합운동장 일대를 전시·컨벤션, 스포츠, 엔터테인먼트, 수변 문화여가가 어우러진 글로벌 마이스 거점으로 조성 - 민간자본을 활용하고 민간의 아이디어를 적극 반영하여 혁신적·창의적 공간으로 구현하기 위해 민간투자사업으로 추진 ○ 사업개요 - 사업기간 : 2016년 ~ 2025년 - 총사업비 : 2조 2,280억원 (전액민자, 제안서기준) ○ 사업방식 : 민간투자사업 BTO방식(Build-Transfer-Operate) ○ 추진 계획 - 1/4분기 (25%) : 부속시설 축소(안) 검토, PIMAC 적격성조사 협의 - 2/4분기 (60%) : 제3자 제안공고(안) 작성용역 중간보고 - 3/4분기 (85%) : 산업경제위원회 자문, 제3자 제안공고(안) 용역 최종보고 - 4/4분기(100%) : 산업경제위원회 자문 및 제3자 제안공고(안) 마련 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		-
	2016년(Y-2) 실적		40
	2017년(Y-1) 실적		80
	2018년(Y) 목표		100
	2019년(Y+1) 목표		-
	목표값 설정근거		시정4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기
	90%				100%

3. 현대자동차부지 개발사업 추진율

(1) 연 번	동남권조성반 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동남권조성반	담당자		이희원		전화번호	2133-8266
(4) 상위 전략목표	도시경쟁력 강화를 위한 국제교류복합지구 조성			상위 KPI		영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 추진율
(5) 전략/성과목표	동남권 국제교류복합지구 조성
(6) 2018년 목표값	100	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		15
(9) 지 표 산 식	○ 현대자동차부지 개발사업 추진율 - 전체 추진계획 대비 추진한 실적으로 평가
(10) 정의 및 설명	○ 사업개요 - 대상 : 현대자동차부지 개발사업 추진 - 기간 : `15.1 ~ `18.12. - 진행 : 도시계획변경 사전협상 (`15.1~`16.2) → 지구단위계획 수립(`16.2~10) → 건축심의, 각종영향평가(`17.1~`18.4) → 지구단위계획 결정(변경)고시 공공기여 이행협약 체결 및 건축허가·착공(`18.5~12) ○ 추진계획 - 1/4분기 : 교통/환경 등 영향평가 검토 및 지원, 수도권정비 실무심의 - 2/4분기 : 건축허가 협의 및 지원, 수도권정비 본심의 - 3/4분기 : 지구단위계획 결정(변경) 고시, 공공기여 이행협약 체결 및 건축허가 - 4/4분기 : 구조안전/굴토 심의, 건축공사 착공 검토 및 지원 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		10%
	2016년(Y-2) 실적		40%
	2017년(Y-1) 실적		60%
	2018년(Y) 목표		100%
	2019년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거		시정4개년계획
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기
	65%				100%

			동북권사업단

1. 창동·상계 신경제중심지 조성 사업 추진율

(1) 연 번	동북권사업단 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북권사업반	담당자		강대양		전화번호	2133-8284
(4) 상위 전략목표	동북권 일자리·문화중심의 신경제 거점 조성			상위 KPI		창동·상계신경제중심지조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	대규모 가용부지를 활용 일자리 창출, 신경제중심지 조성
(6) 2018년 목표값	40	(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	2018년 단위사업별 추진공정율(업무비중에 따라 가중치 부여)
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : 2017. ∼ 2021.12. ○ 사업내용 : 마중물사업에 대한 공사 착공과 및 기반시설 조성사업 기반 구축 - 추진공정 : 타당성조사(10%) - 설계공모(15%) - 투자심사(17%) - 기본 및실시설계(20%) - 공사착공(45%)- 준공(100%) ○ 2018년도 단위사업별 추진 공정율 ① 동북권 창업센터건립 등 (비중 40%) - 설계공모(15%) - 설계자선정(17%) - 기본및실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 공사준공(100%) ② 문화예술공방 조성 (비중 17%) - 기본계획(15%) - 기본 및 실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 공사준공(100%) ③ 문화예술테마거리 조성 (비중 3%) : 기본 및 실시설계(20%) – 공사착공(45%) - 준공(100%) ④ 동부간선도로(창동·상계구간) 지하차도건설 (1단계) (비중25%) - 타당성조사(10%) - 투자심사(15%) - 기본및실시설계(20%) - 공사착공(45%) ⑤ 창동·상계 동서간 연계 보행교량 건설(1단계) (비중15%) - 타당성조사(10%) - 투자심사(15%) - 기본 및 실시설계(20%) ⑥ 마들로11길, 상계로변 가로환경개선 (비중10%) - 기본계획(10%) - 실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 준공(100%) ▶ 2018년도 공정율 값 = ①추진공정×비중 ………+⑥추진공정×비중 ○ 2018년 추진계획 : 40%, - 1/4분기(26%) : 창업 및 문화산업단지 국제설계공모(1단계) 추진 - 2/4분기(30%) : 세대융합형 복합화 기본 및 실시설계 및 공사착공 - 3/4분기(34%) : 문화예술공방 조성공사 완료 - 4/4분기(40%) : 서울아레나 적격성조사 및 의회 동의, 제3자제안공고 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2014년(Y-4) 실적		10%
	2015년(Y-3) 실적		80%
	2016년(Y-2) 실적		100%(활성화계획수립 완료)
	2017년(Y-1) 목표		22%
	2018년 목표		40%
	2019년(Y+1) 목표		60%
	목표값 설정근거		조성사업 공정율(마중물사업)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	30				40

2. 서울아레나 건립 추진 및 문화예술거점 조성계획 추진율

(1) 연 번	동북권사업단 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북권사업반	담당자		최승렬			전화번호		2133-8439
(4) 상위 전략목표	동북권 일자리·문화중심의 신경제거점 조성					상위 KPI		창동·상계신경제중심지조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	대규모 가용부지를 활용 일자리 창출, 신경제중심지 조성
(6) 2018년 목표값	68	(7) 단 위		%			(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	서울아레나 복합문화시설 건립 및 문화예술거점 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울아레나 건립 및 문화예술거점 조성 - 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업(민간제안) 추진 - 문화예술거점 조성방안 계획 수립 완료, 홍보 용역 수립 완료 - 플랫폼 창동61‘ 개장 2주년 및 서울아레나 홍보 행사 개최 ○ 추진방법 - 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업: 민간제안 방식 추진 - 플랫폼 창동61‘ 개장 2주년 및 서울아레나 홍보: 행사 개최 ○ 사업기간 : 2015. ∼ 2022. 12. - 창동․상계 신경제중심지 조성 1단계로 서울아레나 건립 추진 발표 (’15. 2.) - 서울아레나 복합문화시설 건립계획 수립(시장방침) (’15. 9.) - 서울아레나 민간제안서 접수 및 검토 (’15.11. ~ ’16. 1.) - 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 조사 (‘16. 1. ~ ‘18. 6.) - 플랫폼 창동 61 조성 및 운영 (‘16. 4. ~ 계속) - 문화예술거점 조성 계획 수립 및 용역추진 (‘16. 4. ~ ’17.11.) - 문화예술거점 조성 계획 수립 용역, 홍보 용역 완료 (‘17.11.) - 기획재정부 민간투자사업심의 및 시의회 동의 (‘18.12.) - 우선협상대상자 선정, 협상 체결 및 시의회 보고 (‘19. 9.) - 착공, 활성화 계획 수립･추진 및 준공 (‘19.12. ~ ‘22.12.) ○ 2015년 추진실적 : 15% - 1/4분기(5%) : 서울아레나 건립 계획 발표 - 3/4분기(3%) : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립 - 4/4분기(2%) : 민간투자사업 설명회 개최 및 서울아레나 국제포럼 ○ 2016년 추진실적 : 30% - 1/4분기(10%) : 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성검토 의뢰, 현장방문 - 2/4분기( 5%) : 문화예술거점 조성 계획 수립 착수보고 및 추진 ○ 2017년 추진실적 : 48% - 2/4분기( 5%) : 문화예술거접 조성 방안 수립, 홍보 용역 완료 - 4/4분기( 5%) : 서울아레나 적격성 조사 진행, 국정운영 5개년계획 선정 ○ 2018년 추진계획 : 68% - 2/4분기(14%) : 적격성 조사 완료, 플랫폼 창동 61 및 서울아레나 홍보 행사 개최 - 4/4분기( 6%) : 기재부 민투심의, 시의회 동의, 제3자제안공고 ○ 2019년 추진계획 : 88% - 2019년(20%) : 우선협상대상자 협상 체결, 공사착공 - 2020년~2022년(20%) : 공사진행, 활성화 방안 마련 및 공사완료
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		15
	2016년(Y-2) 실적		30
	2017년(Y-1) 실적		48
	2018년(Y) 목표		68
	2019년(Y+1) 목표		88
	목표값 설정근거		서울아레나 복합문화시설 건립 절차 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	62				68

3. 동북4구플랜 실행과제 추진율

(1) 연    번

동북권사업단 - 3

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

동북권사업반

담당자

나정일

전화번호

2133-8446

(4) 상위 전략목표

동북권 일자리·문화중심의 신경제
거점 조성

상위 KPI

창동·상계신경제중심지조성 사업 추진율

(5) 전략/성과목표

대규모 가용부지를 활용 일자리 창출, 신경제중심지 조성

(6) 2018년 목표값

67

(7) 지표단위

%

(8) 가 중 치

20

(9) 지 표 산 식

동북4구플랜 실행과제 추진율 (사업완료 실행과제수 / 총 실행과제)

(10) 정의 및 설명

○ 사업내용 : 7개 핵심과제, 72개 실행과제 관리

정책방향	7개 핵심과제	실행과제
계		72
지역발전기반조성	➊ 창동·상계 新경제중심지 조성	4
	➋ 도시계획 제도적 지원	4
	➌ 중랑천 중심의 녹색생활 환경 기반 강화	8
지역 자원활용	➍ 지식·교육특성화	16
	➎ 자연역사문화 관광벨트 조성	20
지역현안해소	➏ 문화·복지·체육시설 확충	11
	➐ 생활기반시설 개선	9

○ 2014년 추진실적 : 추진율 18% (13개 사업 완료)

○ 2015년 추진실적 : 추진율 43% (18개 사업 완료)

○ 2016년 추진실적 : 추진율 50% (5개 사업 완료)

○ 2017년 추진실적 : 추진율 60% (7개 사업 완료)

○ 2018년 추진계획 : 추진율 67% (5개 사업 완료)

- 1/4분기 : 동북4구 플랜 실행계획 점검 및 1분기 추진현황 보고

- 2/4분기 : 추진율 64%(3개 사업 완료), T/F운영, 2분기 추진현황 보고

- 3/4분기 : T/F운영, 신규과제 관리, 3분기 추진현황 보고

- 4/4분기 : 추진율 67%(2개 사업 완료), ‘18 추진현황 보고

(11) 실적 및 계획

2015년(Y-3) 실적

43%

2016년(Y-2) 실적

50%

2017년(Y-1) 실적

60%

2018년(Y)   목표

67%

2019년(Y+1) 목표

76%

목표값 설정근거

실행과제 추진율

(12) 실적입력방식

및 주기별 목표

실적입력주기 : 반  기(   ), 년( ■ )

실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값(   ),  합산값(   )

상반기

하반기

64%

67%

			동북권사업반

1. 창동·상계 신경제중심지 조성 사업 추진율

(1) 연 번	동북권사업반 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북권사업반	담당자		강대양		전화번호	2133-8284
(4) 상위 전략목표	대규모 가용부지를 활용 일자리 창출, 신경제중심지 조성			상위 KPI		창동·상계신경제중심지조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	일자리 생성 및 수도권 동북부 지역상생 및 균형발전 실현
(6) 2018년 목표값	40	(7) 지표단위		%		(8) 가 중 치		30
(9) 지 표 산 식	2018년 단위사업별 추진공정율(업무비중에 따라 가중치 부여)
(10) 정의 및 설명	○ 사업기간 : 2017. ∼ 2021.12. ○ 사업내용 : 마중물사업에 대한 공사 착공과 및 기반시설 조성사업 기반 구축 - 추진공정 : 타당성조사(10%) - 설계공모(15%) - 투자심사(17%) - 기본 및실시설계(20%) - 공사착공(45%)- 준공(100%) ○ 2018년도 단위사업별 추진 공정율 ① 동북권 창업센터건립 등 (비중 40%) - 설계공모(15%) - 설계자선정(17%) - 기본및실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 공사준공(100%) ② 문화예술공방 조성 (비중 17%) - 기본계획(15%) - 기본 및 실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 공사준공(100%) ③ 문화예술테마거리 조성 (비중 3%) : 기본 및 실시설계(20%) – 공사착공(45%) - 준공(100%) ④ 동부간선도로(창동·상계구간) 지하차도건설 (1단계) (비중25%) - 타당성조사(10%) - 투자심사(15%) - 기본및실시설계(20%) - 공사착공(45%) ⑤ 창동·상계 동서간 연계 보행교량 건설(1단계) (비중15%) - 타당성조사(10%) - 투자심사(15%) - 기본 및 실시설계(20%) ⑥ 마들로11길, 상계로변 가로환경개선 (비중10%) - 기본계획(10%) - 실시설계(20%) - 공사착공(45%) - 준공(100%) ▶ 2018년도 공정율 값 = ①추진공정×비중 ………+⑥추진공정×비중 ○ 2018년 추진계획 : 40%, - 1/4분기(26%) : 창업 및 문화산업단지 국제설계공모(1단계) 추진 - 2/4분기(30%) : 세대융합형 복합화 기본 및 실시설계 및 공사착공 - 3/4분기(34%) : 문화예술공방 조성공사 완료 - 4/4분기(40%) : 서울아레나 적격성조사 및 의회 동의, 제3자제안공고 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2014년(Y-4) 실적		10%
	2015년(Y-3) 실적		80%
	2016년(Y-2) 실적		100%(활성화계획수립 완료)
	2017년(Y-1) 목표		22%
	2018년 목표		40%
	2019년(Y+1) 목표		60%
	목표값 설정근거		조성사업 공정율(마중물사업)
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	30				40

2. 서울아레나 건립 추진 및 문화예술거점 조성계획 추진율

(1) 연 번	동북권사업반 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	동북권사업반	담당자		최승렬			전화번호		2133-8439
(4) 상위 전략목표	대규모 가용부지를 활용 일자리 창출, 신경제중심지 조성					상위 KPI		창동·상계신경제중심지조성 사업 추진율
(5) 전략/성과목표	일자리 생성 및 수도권 동북부 지역상생 및 균형발전 실현
(6) 2018년 목표값	68	(7) 단 위		%			(8) 가 중 치			30
(9) 지 표 산 식	서울아레나 복합문화시설 건립 및 문화예술거점 추진율
(10) 정의 및 설명	○ 사업내용 : 서울아레나 건립 및 문화예술거점 조성 - 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업(민간제안) 추진 - 문화예술거점 조성방안 계획 수립 완료, 홍보 용역 수립 완료 - 플랫폼 창동61‘ 개장 2주년 및 서울아레나 홍보 행사 개최 ○ 추진방법 - 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업: 민간제안 방식 추진 - 플랫폼 창동61‘ 개장 2주년 및 서울아레나 홍보: 행사 개최 ○ 사업기간 : 2015. ∼ 2022. 12. - 창동․상계 신경제중심지 조성 1단계로 서울아레나 건립 추진 발표 (’15. 2.) - 서울아레나 복합문화시설 건립계획 수립(시장방침) (’15. 9.) - 서울아레나 민간제안서 접수 및 검토 (’15.11. ~ ’16. 1.) - 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성 조사 (‘16. 1. ~ ‘18. 6.) - 플랫폼 창동 61 조성 및 운영 (‘16. 4. ~ 계속) - 문화예술거점 조성 계획 수립 및 용역추진 (‘16. 4. ~ ’17.11.) - 문화예술거점 조성 계획 수립 용역, 홍보 용역 완료 (‘17.11.) - 기획재정부 민간투자사업심의 및 시의회 동의 (‘18.12.) - 우선협상대상자 선정, 협상 체결 및 시의회 보고 (‘19. 9.) - 착공, 활성화 계획 수립･추진 및 준공 (‘19.12. ~ ‘22.12.) ○ 2015년 추진실적 : 15% - 1/4분기(5%) : 서울아레나 건립 계획 발표 - 3/4분기(3%) : 서울아레나 복합문화시설 건립 추진계획 수립 - 4/4분기(2%) : 민간투자사업 설명회 개최 및 서울아레나 국제포럼 ○ 2016년 추진실적 : 30% - 1/4분기(10%) : 서울아레나 복합문화시설 민간제안 적격성검토 의뢰, 현장방문 - 2/4분기( 5%) : 문화예술거접 조성 계획 수립 착수보고 및 추진 ○ 2017년 추진실적 : 48% - 2/4분기( 5%) : 문화예술거점 조성 방안 수립, 홍보 용역 완료 - 4/4분기( 5%) : 서울아레나 적격성 조사 진행, 국정운영 5개년계획 선정 ○ 2018년 추진계획 : 68% - 2/4분기(14%) : 적격성 조사 완료, 플랫폼 창동 61 및 서울아레나 홍보 행사 개최 - 4/4분기( 6%) : 기재부 민투심의, 시의회 동의, 제3자제안공고 ○ 2019년 추진계획 : 88% - 2019년(20%) : 우선협상대상자 협상 체결, 공사착공 - 2020년~2022년(20%) : 공사진행, 활성화 방안 마련 및 공사완료
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		15
	2016년(Y-2) 실적		30
	2017년(Y-1) 실적		48
	2018년(Y) 목표		68
	2019년(Y+1) 목표		88
	목표값 설정근거		서울아레나 복합문화시설 건립 절차 추진
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	62				68

3. 동북4구플랜 실행과제 추진율

(1) 연    번

동북권사업반 - 3

(2) 관    점

정책성과

(3) 부 서 명

동북권사업반

담당자

나정일

전화번호

2133-8446

(4) 상위 전략목표

대규모 가용부지를 활용 일자리
창출, 신경제중심지 조성

상위 KPI

창동·상계신경제중심지조성 사업 추진율

(5) 전략/성과목표

일자리 생성 및 수도권 동북부 지역상생 및 균형발전 실현

(6) 2018년 목표값

67

(7) 지표단위

%

(8) 가 중 치

20

(9) 지 표 산 식

동북4구플랜 실행과제 추진율 (사업완료 실행과제수 / 총 실행과제)

(10) 정의 및 설명

○ 사업내용 : 7개 핵심과제, 72개 실행과제 관리

정책방향	7개 핵심과제	실행과제
계		72
지역발전기반조성	➊ 창동·상계 新경제중심지 조성	4
	➋ 도시계획 제도적 지원	4
	➌ 중랑천 중심의 녹색생활 환경 기반 강화	8
지역 자원활용	➍ 지식·교육특성화	16
	➎ 자연역사문화 관광벨트 조성	20
지역현안해소	➏ 문화·복지·체육시설 확충	11
	➐ 생활기반시설 개선	9

○ 2014년 추진실적 : 추진율 18% (13개 사업 완료)

○ 2015년 추진실적 : 추진율 43% (18개 사업 완료)

○ 2016년 추진실적 : 추진율 50% (5개 사업 완료)

○ 2017년 추진실적 : 추진율 60% (7개 사업 완료)

○ 2018년 추진계획 : 추진율 67% (5개 사업 완료)

- 1/4분기 : 동북4구 플랜 실행계획 점검 및 1분기 추진현황 보고

- 2/4분기 : 추진율 64%(3개 사업 완료), T/F운영, 2분기 추진현황 보고

- 3/4분기 : T/F운영, 신규과제 관리, 3분기 추진현황 보고

- 4/4분기 : 추진율 67%(2개 사업 완료), ‘18 추진현황 보고

(11) 실적 및 계획

2015년(Y-3) 실적

43%

2016년(Y-2) 실적

50%

2017년(Y-1) 실적

60%

2018년(Y)   목표

67%

2019년(Y+1) 목표

76%

목표값 설정근거

실행과제 추진율

(12) 실적입력방식

및 주기별 목표

실적입력주기 : 반  기(   ), 년( ■ )

실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값(  ),  합산값(  )

상반기

하반기

64%

67%

			서남권사업과

1. 마곡 공공산업지원시설 건립 추진율

(1) 연 번	서남권사업과 – 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서남권사업과	담당자		엄태민		전화번호	2133-1516
(4) 상위 전략목표	신성장 산업 거점 육성 및 주민 생활기반 강화			상위 KPI		마곡 공공산업지원시설 건립 추진율
(5) 전략/성과목표	신성장동력 경제거점 조성
(6) 2018년 목표값	67	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		80
(9) 지 표 산 식	공정 추진기간/준공까지 총 소요기간
(10) 정의 및 설명	○ 목표달성 지표 확인수단 : 추진목표 대비 달성결과 ① 공공산업지원시설 건립 계획수립(비중 33%) : 24개월 - ’15년 : 타당성조사(~6개월, 25%), 추진방침 수립 및 기본계획 용역(~13개월, 54%) - ‘16년 : 투자심사, 설계공모 및 건축자문 등 사전절차 이행(~24개월, 100%) ② 설계 및 공사(비중 67%) : 49개월 - ’17년 : 기본설계(~13개월, 27%), - ’18년 : 실시설계(~17개월, 35%), 공사착공 및 연차별 공사(~25개월, 51%), - ’19년 : 연차별 공사(~37개월, 76%), - ’20년 : 공사준공(~49개월, 100%) ▶ 2018년 공정률 값: (①×비중+②×비중)
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적		18
	2016년(Y-2) 실적		33
	2017년(Y-1) 실적		51
	2018년(Y) 목표		67
	2019년(Y+1) 목표		84
	목표값 설정근거		※ 시정4개년 계획 일반과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	59%				67%

			서북권사업과

1. 수색역 일대 도시개발 활성화 수립 추진율

(1) 연 번	서북권사업과 - 1
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서북권사업과	담당자		장종희		전화번호	2133-1555
(4) 상위 전략목표	역사문화도심 위상 강화 및 미래 먹거리를 창출하는 수색·서북권 경제거점 육성			상위 KPI		수색역일대 도시개발 활성화 수립 추진율
(5) 전략/성과목표	미래 먹거리를 창출하는 수색·서북권 경제거점 육성
(6) 2018년 목표값	100	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		40
(9) 지 표 산 식	수색역 일대 도시개발활성화 수립 공정률로 산정
(10) 정의 및 설명	□ 사업목적 ○ 수색역 일대 개발 추진 - 철도로 단절된 상암·수색을 연계하여 사업추진 기틀 마련으로 민간 투자촉진 및 지역경제 활성화 - 철도부지 개발에 따라 DMC의 기능 확장, 보완 및 광역중심기능 확충 □ 사업개요 ○ 기 간 - 2017.11. ~ 2018.12. ○ 추진내용 - 구역별 개발계획(안)에 대한 코레일 공동 수립 - 사업시행 방안 도출 ○ 총사업비 : 445백만원 □ 향후계획 ○ 사전협상 추진을 위한 기틀마련(시-코레일 실무협의) ○ 사업자 공모 및 사업추진 방안 실무 협의 등
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적		10
	2017년(Y-1) 실적		70
	2018년(Y) 목표		100
	2019년(Y+1) 목표		-
	목표값 설정근거		시정4개년계획 일반과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	80				100

2. 지역거점 발전계획 수립 추진율

(1) 연 번	서북권사업과 - 2
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서북권사업과	담당자		전수미		전화번호	2133-1553
(4) 상위 전략목표	역사문화도심 위상 강화 및 미래 먹거리를 창출하는 수색·서북권 경제거점 육성			상위 KPI		수색역일대 도시개발 활성화 수립 추진율
(5) 전략/성과목표	미래 먹거리를 창출하는 수색·서북권 경제거점 육성
(6) 2018년 목표값	50	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		20
(9) 지 표 산 식	지역거점 발전계획 수립 추진율로 산정
(10) 정의 및 설명	□ 사업목적 ○ 서울시 신 성장 동력 창출을 위한 맞춤형 지역거점 발전계획 수립 - 권역별 산업경제기반형 지역거점사업 발굴 - 거버넌스 등 효율적 협업체계 방안 제시 □ 사업개요 ○ 기 간 - 2017. 11. ~ 2020. 8 ○ 추진내용 - 지역거점사업 선정기준 마련 및 사업 발굴, 거버넌스 구축 방안 마련 - 지역거점 사업선정 및 추진계획 작성 - 서북권 종합발전계획 수립 등 ○ 총사업비 : 535백만 원(계약금액) □ 향후계획 ○ 용역수행 및 지역거점사업 발굴
(11) 실적 및 계획	2015년(Y-3) 실적
	2016년(Y-2) 실적
	2017년(Y-1) 실적		10
	2018년(Y) 목표		50
	2019년(Y+1) 목표		80
	목표값 설정근거		추진율 기준
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상 반 기				하 반 기
	25				50

3. 세종대로 일대 역사문화특화공간조성 추진율

(1) 연 번	서북권사업과 - 3
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	서북권사업과	담당자		박경숙		전화번호	2133-1561
(4) 상위 전략목표	역사문화도심 위상 강화 및 미래 먹거리를 창출하는 수색·서북권 경제거점 육성			상위 KPI		수색역일대 도시개발 활성화 수립 추진율
(5) 전략/성과목표	역사문화도심 위상 강화
(6) 2018년 목표값	100	(7) 단 위		%		(8) 가 중 치		20
(9) 지 표 산 식	조성공사 사업추진 공정률로 산정
(10) 정의 및 설명	○ 2015년부터 2018년도까지 지속적으로 추진해나가야 하는 사업으로서, ‘15년도에는 철거와 광장설계, ‘16년도 문화재 발굴조사 및 지하공간 공사착공, ‘18년 지하공간 조성완료까지 공정을 나누어 산정 - '18. 4. : 건축공사 완료 - '18. 6. : 전시설계 및 제작․설치 공사 완료 ○ 목표달성 지표 확인수단 : 각종 보고서 및 공문서 등
(11) 실적 및 계획	2014년(Y-3) 실적		-
	2015년(Y-2) 실적		10
	2016년(Y-1) 실적		50
	2017년(Y) 목표		80
	2018년(Y+1) 목표		100
	목표값 설정근거		시정4개년 계획 일반과제
(12) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ■ ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ■ ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기
	90				100