강남주민편익시설 환경개선사업

『2022 강남주민편익시설 환경개선사업』

스크린골프장 골프시스템 구매 및 설치공사 계획

2022. 6.

강남주민편익시설 환경개선사업

『2022 강남주민편익시설 환경개선사업』

스크린골프장 골프시스템 구매 및 설치공사 계획

◎ 주민편익시설의 기존 시설물 노후화에 따른 환경개선으로 강남자원회수시설 주변영향지역 주민들의 요구수렴 및 주민복지 향상과 쾌적한 환경 조성, 이용 주민 만족도 증가

1		관련 근거

□ 법령상 근거

❍ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률

❍ 서울특별시 자원회수시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례

❍ 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례

□ 기타 근거(방침, 지침 등)

❍ 강남주민편익시설 운영 위‧수탁 협약서(제4조2항(수탁재산의 관리))

2		시설 개요

❍ 시설 건축물 현황

구 분	연 면적	주 구조	규 모	준공연도	비고
강남주민 편익시설	9,716㎡	철근콘크리트조	지하1층 지상3층	2001년

층 별	면적(㎡)	용 도
지하 1층	4,327	기계실, 전기실, 창고, 엘리베이터실, 주차장 등
지상 1층	2,803	수영장, 관리실, 샤워장, 락커룸, 강사실, 다목적교육실, 방풍실, 화장실, 실내골프장&스크린골프장
지상 2층	1,965	체력단련실, 샤워실, 락커룸, 에어로빅실, 주방, 식당, 강당&풋살장
지상 3층	621	다목적교육실, 독서실, 운영사무실, 관장실, 복도, 강사실, 화장실
계	9,716

❍ 층별현황

3		사업 개요

□ 사 업 명 : 2022 스크린골프장 골프시스템 구매 및 설치공사

□ 사업기간 : 2022년 6월 ~ 8월

□ 사업위치 : 서울시 강남구 남부순환로 3318(일원동)

□ 사 업 비 : 230,933천원 (시비)

□ 사업형태 : 민간위탁

□ 사업내용 : 강남주민편익시설 스크린골프장 노후시스템 교체

(단위 : 원)

구분	공정별 내역	사업비	사업내용
건축 기계 공사	골프존 시스템 및 장비	86,887,460	- 시뮬레이터(업그레이드) 2SET - 빔프로젝터 2SET
	관급자재	9,396,000	- 천정형 에어컨 2SET - 의자, 소파, 응접탁자
	부대공사	106,481,709	- 가설공사, 목공사, 수장공사 창호공사, 칠공사 등
	건설폐기물처리	5,356,831	- 건설폐기물 처리
	소계	208,122,000
전기 공사	전기설비공사	17,023,000	- 전등, 전열, 동력 재설치
소방 공사	소방설비공사	5,788,000	- 스프링쿨러 헤드 교체 - 소방장치 철거 및 설치공사
합 계		230,933,000

4		추진 경과

□ 환경개선사업 추진계획 : 2021. 6월.

□ 환경개선사업 설계용역 시행 : 2022. 3월

5		추진 계획

□ 발주 계획

❍ 업체선정 : 전자입찰(나라장터)

	< 관 련 근 거 >
‣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조1항2호 ‣ 지방자치단체입찰 및 계약집행기준(안전행정부 예규 제21호, 2018.1.10.)

❍ 계약기간 : 낙찰자 선정 후 40일

□ 세부 추진계획

❍ 공사 추진과정

제안입찰 시행	⇒	낙찰자 선정	⇒	공사시행	⇒	환경개선공사 결과 보고

❍ 세부추진 일정

- 계약심사 및 낙찰자 선정	‘22. 06.

- 공사업체 계약 체결	‘22. 06.

- 공사 착수 및 시행	‘22. 07.

- 준공검사 및 대금지급	‘22. 08.

6		행정 사항

□ 환경개선사업 추진관련 보고

□ 공사 진행사항 관리․감독 시행

□ 환경개선사업 대금 집행 및 정산보고

Ⅶ		사업 효과

□ 향후 기대효과

❍ 강남자원회수시설 주변영향지역 주민들의 요구사항으로 주민편익시설의 노후화에 따른 주민편익시설 개선으로 주민복지 향상

❍ 노후 설비의 교체 및 보수로 지역주민에게 쾌적한 환경 조성

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

현장 사진대지

강남주민편익시설 스크린골프장 내부전경