자문 검토 의견서

○ 2019년 중앙지사 열수송관 공사(서빙고로, 신반포로, 방배로)

안  건

검 토  의 견

1. 서빙고로 용산역앞 교차로와 이촌역앞 교차로 및 용산역앞↔용산공고정문과 용산파크1단지앞↔이촌역앞 가로구간에 대해 교통소통분석 추가 검토

2. 신반포로는 주간점용 없이 공사가 가능한데 서빙고로와 방배로에 대해서는 주간점용이 필요한 사유에 대해 제시하고 반드시 필요하다면 주간점용구간 최소화 방안 검토 및 주간점용하는 단계와 단계별 주간점용구간에 대해 명확하게 제시(예를 들어, 방배로 4단계 공사기간에도 2단계 공사구간에 대한 주간점용으로 도면 제시되어 있음)

3. 전 구간 전 단계별 도면에 공사중 차로 운영과 관련하여 미리 차선 변경할 수 있도록 접근로상 임시 노면표시 보완(예를 들어, 서빙고로 2단계에서는 3차로 우회전만 가능하기에 직진금지 노면표시 추가 등)

4. 차로폭에 여유가 있거나 대항차로 이용이 가능하다면 최대한 기존 차로수 유지할 수 있도록 임시차로 운영 검토 및 임시차로 운영에 따른 교차로 유도선 및 임시차로 설치(예를 들어, 서빙고로 3단계 중앙박물관 방면 직진차로 2개 확보 가능 여부 등)

5. 서빙고로 4단계, 5단계 등 공사구간 교차로에 대해 임시 유도선 설치가 적정한지 검토 및 8단계, 7·8단계 주간점용시 교차로 유도선 설치

6. 서빙고로 7·8단계 주간점용시 A-A', B-B' 단면 확인 및 철우아파트앞 이촌역 방면 직진 3개차로 확보가능한지 검토

7. 서빙고로 10단계, 11단계 도면에서 공사중 안내표지판이 내용과 일치하지 않으며, 신반포로 1, 2단계 공사중 안내표지판도 차로운영에 맞게 수정 요망

8. 신반포로 3단계 신반포로 16길 방면 우회전 차량이 공사구간을 안전하게 피하여 운행할 있는 방안 검토

9. 신반포로 234단계 보행자 통행방안 제시

10. 방배로 2, 3, 4단계 방배삼호아파트앞 방면 4차로(기존 우회전 전용)에 대해 교차로에 인접하여 차선변경하여 좌회전하는 것이 타당한지 검토

11. 방배로 3단계 및 4단계 공사구간 명확하게 도면에 제시 요망

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람