<설계변경>

일상감사 및 계약심사 조정내역 사유서

□ 공 사 명 : 2019년 도로굴착복구공사(설계변경)

□ 공사개요

위 치	중구 관내
공사내용	- 아스팔트포장 A=104a → 142a - 보도블록포장 A=6a → 1a
사업기간	착공일로부터 2019.12.31까지

□ 심사평가 결과

○ 요청금액 : 629,020천원

○ 조정금액 : 851,367천원

○ 증액금액 : 222,347천원

○ 증 가 률 :     + 35.35%

□ 설계변경 사유

○ 관리청 복구물량 증가에 따른 물량 증감

□ 주요 심사내용

○ 수량 증가에 따른 설계변경에 대한 사업의 적정성 등 여부 → 별도의견 없음

□ 기타사항

○ 계약관련법 등에 따라 절차 이행 규정 준수 철저

○ 원가심사에 따른 단가산출 등 물량 재확인 후 설계변경 실시

○ 심사한 금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 경우 자체 반영

○ 사업이 완료된 이후에 정산시 철저를 기하기 바라며,

○ 공종별 물량확인을 철저히 하여 사업비가 과다 지급되는 일이 없도록 하기 바람