- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	수신자참조
(경유)
제목	일상감사 및 계약심사 처리결과 통보[2019년 도로굴착복구공사(설계변경)]

1. 도로시설과-13575(2019. 12. 3.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련「2019년 도로굴착 복구공사(설계변경)」에 대한 설계변경 일상감사 및 계약심사의 결과를 아래와 같이 통보하니 심사의견을 반영하여 사업을 추진하시기 바라며,

3. 계약부서(재무과)에서는 해당 심사의견서, 관련법령 등을 확인 후, 심사의견이 누락되는 일이 없도록 철저히 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 심사결과

(단위 : 천원)

사 업 명	심사요청액	심사평가액	증가금액	증가률	비고
2019년 도로굴착 복구공사(설계변경)	629,020	851,367	222,347	+ 35.35%	설계 변경

나. 심사내용 : 단순 공사물량 증가에 따른 설계변경에 대한 사업의 적정성 등 여부

다. 기타사항

- 계약 관련법 등에 따라 절차 이행 규정 준수 철저

- 원가심사에 따른 단가산출 등 물량 재확인 후 설계변경 실시

- 심사한 금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 경우 자체 반영

- 사업이 완료된 이후에 정산시 철저를 기하기 바라며,

- 공종별 물량확인을 철저히 하여 사업비가 과다 지급되는 일이 없도록 하기 바람

붙임 : 1. 일상감사 및 계약심사 조정내역 사유서 1부.

2. 심사내역서 1부.  끝.

							감사담당관
수신자					도로시설과장,재무과장
주무관										감사팀장										감사담당관
협조자
시행			감사담당관-9338									(	2019.12.5.					)		접수			도로시설과-13734								(	2019.12.6.					)
우	04558					서울시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관4층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-4405						/전송			02-3396-9013					/													/	부분공개(5)