자문 검토 의견서

○ 지하철4호선 상계~노원 방음벽 교체공사

안  건

검 토  의 견

지하철4호선 상계~노원 방음벽 교체공사)

1. 12쪽 공사예정공정표에 따른 단계별 교통소통대책 도면 재작성

2. 단계별 교통소통대책 도면마다 공사기간, 공사내용, 점용 및 공사 구간 및 시간 등 명시

3. 공정별 주간 공사 및 야간공사를 명확하게 구분하여 공사계획 재수립 및 주간공사 최소화 방안 검토

4. 상계초교입구 교차로내 공사시 차로이용 방법이 달라질 경우, 즉, 기존 우회전과 직진이 동시에 가능했던 차로에서 우회전만 하도록 통제한다면, 진행이 가능한 노면 표시 외 진행이 불가한 교통류 방향에 대해서도 노면표시를 통해 정보를 제공하여야 할 것임

5. 마을버스05번 정류소가 위치한 구간 공사시 이용하는 시민안전을 고려한 정류소 임시 이전 등 구체적인 대안 제시 요망

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람

2019. 10. 14.