도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (9차)

◉ 궁동 1101∼23012번지간 송배수관 부설공사 : 조건부 시행(김은경 위원 지정검토)

- 우기를 고려하여 공사기간에 대해 재검토하기 바람

- 7, 8쪽 교통량도를 교통량을 직접 표현하는 방식으로 변경하기 바라며, 단계별 공사기간(일수 등)을 제시하기 바람

- 2, 3단계 우회전 통제에 따른 우회 홍보계획 관련하여 보다 적극적인 대책을 검토하기 바라며, 우회경로로 진입하지 못한 차량에 대한 안내 계획을 추가 수립하기 바람

- 6, 7단계 고가차도 앞 비보호 좌회전 처리에 대해 재검토하여 대향차로 확용 계획 등 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 12단계 등 연속된 교차로를 점용하는 단계의 경우, 운전자의 혼란이 발생하지 않도록 교통소통대책을 재수립하기 바람

- 가로구간 공사단계의 경우, 1개 차로 점용공사를 시행할 수 있도록 공사방법 및 장비재치 등을 재검토하기 바람

- 교차로 단계는 일단위 교통처리계획도로 작성하기 바라며, 가로구간 단계는 교차로 구간 단위(일단위 예시도 포함)로 제출하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람