설계변경 자문회의 결과에 대한 조치계획 검토의견

【북단IC D구간 지하미확인 지장물 관련 변경】

2 0 1 4.  1 2

월드컵대교 건설공사

(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2014. 12
현 장 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	북단IC D구간 지하미확인 지장물 관련 변경

1. 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

2. 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동(증산로) ~ 영등포구 양평동(서부간선도로)

3. 공사종류  : 교량신설

4. 사업개요  : 총연장 L=1,980M(주경간교 855M)

폭  원 B=31.4M(왕복 6차로)

연결로 : 5개소/4,030M(북단)

6개소/2,893M(남단)

5. 공사기간  : 2010년 03월 22일~2015년 08월 22일(66개월)

6. 도 급 자 : 삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

7. 설계변경 자문회의(소위원회) 심의 지적사항에 따른 조치현황

(단위 : 원)

구 분	심 의 지 적 사 항	조 치 결 과	증.감액	비 고
북단IC D구간 지하미확인 지장물 관련 변경	○SBH 가설흙막이공사는 1식으로 견적처리 되어 수량․단가 등 검토가 불가하니 세부내역 근거를 보완하고, 비교검토하여 반영할 것(p317)	○ 세부내역(상세 산근) 첨부	-	첨부 #6
	○터파기 4m이상 단가에는 들어내기 품이 포함되어 있는 것으로 판단되니, 지하굴착 10%(할증)에 대한 적용여부를 재검토해 볼 것(p296)	○조정하여 감액처리	-176,579	첨부 #7
	○기타, 현장여건상 한강하류로서 지상구간에도 노출되지 않은 지하매설물이 있을 수 있으므로, 주의 깊게 시공할 것	○ 주의하여 안전시공 하겠음	-
소 계			-

8. 설계변경 자문회의(소위원회) 결과에 따른 공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	자문 요청금액 (A)	설계변경 자문회의 절감금액 (B)	최종 반영금액 (C=A-B)	비 고
북단IC D구간 지하미확인 지장물 관련 변경	64,900,000	-176,579	64,723,421

9. 검토결과

월드컵대교 건설공사 북단IC D구간 지하미확인 지장물 관련 변경 실정보고는 발주처 승인    및 설계변경 자문회의(소위원회)가 완료된 상태로서,

설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항에 대하여 보완 조치하였으며 발주처 조치계획 보고   후 추후 설계변경시 반영하고자 함.

검토자 : 책임감리원 김 동 귀(인)