	예산서 P.
충무로 일대 노후 하수관거 보수보강

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑2017.03 ~ 2017.09.
사업위치	중구 충무로 충무로역 ~ 명보사거리
총사업비	총 1,000,000천원		[국비]	[시비]1,000,000천원	(보조율) %	[구비]
사업내용
	○	노후 하수관거 정비
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	중구청

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
□	□

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	김재승 2133-3789	김일구 2133-3791

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2015년 본예산	2016본예산 (A)		2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계						1,000,000	1,000,000	100%
시설비						1,000,000	1,000,000	100%

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2016년 본예산
시설비

과목구분	2017년 예산(안)
시설비
	○	비굴착 전면보수(D1500mm, L=365m) 365m×2,400,000원/m = 876,000천원	=	876,000천원
	○	비굴착 전면보수(D1800mm, L=14.8m) 14.8m×2,400,000원/m = 35,520천원	=	35,520천원
	○	사각형거보수(□2.0*1.5m, L=17.6m) 17.6m×2,600,000원/m = 45,760천원	=	45,760천원
	○	폐기물처리비 및 기타 109,200,000원×1식 = 42,720천원	=	42,720천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	신규사업(노후 하수관거 보수보강)

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                       (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계				1,000
시설비				1,000

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	충무로 일대 노후 하수관거를 보수·보강하여 도로함몰 등 안전사고 예방 및 하수관거 기능 유지

□ 사업근거
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
○	우기대비 하수시설물 자체점검 실시(2016.4.)

□ 사업내용
○	위 치 : 중구 충무로 충무로역~명보사거리
○	규 모 : 하수관거 보수보강 : D1,500mm~▣2.0×2.0m, L=0.397km
○	사업기간 : 2017. 3 ~ 2017. 9.
○	사업내용 : 노후 하수관거 보수보강
○	총사업비 : 1,000백만원(시설비 1,000백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)
○	위 치 :
○	규 모 :
○	사업내용 :
○	소요예산(안) :

□ 추진경위
○	`10.12. : 초동18-6~청계천간외 4개소 정밀안전진단 및 실시설계용역
○	`14.03. ~ 12. : 초동18-6~청계천간 하수암거 보수보강공사
○	`16.04. : 우기대비 충무로 일대 자체점검 실시
○	`16.05. : 노후 하수관거 정비예산 요청(긴급)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	노후 하수관거 보수·보강 실시로 도로함몰 등 안전사고 예방 및 하수도 기능 회복을 위해 정비가 필요함

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,000,000
공법선정	2016.10~2017.12		공법선정위원회 개최
서울시 신기술 심의	2017.01~2017.02		신기술 심의위원회 개최
공사설계 및 발주	2017.02~2017.03		공사설계 및 계약심사 등 사전절차 이행
공사시행	2017.04~2017.09		공사추진
공사준공	2017.09.	1,000,000	준공금 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

□   향후 기대효과

○	충무로 일대 노후 하수관거를 보수·보강함으로써 도로함몰 등으로 인한 안전사고 예방 및 하수관거 기능 유지

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013
2014
2015

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도
현 황 도