[별첨3]

2017년도 기전분야

주요사업 심사대상사업 추진계획

(❍❍물재생센터)

□ 심사대상사업 현황

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	예산액	사업기간	비고
소계	건		0
1
2
3

붙임 : 2017년도 기전분야 주요사업 심사대상사업 추진계획서 ❍부.

<작성요령> : 사업별로 작성하되 작성서식(따로붙인 작성예시 참조)에 의거 작성

-사업명 : “발주건명” 기재 (가급적 예산서와 일치토록 작성)

-사업개요 : 구체적 사업개요(위치, 형식, 규격 및 수량 등)

-예산액 : 예산서상 예산액

-비고 : 담당부서

(“작성예시”)

사업명 : #1 초침슬러지수집기 부품 제조구매설치

장기간 가동으로 효율이 저하되고 부식이 심한 소모성 주요부품(스프라켓, 슈, 체인)을 적기에 정비하여 고장을 사전에 예방하고 기기 가동효율을 높여 침전지 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

◦ 사업규모  : #1 최초침전지 슬러지수집기 8개지(체인, 스프라켓, 슈)교체

◦ 사업기간 : 2017 1 ~ 2017. 7

◦ 총사업비 : 550백만원

□ 시설현황 및 사업비 반영사유

◦ 시설현황

시 설 명	규격 및 설치대수	설치년도 (내구연한 초과여부)	기기상태	비고
슬러지수집기	체인플라이트 콘베어형 48대	1987 (9년 초과)	- 체인, 가이드슈, 스프라켓 마모 심함

◦ 사업비 반영사유

- 2016년 노후 기전설비 5개년 개․보수 조정계획 반영

□ 예산 집행계획                                (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	550							550
사업비	550							550

□ 향후 추진계획

◦ ‘17. 1.10 ∼ 1.20 : 자체 방침

◦ ‘17. 1.21 ∼ 2.15 : 설계 및 주요사업심사 실시

◦ ‘17. 2.16 ∼ 3.25 : 집행계획 승인, 발주 및 계약

◦ ‘17. 3.26 ∼ 7.20 : 물품제작(공사) 설치시행

◦ ‘17. 7.21 ∼ 7.30 : 시운전 및 준공

□ 세부추진일정

공정내용	1월					2월				3월					4월					5월					6월					7월					8월					9월					10월					11월					12월
	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주	1 주	2 주	3 주	4 주	5 주
방침수립
기초조사 및 실시설계
주요사업 심사요청
집행계획 승인
발주 및 계약
물품제작설치 (공사)시행
납품(공사) 시운전 및 검수(준공)

작성자 :    과,  직      ,  성명 :