확   인   서

1. 제  목 : 변압기 용량 검토에 관한 사항

2. 내  용

○ 상수도사업본부 급수부에서 ’09.12.02. 삼성물산(주)과 계약 체결하여 ’15.01.16. 준공예정인 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(계약금액 : 212,408백만원)에 대하여 건설사업관리(CM)용역으로 (주)도화엔지니어링외 1개사와 계약 체결(’09.5.25.~’14.12.25, 계약금액 4,607백만원)하여 시행하면서

○ 건설사업관리자(CM)는 건설기술관리법 시행령 제39조의 2에 따라 실시설계와 관련하여 각종조건, 설계기준 등의 적정성 및 용역성과품의 검토ㆍ확인 등 전반적인 건설사업관리 업무를 수행하여야 하는데도

- 09.12.02.턴키방식(Turn Key Base)에 의한 계약체결 내용이 기존 12,000KVA 변압기를 재사용 하는 것으로 되어 있었으나 발주청의 변압기 용량 재검토 지시에 따라 2010.4.13. 실시 설계시 변압기 용량을 정수센터 현대화 및 고도처리시설과 관련하여 증감되는 부하집계에 의한 변압기용량과 기존시설 최대전력 측정치로 결정하면서

- 설계 당시 기준 3년간의 뚝도아리수정수센터 최대전력(KW)은 2007년도 8월에 8,524KW로 청계천 용수유지관리(시설관리공단에서 2005년도 8월부터 운영) 전력량이 포함되어 있는데도 이를 증감 수용부하용량에 청계천   유지용수에 사용되는 전력량 1,293.84KVA을 중복 반영하여 부적정하게14,000KVA로 변압기 용량을 선정하여 2010.6.21. 2차공사 계약체결시 교체 공사비 729,276천원 반영하였음

- 위 사항에 대하여 청계천 유지관리에 사용되는 전력량을 중복반영하지 않고 변압기 용량을 재산정한 결과, 여유율 1.1적용한 상태에서도 11,830KVA로 기존 주변압기 용량 12,000KVA(2007년도 설치) 이내로 산출된바, 건설사업관리(CM)자는 청계천 유지관리에 사용되는 전력량이 중복 반영되어 있는데도 이를 확인하지 못한 사실이 있음.

3. 관련자 관리기간 조서

구분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재직기간	담당업무	비고
	행위시	현 재
발주청	상수도사업본부 생산부	도시기반 시설본부	시설4급 (부장)	정득모 (61.10.3)	2009.9.1~ 2012.8.27	담당부장
	상수도사업본부 생산부	좌동	시설4급 (부장)	박용철 (56.10.16)	‘12.8.28~ 현재	담당부장
	상수도사업본부 생산부	퇴직	공업5급 (과장)	강영창 (51.9.11)	2009.9.1~ 2011.6.30	담당과장
	상수도사업본부 생산부	좌동	공업5급 (과장)	김동기 (56.8.6)	2011.6.31~ 현재	담당과장
	상수도사업본부 생산부	강서도로 사업소	공업6급 (공사관리관)	안계훈 (64.12.30)	2009.9.1~ 2010.2.28	공사관리관
	상수도사업본부 생산부	행정국 (국내교육파견)	공업6급 (공사관리관)	변인수 (62.1.26)	2010.3.1~ 2011.1.4	공사관리관
	상수도사업본부 생산부	좌동	공업7급 (공사관리관)	함진각 (63.6.17)	2011.1.5~ 2012.3.11	공사관리관
	상수도사업본부 생산부	관악구청	공업7급 (공사관리관)	배승철 (68.10.5)	2012.3.12~ 2013.3.17	공사관리관
	상수도사업본부 생산부	좌동	공업7급 (공사관리관)	박태식 (69.11.7)	2013.3.18~ 현재	공사관리관
책임사업 관리자	도화엔지니어링	좌동	단장	김관수 (49.01.02)	2009.05.25∼현재	감리업무총괄
전기보조 사업관리자	도화엔지니어링	좌동	이사	강석봉 (60.01.10)	2011.03.01∼현재	전기감리업무
전기비상주보조사업관리자	한종엔지니어링	좌동	상무	유봉 (59.04.02)	2009.5.25∼ 2010.5.11	전기설계검토
설 계 자	범한엔지니어링	좌동	부사장	김제봉 (49.06.11)	2009.11.16 2010.3.15	전기설계
현장대리인	삼성물산	좌동	차장	황윤상 (66.07.06)	2010.02.01∼현재	공사관리총괄

위 사실을 확인함.

2013년  11월   일

작성자 : 소속 ㈜도화엔지니어링  직급 책임사업관리자    성명 김관수  (인)

소속 ㈜도화엔지니어링  직급 전기보조사업관리자 성명 강석봉  (인)

확인자 : 소속 상수도사업본부 생산부 기전관리과  직급 공업5급  성명 김동기 (인)

소속 상수도사업본부 생산부 기전관리과  직급 공업7급  성명 박태식 (인)