461. 북부간선도로 진출입램프 조속설치

	<건의(민원) 사항>
□ 태릉입구에서 삼육대 구간 버스전용차선 정비되었음에도 경기도민 등의 이용으로 혼잡도 가중. 이와 관련 북부간선도로 진출입 램프 설치 조속 진행

□ 사업개요

○ 위 치 : 중랑구 묵동 IC내

○ 규 모 : 진입램프(B=5m, L=638m), 진출램프(B=5m, L=847m)

○  사업기간 : 2008. 8. ∼ 2016.12.

(설계 : '12.12.26. ∼'15.12.31.)

○  총사업비 : 215억원 (설계비 10.3억원)

○  설 계 사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜경원엔지니어링

□ 추진경과

○ '08. 8. ∼ '09.12. : 타당성조사 및 기본계획 용역

○ '10. 4. ∼ '11. 5. : 기본설계용역 시행

○ '12.10.25. : 사업계획 조정검토보고(도로계획과)

○ '12.10.29  : 램프추가설치 사업계획 조정통보

○ '13. 1. 9.  : 실시설계용역 착수

○ '13. 4. 3.  : 노선변경안 검토 및 협의(도로계획과)

○ '13. 5.∼6. : 비교노선안 세부검토(묵동IC), 유관부서 업무협의

○ '13. 8.30. ∼ 9.12. : 기본설계(안) 공람공고

○ '13. 9. 9.  : 노원구청장 방문(기본설계안 및 검토안 현안사항 설명)

○ '13. 9.17.  : 이노근 국회의원 방문(현안사항 및 구조물 검토보고)

○ '13. 9.30.  : 주민설명회 개최(노원구 공릉2동 주민센타)

작성자	토목부장 : 노우성	☎3708-2540	설계과장 : 이승우	☎2585	담당 : 이석근	☎2588

○ '13.10.18.  : 중랑구청 방문협의(묵동IC내 진입내, 신내길 이용안)

○ '13.10.~11. : 각 검토 노선안에 대한 경제성 및 타당성 검토

○ '13.12.12. : 화랑램프 추진 노선안 조정 통보(도로계획과)

○ '14. 4.17. : 묵동IC내 진입램프 공람공고

○ '14. 7.23. : 서울시민디자인심의

○ '14.10.27. : 건설기술심의

○ '14.12.22. : 묵동IC내 진출램프 실시설계 추진 통보(도로계획과)

○ '15. 3.10. : 묵동IC내 진출램프 노선(안) 주민공람공고

□ 갈등사항 : 없음

□ 검토의견 : 진행중

○ 설계업무 정상 추진중

□ 향후계획

○ ’15. 4. : 세부검토 및 측량, 관련기관 협의

○ ’15. 5.~ 6. : 건설기술심의 및 설계VE

○ ’15. 7.~ 8. : 설계자문, 디자인심의

○ ’15. 12. : 설계용역 완료

□ 위치도

□ 대상지 현황(조감도)