설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부		요청일		2019년 8월 일
공 사 명	양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)
공사개요	공사규모		□CSOs 저류조 Q=46,000㎥, 128m x 60x x 6m □설비실(기계실, 전기실) A=903.5㎡, 451.7㎡ x 2층 □수목이식 168주,식재(관목, 교목) 3,392주, 초화류 111,000본 □기계 및 전기공사 1식
	공사기간		2016. 12. 05. ~ 2019. 11. 15
	감 리 사		(주)경동엔지니어링 외 3개사
	설 계 사		(주)동명기술공단 외 1개사
	시 공 사		대우산업개발(주) 외 2개사
자문 안건명			운동장 조성공사 실정보고				요청금액		증 617,193천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)』 추진과 관련하여 시설물 관리기관인 영등포 구청에서 저류조 상부에 생태체육시설 조성요구에 따라 운동장 조성 공사를 추가 반영코저 함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 운동장 조성 추가반영 ▪ 물량 증감내역 - 우레탄 포장 증) 3,870㎥ - 측구배수로 증) 281m					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 617,193천원 - 증 감 : 증) 617,193천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토목공사 중 포장공사 : 우레탄 포장 수량 추가 - 토목공사 중 부대공사 : 측구배수로 수량 추가
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부. 2. 실정보고서 사본 1부. 끝.					▪ 공사예정시기:2019년 9월 ~ ▪ 소요관급자재:철근, 레미콘

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)
계약금액	최초 : 14,536,700천원 변경 : 20,653,578천원	계약일	최초:2016.11.30. 변경:2019.07.10.	시공사	대우산업개발(주)외 2개사
공사기간	2016.12.05 ~ 2019.11.15	낙찰율	81.135%	설계자	(주)동명기술공단외 1개사
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)경동엔지니어링외 3개사
공사규모	□CSOs 저류조 Q=46,000㎥, 128m x 60x x 6m □설비실(기계실, 전기실) A=903.5㎡, 451.7㎡ x 2층 □수목이식 168주,식재(관목, 교목) 3,392주, 초화류 111,000본 □기계 및 전기공사 1식			※ 작성자 : 차성민(☎3708-8785)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		운동장 조성공사	우레탄포장수량 증) 3,870㎥
공 사 비	-		617,193천원	증) 617,193천원
적 용 요 율	낙찰율 81.135%		신규공종:협의율(설계단가x90.56%)
설계변경요구자	□ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조 ③항 3
설계변경 근거	방 침	운동장 조성공사 승인(방재시설부-11747)
	관련규정	공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경, 제7절 계약금액의 조정
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)』 추진과 관련하여 시설물 관리기관인 영등포구청에서 저류조 상부에 생태체육시설 조성요구에 따라 운동장 조성 공사를 추가 반영코저 함.
효 과	① 공기단축( 개월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

· 시공사문서 : 양평1 제2019-058호(2019.07.25)

· 건설사업관리단문서 : 양평1유건 제2019-211호(2019.07.29)

· 발주처승인문서 : 운동장 조성공사 실정보고 승인(도시기반시설본부–19–9108 (2019.08.07)]