설계변경 자문회의 결과에 대한 조치계획 검토의견

【북단 상수도 이설공사 변경】

2 0 1 4.  1 2

월드컵대교 건설공사

(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2014. 12
현 장 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	북단 상수도 이설공사 변경

1. 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

2. 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동(증산로) ~ 영등포구 양평동(서부간선도로)

3. 공사종류  : 교량신설

4. 사업개요  : 총연장 L=1,980M(주경간교 855M)

폭  원 B=31.4M(왕복 6차로)

연결로 : 5개소/4,030M(북단)

6개소/2,893M(남단)

5. 공사기간  : 2010년 03월 22일~2015년 08월 22일(66개월)

6. 도 급 자 : 삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

7. 설계변경 자문회의(소위원회) 심의 지적사항에 따른 조치현황

(단위 : 원)

구 분	심 의 지 적 사 항	조 치 결 과	증.감액	비 고
북단 상수도 이설공사 변경	○단가비교표상 자재단가는 예산절감 및 경제적인 측면 에서 조달청단가를 추가 비 교 검토하여 반영할 것 (p491~p494) → 압륜, PE관, 조립식암거블 럭 등 다수	○조정하여 감액 처리	-1,993,197	첨부 #8
	○부단수천공 견적은 상수도 사업본부(수도사업소) 시행 사례 등을 참고하여 세부내 역서를 제출받아 비교검토 후 반영할 것(p497)	○상수도사업본부 부단수 천공 설계단가 적용	-4,315,293	첨부 #9
	○장비효율을 변경(0.7㎥→ 0.2㎥)한 구간은 협소구간 확인이 가능한 객관적인 근거자료를 보완할 것	○0.7㎥장비 폭이 2.5m로 작업공간(폭 2m)장비 반입불가		첨부 #10
소 계			-

8. 설계변경 자문회의(소위원회) 결과에 따른 공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	자문 요청금액 (A)	설계변경 자문회의 절감금액 (B)	최종 반영금액 (C=A-B)	비 고
북단 상수도 이설공사 변경	189,860,000	-6,308,490	183,551,510

9. 검토결과

월드컵대교 건설공사 북단 상수도 이설공사 변경 실정보고는 발주처 승인 및 설계변경 자    문회의(소위원회)가 완료된 상태로서,

설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항에 대하여 보완 조치하였으며 발주처 조치계획 보고   후 추후 설계변경시 반영하고자 함.

검토자 : 책임감리원 김 동 귀(인)