	예산서 P.
삼일대로 외 3개소 원형관로 보수보강공사

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑2017.03. ~ 2017.12.
사업위치	삼일로 외 3개소 일대
총사업비	총 800,000천원		[국비] 천원	[시비]800,000천원	(보조율) 100%	[구비]
사업내용
	○	하수관로 정비 D=900∼1,200mm, L=506.2m 원형관로 보수보강
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	중구청

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
☑	□	□	□	□	□	□	□	☑
경상	투자
□	□

□ 재정사업 평가 결과
매우 우수	우수	보통	미흡	매우미흡	해당없음
□	□	□	□	□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	김재승 2133-3789	김일구 2133-3791

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2015년 본예산	2016본예산 (A)		2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계			-	-		800,000	800,000	-
시설비			-	-		800,000	800,000	-

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2016년 본예산
시설비
		-

과목구분	2017년 예산(안)
시설비
	○	관로보수보강 (D900~D1200mm, L=506.2m)	=	800,000천원
		비굴착 전면보수(D 900~D1200mm) 1,500,000*506.2	=	759,300천원
	○	폐기물처리비 및 기타 40,700,000*1	=	40,700천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	신규사업(노후 하수관거 보수보강)

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                       (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	-	-	-	-	-
시설비	-	-	-	-	-

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	도심지 주요도로 하부에 매설이 오래된 하수관 중 육안점검 및 CCTV조사를 통해 이음부 이격, 세굴 누수의 원인으로 도로동공이 발생하여 시민불안요소를 가중하는 등 사회적 이슈가 되고 있어 이를 해결하기 위해 통수단면적이 확보되어 있는 구간에는 주민불편 및 민원해소를 위해 굴착공사를 수반하지 않는 비굴착공법으로 하수관을 보수하여 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

□ 사업근거
○	하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
○	우기대비 하수시설물 자체점검 실시(2016.07.)

□ 사업내용
○	위 치 : 삼일대로 외 3개소 일대
○	규 모 : D=900∼1,200mm, L=506.2m
○	사업기간 : 2017. 03 ~ 2017. 12.
○	사업내용 : 원형관로 보수보강
○	총사업비 : 800백만원(시설비 800백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)
○	위 치 :
○	규 모 :
○	사업내용 :
○	소요예산(안) :

□ 추진경위
○	`16.04.∼07.: 자체 안전점검 시행(CCTV촬영 및 육안점검 병행)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	하수관의 이음부 이격, 세굴누수의 원인으로 도로동공이 발생하여 시민불안요소를 가중시키고 있어 조기 하수관 보수보강이 필요함.

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

□ 2017년도 추진일정
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		800,000
공법선정	2016.10~2017.12		공법선정위원회 개최
서울시 신기술 심의	2017.01~2017.02		신기술 심의위원회 개최
공사설계 및 발주	2017.02~2017.03		공사설계 및 계약심사 등 사전절차 이행
공사시행	2017.04~2017.09		공사추진
공사준공	2017.09.	800,000	준공금 지급

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

2014년도
	-
2015년도
2016년도

□   향후 기대효과

○	하수관로 조기 보수보강을 통해 시민불안감 해소 및 안전사고 사전예방

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도(삼일대로)
현 황 도

D 900mm, L=101m

D1000mm, L= 72m

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도(서소문로)
현 황 도

D1100mm, L= 145.3m

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도(무학동 247-7)
현 황 도

D 900mm, L=  11m

D1000mm, L= 117m

D1200mm, L=  7.5m

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위 치 도(광희동 1가 175-2)
현 황 도

D1000mm, L= 52.4m