우이~신설 지하경전철 건설

직 책	성 명	전화번호
도시철도사업부장	이 은 상	772-7030
경전철1과장	박동룡	772-7033
담당자	위 성 환	772-7178

□ 사업목적

◦ 서울의 대표적인 대중교통 취약지역에 신교통수단 도입

◦ 서울 동북부지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2016

◦ 총사업비 : 909,173백만원(국비 110,446, 시비 317,014, 민자 481,713)

◦ 사업내용

- 위    치 : 우이동 ~ 삼양로 ~ 정릉 ~ 성신여대 ~ 신설동

- 규    모 : 연장 11.4km, 정거장 13개소(환승 3개소), 차량기지 1개소

- 내    용 : 지하경전철 건설(BTO방식 민간투자사업)

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	총사업비	기투자	당해년도 예산집행현황
			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)
계	427,460	248,723	48,288	27,178	20,445	665
시 설 비	408,888	238,527	43,676	24,319	19,085	273
감 리 비	17,252	9,404	4,462	2,768	1,360	333
시설부대비	1,320	792	150	91	-	59

□ 사업실적 및 향후대책

◦ ‘09. 9.15 : 공사 착공

◦ ‘11.11.25 : 금융약정 체결

◦ ‘15. 4월 현재 : 차량기지․터널․정거장 구조물, 궤도 및 시스템 공사중

◦ ‘15. 6 : 토목구조물 공사완료, 건축․설비 공사 추진

◦ ‘15.12 : 주요공사(궤도, 송변전, 통신, 신호 등) 완료

◦ ‘16.11 : 시운전 및 공사완공