580. 신림~봉천터널 공사현황

	<건의(민원) 사항>
□ 금천경찰서(민원실)앞 사거리 횡단보도 및 교통처리를 현상태로 존치요구

□ 사업개요

○ 위치 : 관악구 신림동 시흥IC ~ 신림동 신림뉴타운

○ 규모 : 연장 3.1km(왕복4차로)

- 터널 L=1,753m, 지하BOX L=345m, U-Type L=170m

- 보도육교 1개소, 관리사무소 1개소, 환기소 1개소

○ 사업기간 : 2010.10 ~ 2017.12 (2021.12월로 연기예정)

○ 사업비 : 3,164억원(공사비 2,218, 보상비 946)

○ 시공사 : 두산건설㈜        ○ 감리사 : ㈜동일기술공사

○ 사업 위치도

작성자	토목부장 : 노 우 성	☎3708-2540	터널건설과장 : 권 혁 대	☎3708-2565	담당 : 조 현 형	☎3708-2568

□ 추진경과

○ 2010. 2. 9 : 실시설계 완료

※ 진입램프 도로종단경사 4.98%(설계기준 5%이내)

○ 2010. 7.29 : 유료도로 운영방안 변경(유료→무료, 사업기간 연장)

○ 2010. 8.13 : 설계변경 착수(유료→무료도로)

○ 2010.10. 5 : 공사계약 및 착수(공사중지)

○ 2012. 7. 9 : 진정민원 접수(횡단보도 및 사거리 기존상태 존치 요구)

○ 2012. 7.13 : 중간회신(설계 검토시간 소요)

○ 2012. 8.13 : 민원사항 검토결과 회신

- 종단경사(하향) 4.98%→6.05%(기준 5%이내), U-Turn 및 좌회전 대기차로 L=125m→71m(기준 80m 이상)로 설계기준 위배

- 대안으로 런던웨딩홀 사거리 교통처리를 비보호 직진, 좌회전이 가능하도록 변경

- 런던웨딩홀 앞 도로와 푸르지오아파트 앞 도로 일방향통행을 양방향 통행으로 변경

○ 2012. 8.14 : 현장방문 민원사항 검토결과 설명

(민원인 대표 이정호외 3명)

- 교통처리보다 횡단보도 존치를 우선적으로 검토 요구

○ 2012. 8.29 : 현장방문 민원인 면담 검토결과 설명

- 신봉터널 종단경사 4.9%→6.0% 변경시 횡단보도 존치 가능

- 런던웨딩홀앞 횡단보도는 현재위치에서 71m 이동 설치

※ 검토결과 설명에 대하여 민원인 대표 등 의견 수용함

□ 갈등사항 : 있음

○ 갈등유형 : 상대민원(해당주민-인접주민)

○ 갈등내용 : 횡단보도 이전에 따른 상대민원 발생 우려(주민설득요청)

□ 검토의견 : 해결(대안 해결)

○신봉터널 종단경사 4.9%→6.0% 변경시 횡단보도 존치 가능

○런던웨딩홀앞 횡단보도는 현재위치에서 71m 이동 설치

- 검토결과 설명에 대하여 민원인 대표 등 의견 수용함

□ 향후계획

○ 2016. ~ : 서울시 재정여건을 고려하여 예산확보방안 및 추진계획수립