도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제1차)

◉ 백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성공사 : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- p.36 가로구간 서비스 수준 분석결과 주간첨두시(17~18시) 한강대교 북단교차로 -> 남단교차로 구간통행속도 49.0km/h로 LOS B가 맞는지 확인 요청

- 8-3단계, 9-3단계 한강대교 전면통제시 한강대로, 이촌로, 양녕로, 현충로, 노들로에 우회안내 표지외 좀더 적극적인 우회처리 방안이 필요하고, 야간점용공사(00~04:55)를 계획하였으나 04시 이후 공사구간을 운행하는 버스노선에 대한 대책이 필요함

- 공사구간이 21년 중 231일간으로 계획하였으나, 기후에 대한 공사여건을 충분히 고려한 일정인지 확인 필요

- 8-1, 8-2, 8-3단계, 9-1, 9-2, 9-3단계 보행교 가설시간이 25분으로 공정의 난이도에 비해 너무 짧은 것으로 판단되어 확인 필요

- 8-1단계, 8-2단계 보행교 좌측 가설 공사시, 북->남 방면 최하위차로에는 차로변경 노면표시(534호표)를 2개 이상 설치할 것

- 8-3단계 공사시, 한강대교 북단교차로 이촌역->노들섬 방면 좌회전 부락는 좌회전이 가능토록 조치하고, 안전시설물 설치계획도 수정할 것

- 9-1단계 공사시, 흑석역->노량진 수산시장 방면 최하위차로에는 차로변경 노면표시 (534호표)를 2개 이상 설치할 것

- 9-2단계, 9-3단계 공사시  노들역->노등력 방면은 유턴 지점 변경에 따라 임시 노면표시(유턴, 539호표)를 2개 이상 설치 할 것

- 9-3단계 공사시, 노량진수산시장 -> 노들섬방면은 좌회전 금지되므로 사전안내 및 우회도로 안내 할 것

- 9-3단계 공사시, 노들역 방면에서의 직진 2개차로 허용은 통제구간으로 진입하지 않도록 사전안내 및 우회도로 안내 할 것

- 9-3단계 공사시, 특히 강변북로(일산방면) 차량의 경우 원거리 우회하게 되므로 사전안내 방법을 다양화하고 안내 범위를 보다 넓은 구역으로 설정하는 안내 방법을 강구 할 것

- 백년다리조성공사는 현단계 검토안으로 노들고가 철거관련 교통안전시설심의가 필요한 사항으로 심의 통과후 재논의 필요