일상감사 의견서

수신 : 치수과                                2020. 1. 16.

접수번호	2020-4	업무주관	부 서	치수과
			담 당	시설8급 조형준
사업명	2020년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)
감 사 개 요
□ 사업개요 가. 사 업 명 : 2020년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가) 나. 사업기간 : 착수일로부터 ~ 2020.12.31 다. 소요예산 : 금1,100,000천원(구비) 라. 사업개요 - 하수관개량(D250mm~D800mm) : L=1,570m - 맨홀 신설 및 개량 : N=65개소 - 빗물받이, 횡단하수거 신설 및 개량 : N=119개소
감사결과 조치의견
□『2020년 관내1구역 하수시설물 보수공사(연간단가)』건에 대한 일상감사 결과 아래와 같이 원가산출 등 일부조정이 필요한 부분이 있으니 시정 후 조치결과를 제출하여 주시기 바라며, 아울러 감사의견에 별도 의견이 있을 시 관련근거를 제출하기 바랍니다. ▶ 총괄금액 조정(조정액 : 감 21,969천원) ○ 원 안 : 1,100,000천원 ○ 일상감사 조정안 : 1,078,031천원 ▶ 일위대가 조정 ○ 도로경계석 설치 : 특별인부 0.027인/㎡→ 0.024인/㎡ ▶ 자재단가 조정 ○ 폴리에틸렌이중벽관(D=450mm) : 59,840원/m→47,100원/m

▶ 참고사항

○ 4대 보험료에 대한 정산 철저

○ 설계변경 후 기성금 지급시에는 현장 확인 및 관련 증빙자료에 의거      정산을 철저히 하기 바람.

기타 참고사항

▶ 연간단가 작업지시 및 제비용 정산 관련

□ 작업지시 관련

□작업지시를 가능한 1회당 4,000만원 이하로 작업지시 및 정산조치

단, 1회당 4,000만원 이상으로 작업지시가 불가피한 공사는 예외

□작업지시서에 작업방법(인력․기계, 주간․야간 등)을 명확히 구분하여 지시

□완료보고 접수시 작업방법 확인 및 작업수량 확정

□ 제비용 정산관련 (공사설명서에 정산관련 명기)

□산업안전보건관리비 : 4천만원 이상 건설공사에 적용(1회 작업지시 금액에 따라 정산)

□4대 보험료 : 사후정산 철저

▶ 기타사항(하도급 부조리 근절 관련)

□ 하도급 부조리 근절을 위한 개선사항 이행 철저

1. 주계약자 공동도급제

• 적용대상 : 추정가격 2억원이상 100억원 미만으로 종합+전문업체로 구성되는 공사

• 시행방법 : 종합 + 전문건설업체가 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가

2. 하도급표준계약서사용

• 적용대상 : 하도급 계약이 포함된 공사 전부

• 시행방법 : - 하도급 계약시 「하도급 표준계약서」 사용 추진

- 건설기계 임대 표준계약서 사용

3. 하도급직불제

• 적용대상 : 하도급 계약이 포함된 공사 전부

• 시행방법 : 종합, 전문건설업체가 직불을 합의한 경우 발주자 직접지급

4. 하도급대금 지급예고 알림판 설치 및 SMS문자 전송

5. 하도급계약 적정성 검토 철저

6. 도급자 및 하도급자에게 하도급부조리 근절 공한문 발송

□ 건설공사대장 전자적 통보시행철저(http://cws.kiscon.net/main.aspx)

□ 통합공사관리시스템 입력 철저(http://tpmis.seoul.go.kr)