자문 검토 의견서

○ 둔촌로 하수암거 신설공사 (2공구)

안 건	검 토 의 견
둔촌로 하수암거 신설공사 (2공구)	1. 공사내용 추가제시 1) 기초 유무 및 기초의 종류 2) 현장타설 시공구간과 프리케스트 시공 구간 표시 3) 공사점용면적 적정성 검토 자료 (1) 장비 및 차량제원 제시 - 현장타설 구간 : 굴착장비(최소 작업시 회전반경 포함), 운반차량, 펌프카, 믹셔트럭 - 프리케스트 : 굴착장비(회전 작업시 최소 회전반경 포함), 토사 및 자재 운반차량, 크레인(회전 작업시 최소 회전반경 포함) (2) 단계별 차량 및 장비 배치도(굴착시 및 압거 부설 또는 타설시) (3) 단계별 차량 및 장비 진출입 동선 2. 도면의 불일치 사항 정리(전체 단계 재검토) 1) 펌프카, 크레인 등 공사장비 작업폭 보다 점용면적이 협소(예 : 4단계 크레인 7.2m, 점용면적 6.2m) 2) 하수암거 굴착 단면도 치수 확인(예 : 6단계 4.0×3.0m 암거 가시설 폭원 8.0m, 7단계 2.5×2.0m 암거 가시설 폭원 8.0m) 3. 복공구간(1∼3단계, 8단계∼40단계) 공사시행 및 점용면적 재검토 1) 굴착 공사시 차량 및 장비 진출입 동선, 굴착장비 및 토사운반 차량 배치도를 통하여 교차로구간, 횡단보도 구간, 단계별 굴착구간 종점에 대한 공사 시행 가능 여부 2) 암거 타설 및 부설시 펌프카, 믹셔트럭, 크레인, 자재 운반차량 제원과 크레인의 회전 필요성 등을 확인, 장비와 차량의 배치도를 통한 공사 시공가능 여부 4. 개착구간(4∼7단계)에 대한 공사시행 및 점용면적 재검토 1) 굴착 공사시 차량 및 장비 진출입 동선, 굴착장비 및 토사운반 차량 배치도를 통하여 횡단보도 구간(4 및 5단계)과 단계별 굴착구간 종점부에 대한 공사시행 가능 여부 2) 암거 부설시 크레인, 자재 운반차량 제원과 크레인의 회전 필요성 등을 확인, 장비와 차량의 배치도를 통한 공사 시공가능 여부 5. 용역 계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 30