제물포터널 관련 행정절차 진행결과

□ 목    적

○ 제물포길의 상습정체 해소, 인천공항과의 접근성 개선 및 자동차전용도로로 인한 지역단절 해소에 대한 주민들의 숙원 해결을 위한 기틀마련

□ 사업개요

○ 사업위치 : 양천구 신월동(신월IC) ~ 영등포구 여의도동(여의대로, 올림픽대로)

○ 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 7.53km (소형차 전용)

○ 사업기간 : 2010. ~ 2020.

○ 총사업비 : 454,657백만원('07.3월 불변기준)

- 재원분담내역 : 시비 79,395 / 민간자본 375,262백만원

□ 추진현황

○ '07.07.27  : 민간제안서 제출

○ '09.02.02  : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI 공공투자관리센터)

○ '10.05.26  : 재정계획심의위원회 심의(서울시)

○ '10.06.25  : 민간투자사업심의위원회 심의(기획재정부)

○ '10.12.30  : 시의회 동의

○ '11.01.20  : 제3자 제안공고

○ '11.06.16  : 우선협상대상자 선정(대림산업 등 14개사)

○ '13.05.02  : 재정계획심의위원회 심의 완료

○ '13.05.05~16  : 도시계획시설(도로) 결정 열람공고

○ '13.06.04~07.02  : 환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회 개최

○ '13.07.10  : 사전재해영향성검토위원회 심의

○ '13.10.04  : 도시계획시설(도로) 결정고시

○ '13.11.15  : 민간투자사업심의위원회 심의 (원안의결)

○ '14.05.09  : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ '14.11.24  : 환경영향평가 공청회(1차)

○ '14.12.05  : 환경영향평가 공청회(2차)

○ '15.07.27  : 환경영향평가 협의(한강유역환경청) 완료

○ '15.08.10  : 교통영향분석·개선대책 심의 완료

○ '15.09.17  : 실시계획 승인 고시

○ '15.10.16  : 공사착공