도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(13차)

◉ 강서구청 사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사(2단계) : 조건부 시행

(주심위원 확인 : 박상섭 위원, 이지언 위원)

1. 복공 해체후 포장 단계 도면을 추가하기 바람

2. 작업장 배치도에 크레인 및 트레일러 배치계획을 포함하기 바람

3. 1구간 1단계 용량초과로 인한 정체가 우려됨으로 직진신호를 추가하는 방안을 검토하기 바람

4. 1-2단계 우회전시 횡단보도 신호로 인한 직진이 어려움으로 횡단보도를 전방으로 이전하는 방안을 검토하기 바람

5. 교통량은 분리하여 표기하기 바람

6. 2구간 2단계 좌회전 차로 용량이 줄어들어 정체가 예상됨으로 신호 현시 조정 등을 검토하기 바람

7. 2구간 1, 2단계 올림픽대로 이용 차로변경구간이 짧아 사고 위험성이 높음으로 단계를 분리 시공하여 차로변경구간을 길게하는 방안을 검토하기 바람

8. 1구간 1단계 유도선 및 표지판을 수정하고, 1구간 4단계는 표지판을 수정하기 바람

9. 2-4단계는 분리 시공하기 바람

10. 발주처(감리원)은 공사 착공 직전에 도로점용공사장 교통소통대책 자문사항 이행여부를 확인하기 위한 점검계획서를 제출하고, 현장점검(점검표)을 실시(주․야간 각각 1회 이상)하여 그 결과를 매월 25일까지 E-메일(lbt36351@seoul.go.kr) 또는 팩스(2133-1053) 전송 제출하기 바람(공사감독책임자 서명 필)