계약심사 조정내역 및 사유서(총괄)

□ 공 사 명 : 가양나들목 개선공사

□ 사업개요

위 치	강서구 가양동(가양나들목)
공사개요	- 계단구조물 개선 및 E/V 구조물 개선 - E/V신설, 나들목 내부개선, 조경식재 등
공사기간	2018.2~12

□ 심사평가 결과

(단위 : 천원)

구 분	토 목	건 축	조 경	합 계
설계금액	465,345	75,370	85,563	626,278
심사금액	426,978	73,844	86,397	587,219
절 감 액	38,367	1,526	-834	39,059
절 감 률	8.2%	2.0%	-1.0%	6.2%

【 토  목 】

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 경유: 1,304.7원/ℓ→1,319.8원/ℓ(’18년3월 석유공사 발표)

- 내수합판: 28,900원/매→8,419원/㎡

- H형강: 840,000원/톤→790,000원/톤(물가정보P78) 외9종

◦ 내역서 조정

- 재비율 조정

· 산업안전보건관리비: 5억~50억미만→5억미만 적용

◦ 일위대가 조정

- 공구손료 및 잡재료비: 경비→재료비

- 석재판 습식바닥 붙임: 서울형 개선품 적용

- 합판거푸집 조정: 표준품셈6-3-1적용

- 강판구멍뚫기(14mm): 서울형개선품 적용

- 모르타르: 표준품셈15-1-1적용

- 방수층보호재: 12-1-3(건축)적용

◦ 단가산출 조정

- 와이어메쉬깔기: 표준품셈14-3(건축)적용

- 말뚝박기천공: 천공길이10m미만 적용, 서울형개선품 적용

- 융착식도료수동식: 표준품셈10-6-2적용

- 잔토운반: 적재시간(t1)10분초과 시 적재시간 제외, 표준품셈9-1적용

◦ 도면 및 시방서 조정

- 도면은 심사 중 변경된 내용으로 보완 후 발주

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 물량내역서, 시방서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

◦ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

【 건  축 】

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 7종 (△434천원)

◦ 일위대가 조정

- 화강석 습식바닥 붙임 : 품셈 → 서울형 품셈 적용 (△902천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

【 조  경 】

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

◦ 발주처 단가 적정