자문 검토 의견서

○ 역삼지하보도 연결통로 설치공사

안  건

검 토  의 견

역삼지하보도 연결통로 설치공사

1. 1) 1단계 복공

- 작업차량 이동경로 확인 및 이에 따른 안전운영 방안 등 제시 필요

- 횡단보도 이설에 따른 보행신호기 이설 및 차량 신호등 추가 설치 계획 내용 부재

2) 1, 4단계 복공

(소통) 점용시간은 야간이나, 굴착구간으로 인해 차로 용량이 감소함에 따라 발생하는 지체에 대한 대처 방안 필요(1, 4단계 약 45일)

- 차로수 감소, 정지선 이설 등으로 용량 대폭 감소

- 첨두시, 용량 감소로 인한 앞막힘 현상 등의 발생가능성 검토 필요

- 도로점용으로 용량이 감소하는 기간의 경우 우회경로 안내 필요여부 검토

3) 1단계, 4단계 복공

- 보도폭 2m 확보로 최소 유효보도 폭을 확보하고 있으나, 총 공사 기간 동안 사업지내 공간을 활용하여 일정한 보행경로 및 보도폭을 확보할 수 있는 방법 검토 필요

- 2단계, 5단계 공사 시에는 사업지 내 보행공간을 활용하여 일시적으로 보도폭 3.0m 이상 확보하고 있음

《 사전검토보고서 관련 공통사항 》

① 교통처리계획도는 현황도  공사 총괄도  단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람

※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람

② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람

③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람

④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람

⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람

⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람

2019. 10. 14.