설계변경 자문회의 결과에 대한 조치계획 검토의견

【북단IC C,D램프 재설계에 대한 공사반영】

2 0 1 4.  1 2

월드컵대교 건설공사

(주)포스코엔지니어링 (주)동일기술공사	감리 검토의견서	2014. 12
현 장 명	월드컵대교 건설공사
검 토 건 명	북단IC C,D램프 재설계에 대한 공사반영

1. 공 사 명  : 월드컵대교 건설공사

2. 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동(증산로) ~ 영등포구 양평동(서부간선도로)

3. 공사종류  : 교량신설

4. 사업개요  : 총연장 L=1,980M(주경간교 855M)

폭  원 B=31.4M(왕복 6차로)

연결로 : 5개소/4,030M(북단)

6개소/2,893M(남단)

5. 공사기간  : 2010년 03월 22일~2015년 08월 22일(66개월)

6. 도 급 자 : 삼성물산(주), 삼성엔지니어링(주), 이화공영(주)

7. 설계변경 자문회의(소위원회) 심의 지적사항에 따른 조치현황

(단위 : 천원)

구 분	심 의 지 적 사 항	조 치 결 과	증.감액	비 고
북단IC C,D램프 재설계에 대한 공사반영	○물푸기, 강관비계, 강관비 계다리 수량산출근거를 확 인할 수 없으니 보완할 것 (p1236)	○Page1391, Page1396 확인	-	첨부 #11
	○비계 및 비계다리 수량이 도면높이와 상이하니 확인 후 보완할 것 (p1396)	○보완후 감액	-12,989,030	첨부 #12
	○내역서(p1238), 잔토처리 (p1391), 잔토처리 70% (p1398) 내용이 상이하니 재검토하여 조정할 것	○조정후 감액	-262,650
	○기타, 기존 분류하수관 구 조물에 피해가지 않는 구 조적 안전공법을 적용하여 안전시공이 되도록할 것	○안전시공 하겠음	-
소 계

8. 설계변경 자문회의(소위원회) 결과에 따른 공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	자문 요청금액 (A)	설계변경 자문회의 절감금액 (B)	최종 반영금액 (C=A-B)	비 고
북단IC C,D램프 재설계에 대한 공사반영	-267,490,000	-13,251,680	-280,741,680

9. 검토결과

월드컵대교 건설공사 북단IC C,D램프 재설계에 대한 공사반영 실정보고는 발주처 승인     및 설계변경 자문회의(소위원회)가 완료된 상태로서,

설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항에 대하여 보완 조치하였으며 발주처 조치계획 보고   후 추후 설계변경시 반영하고자 함.

검토자 : 책임감리원 김 동 귀(인)