성북소방서 옥상 방수공사

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 4. 22 ~ 2014. 5. 10.

○  규    모 : 본서 옥상 등 3개소 방수공사

- 5층 옥상 바닥, 4층 강당지붕 및 옥탑 등 방수공사

○  추진방식 : 전자공개수의계약

○  총사업비 : 금51,900천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	51,900	42,014	42,014	9,886	80.95%
시 설 비	51,900	42,014	42,014	9,886	80.95%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 100% / 실적 100%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

- 현재 사업완료(2014.5.10.)

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 3월 ◦방수공법 등 자체심의회 : 4월 ◦입찰공고 : 4월 ◦계약체결 : 4월 ◦공사착공 : 4월 ◦준공 및 검수 : 5월 ◦대가지급 : 5월	◦추진계획수립 : 4월 ◦방수공법 등 자체심의회 : 4.11 ◦입찰공고 : 4. 14 ◦계약체결 : 4. 22 ◦공사착공 : 4. 22 ~ 5. 19 ◦준공 및 검수 : 5. 14 ~ 5. 20 ◦대가지급 : 5. 25

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 없음

○  개선방향

- 없음

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 박구순 담당자 : 양덕모

길음119안전센터 지붕 덮개공사

Ⅰ.  사업개요

○  사업기간 : 2014. 5. 1. ~ 2014. 6. 20.

○  규    모 : 길음119안전센터 중정부분 지붕 덮개공사

○  추진방식 : 전자공개수의계약

○  총사업비 : 30,000천원

Ⅱ. 추진결과

○  예산집행 실적

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	원인행위액	집행액	집행잔액	집행율
계	30,000				0%
시 설 비	30,000				0%

○  사업추진 실적

- 사업추진율 : 계획 100% / 실적 20%

	0%		10%		20%		30%		40%		50%		60%		70%		80%		90%		100%
계 획
실 적

※ 현재 교체공사 중

- 세부추진 사항

추진계획	추진실적
◦추진계획수립 : 4월 ◦건축미관심의 요청 : 5월 ◦설계용역 의뢰 : 5월 ◦입찰공고 및 계약체결 : 5월 ◦착공 : 5월 ◦준공 : 6월 ◦검수 및 대가지급 : 6월	◦기본계획 및 방침수립 : 5월 ◦설계용역 의뢰 : 5월 ◦건축미관심의 요청(성북구청) : 5. 14

Ⅲ. 사업추진 애로 및 개선방향

○  애로사항

- 길음119안전센터 위치가 주변 아파트 및 대로변에 위치하여 관할       구청에 건축미관심의 요청 등으로 사업시기 지연

○  개선방향

- 상반기 사업종료할 수 있도록 업무 추진 철저

작 성 자	소방행정과 장비회계팀장 : 박구순 담당자 : 양덕모