[※ 사전 작성 목록]

상수도 시설물 안전감사 자료

2016년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

(장기계속단가)

2016.  11.

2016년 강서수도사업소 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 강서수도사업소 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 위    치 : 강서구 관내 상수도 시설물

○ 사업내용 : 노후 제수밸브 교체 160개소, 변실 정비 280개소

가압장 배수지 유지관리 40개소

○ 사업기간 : 2016. 4. 27 ~ 2017. 4. 30

- 계약일 : 2016. 4. 22

- 착공일 : 2016. 4. 27

- 준공예정일 : 2017. 4. 30

○ 도 급 비 : 645,553,000원

○ 시 공 사 : 효산건설  대표 김홍수

○ 감 리 단 : ㈜이준엔지니어링  대표 나석근

2. 공정율(2016.10.30. 현재기준)

○ 계획 : 100%,  실시 : 71%

3. 진행공정(예)

○ 완료공정 : 토목(없음 _ 단가계약공사에 따른 공사기간내 진행사업)

○ 진행공정 : 토목(토공 75%, 부설공 67%, 구조물공 68%, 포장공 70%,

부대공 77%)

○ 잔여공정 : 토목(토공 25%, 부설공 33%, 구조물공 32%, 포장공 30%,

부대공 23%)

<현장사진> - 2015.11.19. 현재

노후밸브 교체	배수지 제초작업

4. 발주전 계약심의 내용

○ 심사요청일 : 2016. 3. 8

○ 심사결과 통보일 : 2016. 3. 11

○ 주요 심사내용

주요공종	개요	계약심의 금액(단위 : 천원)			주요심사 내용
		당초	변경	증감
구조물공	철개고정장치 설치공 (지세할증)	752,180	738,400	감)13,780	중기기초자료 조정 수량 조정 제비율 조정

※ 붙임 : 설계심사 결과 통보(본부 재무회계과-3495호, 2016.3.11)

5. 설계변경내역                                             (단위 : 천원)

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금액	증감액
최초	645,553	-	- 노후밸브 교체 160개소 - 변실 정비 280개소 - 가압장 배수지 유지관리 40개소
1차 (2016.9.2)	645,553	-	- 공사물량 증·감사항 발생 * 증가 : 터파기 등 38개 공종 * 감소 : 원형밸브 설치공 등 4개 공종 - 신규 공종 발생 * 주철(이형관) 부설공 등 19개 공종

※ 검토서(실정보고서 등) 및 품의서 별첨

※ 공사 및 감리용역 포함

6. 현장 실정보고 현황                                       (단위 : 천원)

연번	제목	변경내용	공사비 증감			발주청 승인일	비고
			당초	변경	증감
		해당사항 없음

7. 기성지급 현황                                             (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
1차	2016.9.5.	201,790,000	201,790,000	노후밸브교체, 변실정비 및 가압장 배수지 유지관리
합계		201,790,000	201,790,000

※ 붙임 : 관련서류

1) 안전관리비 지급 현황                                     (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
	해당사항 없음

※ 붙임 : 관련 서류

2) 환경보전비 지급 현황(부대공 환경관리비 항목의 00%로 정산)

(단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요지급내용
	해당사항 없음

※ 붙임 : 관련서류

8. 하도급 현황                                           단위: 백만원

공종	수급인	하수급인	하도급통지기간		도급금액	하도급 금액	하도급율	기술자 자격현황	비고
			계약일자	통지일자
토 공	해당사항 없음
구조물
배수공
포장공

※ 변경내역 포함하여 작성

※ 특허, 신기술 등에 의한 계약건 표시

9. 공정(공사기간)

구분	사업기간	변경사유/기타
최초	2016. 4. 27 ~ 2017. 4. 30
1차변경	-	-
예정준공일	2017. 4. 30
공정율	71%	기준일 : 2016. 10. 31

※ 공사지연 사유 / 지연대책 및 만회계획 :

10. 감독, 시공책임자, 감리원 변경/교체 현황

구분	소속 및 분야	성명	근무기간	교체사유	비고
현장대리인	효산건설	이준호	2016.4.27. ~현재	-
상주감리원	㈜이준엔지니어링	박철웅	2016.4.27. ~현재	-

※ 붙임 : 관련서류

11. 재해발생 현황

구분	2013	2014	2015	비고
발생건수	해당없음	해당없음	해당없음
재해종류별
등급별
조치결과

※ 붙임 : 관련서류

12. 타 기관 감사현황(수사내용 포함)

일자	수행기관	감사내용	조치사항	비고
	해당없음

※ 관련 서류 일체 준비

13. 주요 민원처리 현황(5인이상 다수인 민원)

일자	민원인	민원내용	조치사항
	해당없음

※ 관련서류 일체 준비

14. 주요담당연락처

구분	분야	성명	소속	전화	휴대폰	비고
감독 (현장지원)	토목	김재엽	시설관리과	3146-4005	*************
시공	소장	이성범	효산건설	2109-8759	*************
	공무	이준호	효산건설	2109-8759	*************
감리	토목	박철웅	㈜이준엔지니어링	927-2527	*************

15. 관리기간 조서(착공시부터 ~ 현재까지)

구 분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재 직 기 간	담당업무	비고
	행위시	현 재
현 장 대리인	효산건설	효산건설	과장	이준호 (82.4.22)	2016.4.27. ~현재	공무
책 임 감리원	㈜이준 엔지니어링	㈜이준 엔지니어링	이사	박철웅 (51.12.17)	2016.4.27. ~현재	감리업무
업 무 담당자	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	주무관	김재엽 (72.3.5)	2016.4.27. ~현재	주무관	담당자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	주무관	문병희 (64.3.9)	2016.4.27. ~현재	주무관	시설물 총괄
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	팀장	김근용 (73.8.25)	2016.4.27. ~현재	팀업무총괄	1차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이자원 (56.10.15)	2016.4.27. ~2016.6.30.	과업무총괄	2차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이병운 (61.1.25)	2016.7.18. ~현재	과업무총괄	2차 관리자

작성자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설7급  성명 김재엽 (인)

확인자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설5급  성명 이병운 (인)