[※ 사전 작성 목록]

누수복구 공사장 안전감사 자료

2016년 강서, 양천, 구로구일대 긴급누수복구공사

2016.  11.

강서수도사업소

강서, 양천, 구로구일대 긴급누수복구공사

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 강서, 양천, 구로구일대 긴급누수복구공사

○ 위    치 : 강서, 양천, 구로구일대

○ 사업내용 : 긴급누수복구

○ 사업기간 : 2016.4.29 ~ 2017.6.30

- 계  약  일 : 2016. 4. 29

- 착  공  일 : 2016. 5. 02

- 준공예정일 : 2017. 6. 30

○ 도 급 비 : 2,542,251천원

○ 시 공 사 : ㈜범흥건설, 대표 김판권, 승원건설㈜, 대표 예수희

○ 감 리 단 : 이준엔지니어링㈜, 건설사업관리기술자(노덕환, 김원식)

2. 공정율(2016.10.30. 현재기준)

○ 계획 : 100%,  실시 42.2%

3. 진행공정

○ 완료공정 : 토목(없음, 연간단가계약공사에 따른 사업기간내 진행사업)

○ 진행공정 : 토목(토공 42%, 부설공 42%, 부대공 42%)

○ 잔여공정 : 토목(토공 58%, 부설공 58%, 부대공 58%)

<현장사진> - 2015.11.19. 현재

4. 발주전 계약심의 내용

○ 심사요청일 : 2016.3.16

○ 심사결과 통보일 : 2016.3.18

○ 주요 심사내용

주요공종	개요	계약심의 금액(단위 : 천원)			주요심사 내용
		당초	변경	증감
긴급누수 복구공사	-누수복구:1,000개소 -불용관정비:450개소	2,988,073	2,965,600	감 22,473	단가 및 수량산정적정성 제비율등 조정

※ 붙임 :  설계심사결과 통보

5. 설계변경내역                                                      (단위 : 천원)

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금 액	증감액
	해당사항없음

※ 검토서(실정보고서 등) 및 품의서 별첨

※ 공사 및 감리용역 포함

6. 현장 실정보고 현황                                                (단위 : 천원)

연번	제목	변경내용	공사비 증감			발주청 승인일	비고
			당초	변경	증감
		해당사항없음

7. 기성지급 현황                                                        (단위 : 원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
1차	2016.5.2~ 2016.6.10	268,785,000	268,785,000	토공, 부설공, 부대공
2차	2016.6.11~ 2016.7.10	259,710,000	528,495,000	토공, 부설공, 부대공
3차	2016.7.11~ 2016.8.18	267,234,000	795,729,000	토공, 부설공, 부대공
4차	2016.8.19.~ 2016.9.20	278,124,000	1,073,853,000	토공, 부설공, 부대공
합계		1,073,853,000

※ 붙임 : 관련서류

1) 안전관리비 지급 현황                                                 (단위 : 원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
	해당사항없음

※ 붙임 : 관련 서류

2) 환경보전비 지급 현황(부대공 환경관리비 항목의 00%로 정산)

(단위 : 원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요지급내용
	해당사항없음

※ 붙임 : 관련서류

8. 하도급 현황                                                        (단위: 백만원)

공종	수급인	하수급인	하도급통지기간		도급금액	하도급 금액	하도급율	기술자 자격현황	비고
			계약일자	통지일자
토 공	해당사항없음
구조물
배수공
포장공
강구조물공

9. 공정(공사기간)

구분	사업기간	변경사유/기타
최초	2016.5.2. ~ 2017.6.30
예정준공일	2017.6.30
공정율	42.2%	기준일 : 2016.10.31

10. 감독, 시공책임자, 감리원 변경/교체 현황

구 분	소속 및 분야	성 명	근무기간	교체사유	비고
현장대리인	(주)법흥건설	최종남	2016.5.2. ~현재	-
상주감리원	이준엔지니어링(주)	노덕환	2016.5.2. ~현재	-
	이준엔지니어링(주)	김원식	2016.5.2. ~현재	-

※ 붙임 : 관련서류

11. 재해발생 현황

구 분	2013	2014	2015	비고
발생건수	해당없음	해당없음	해당없음
재해종류별
등급별
조치결과

※ 붙임 : 관련서류

12. 타 기관 감사현황(수사내용 포함)

일자	수행기관	감사내용	조치사항	비고
	해당없음

※ 관련 서류 일체 준비

13. 주요 민원처리 현황(5인이상 다수인 민원)

일 자	민 원 인	민원내용	조 치 사 항
	해당없음

※ 관련서류 일체 준비

14. 주요담당연락처

구분	분야	성명	소 속	전 화	휴 대 폰	비고
감독 (현장지원)	토목	문병희	시설관리과	02-3146-3994	*************
	토목	박학중	시설관리과	02-3146-4011	*************
시공	소장	박진삭	㈜법흥건설	02-2696-2190	*************
	공무	최종남	㈜법흥건설	02-2696-2190	*************
감리	토목	노덕환	이준엔지니어링(주)	02-927-2527	*************
	토목	김원식	이준엔지니어링(주)	02-927-2527	*************

15. 관리기간 조서(착공시부터 ~ 현재까지)

구 분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재 직 기 간	담당업무	비고
	행위시	현 재
현 장 대리인	㈜법흥건설	㈜법흥건설	부장	최종남 (1974.9.6.)	2016.5.2~ 현재	현장감독
책 임 감리원	이준엔지니어링(주)	이준엔지니어링(주)	이사	노덕환 (1953.7.28.)	2016.5.2~ 현재	감리업무 (강서구)
	이준엔지니어링(주)	이준엔지니어링(주)	부장	김원식 (1964.5.10)	2016.5.2.~ 현재	감리업무 (양천,구로구)
업 무 담당자	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	6급	박 학 중 (1963.1.25.)	2016.5.2.~ 현재	누수복구담당	담당자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	6급	문 병 희 (1964.3.9.)	2016.5.2.~ 현재	누수복구총괄	1차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이자원 (56.10.15)	2016.5.2. ~2016.6.30.	과업무총괄	2차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이병운 (61.1.25)	2016.7.18. ~현재	과업무총괄	2차 관리자

작성자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설6급  성명  박 학 중  (인)

작성자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설6급  성명  문 병 희  (인)

확인자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설5급  성명  이 병 운  (인)