[※ 사전 작성 목록]

2016년 방화1동외 19개동 상수도 공사장

안전감사 자료

‘16년 방화1동외 19개동 상수도공사

2016.  11.

방화1동외 19개동 상수도공사

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 방화1동외 19개동 상수도공사

○ 위    치 : 강서구 방화1동외 19개동

○ 사업내용 : 신설 및 노후 상수도관 교체공사

○ 사업기간 : 2016. 6. 9. ~ 2017. 6. 30.

- 계약일 : 2016. 6. 7.

- 착공일 : 2016. 6. 9.

- 준공예정일 : 2017. 6. 30

○ 도 급 비 : 647,806,840원

○ 시 공 사 : ㈜익선건설

○ 감 리 단 : ㈜이준엔지니어링

2. 공정율(2016.10.30. 현재기준)

○ 계획 : 100 % ,  실시 70 %

3. 진행공정

○ 완료공정 : 토목(없음 _ 단가계약공사에 따른 공사기간 내 진행사업)

○ 진행공정 : 토목(토공70%, 배관공 70%, 구조물공 70%,  포장공 70%,부대공 70%,)

○ 잔여공정 : 토목(토공30%, 배관공 30%, 구조물공 30%,  포장공 30%,부대공 30%,)

<현장사진> - 2016.11.19. 현재

4. 발주전 계약심의 내용

○ 심사요청일 : 2016. 4. 29.

○ 심사결과 통보일 : 2016. 5. 4.

○ 주요 심사내용

주요공종	개요	계약심의 금액(단위 : 천원)			주요심사 내용
		당초	변경	증감
	D=15~300㎜ L=2,023m	768,519	744,571	감23,948	자재단가조정 수량 및 재비율등조정

※ 붙임 :

5. 설계변경내역                                             (단위 : 천원)

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금액	증감액
1회 (2016. 9. 9.)	647,806	변동없음	◯ 신규공종 및 물량 증감 - 스테인리스관 부설공(25mm,지세)등 99개 공종 물량 증감 ◯ 신규사급자재 - 이경소켓(슬립인조인트, 50/15)등 5개 자재

※ 검토서(실정보고서 등) 및 품의서 별첨

※ 공사 및 감리용역 포함

6. 현장 실정보고 현황                                       (단위 : 천원)

연번	제목	변경내용	공사비 증감			발주청 승인일	비고
			당초	변경	증감
		해당 없음

7. 기성지급 현황                                            (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
1차	2016. 8. 25	114,939,000	114,939,000	토공 및 관부설공
2차	2016. 9. 23	142,230,000	142,230,000	토공 및 관부설공
합계		257,169,000	257,169,000

※ 붙임 : 관련서류

1) 안전관리비 지급 현황                                     (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
준공		해당없음
합계

※ 붙임 : 관련 서류

2) 환경보전비 지급 현황(부대공 환경관리비 항목의 00%로 정산)

(단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요지급내용
해당사항없음

※ 붙임 : 관련서류

8. 하도급 현황                                           단위: 백만원

공종	수급인	하수급인	하도급통지기간		도급금액	하도급 금액	하도급율	기술자 자격현황	비고
			계약일자	통지일자
	해당사항없음

※ 변경내역 포함하여 작성

※ 특허, 신기술 등에 의한 계약건 표시

9. 공정(공사기간)

구분	사업기간	변경사유/기타
최초	2016.6.9. ~ 2017.6.30
예정준공일	2017.6.30
공정율	70%	기준일 : 2016. 10. 30

※ 공사지연 사유 / 지연대책 및 만회계획 : 해당없음

10. 감독, 시공책임자, 감리원 변경/교체 현황

구분	소속 및 분야	성명	근무기간	교체사유	비고
현장대리인	㈜익선건설	김용만	2016.06.01. ~현재	-
상주감리원	이준엔지니어링	김동건	2016.06.09. ~현재	-

※ 붙임 : 관련서류

11. 재해발생 현황

구분	2013	2014	2015	비고
발생건수	해당없음
재해종류별
등급별
조치결과

※ 붙임 : 관련서류

12. 타 기관 감사현황(수사내용 포함)

일자	수행기관	감사내용	조치사항	비고
해당없음

※ 관련 서류 일체 준비

13. 주요 민원처리 현황(5인이상 다수인 민원)

일자	민원인	민원내용	조치사항
해당없음

※ 관련서류 일체 준비

14. 주요담당연락처

구분	분야	성명	소속	전화	휴대폰	비고
감독 (현장지원)	토목	이승환	강서수도사업소	3146-3995	*************
시공	소장	김희봉	㈜익선건설	323-7316	*************
감리	토목	김동건	이준엔지니어링	927-2527~9	*************

15. 관리기간 조서(착공시부터 ~ 현재까지)

구 분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재 직 기 간	담당업무	비고
	행위시	현 재
현 장 대리인	㈜익선건설	㈜익선건설	부장	김용만 (62.01.15)	2016.6.1. ~현재	소장
책 임 감리원	이준엔지니어링	이준엔지니어링	차장	김동건 (74.05.15)	2016.6.22. ~현재	감리업무 총괄
업 무 담당자	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	시설8급	이승환 (79.02.06)	2016.1.18 ~현재	주무관	담당자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	팀장	김근용	2016.1.18 ~현재	팀업무총괄	1차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이자원 (56.10.15)	2016.1.18. ~2016.6.30.	과업무총괄	2차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이병운 (61.1.25)	2016.7.18. ~현재	과업무총괄	2차 관리자

작성자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설8급  성명  이승환(인)

확인자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설5급  성명 이병운 (인)