[※ 사전 작성 목록]

양천향교역~발산역 배수관 정비공사

안전감사 자료

배수관 정비공사

2016.  11.

배수관 정비공사

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 양천향교역~발산역 배수관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 마곡동 722-1 ~ 마곡동 727-31

○ 사업내용 : 배수관 부설 D=300~800㎜, L=810m

○ 사업기간 : 2016. 5. 20 ~ 2016. 11. 15

- 계약일 : 2016. 5. 19

- 착공일 : 2016. 5. 20

- 준공예정일 : 2016. 11. 15

○ 도 급 비 : 935,940,000원

○ 시 공 사 : ㈜건설넷 박정민, 청우건설(주) 배정규

○ 감 리 단 : 서울시 시설관리공단

2. 공정율(2016.11.15. 현재기준)

○ 계획 : 100 % ,  실시 100 %

3. 진행공정

○ 완료공정 : 토목(관로부설 100%)

○ 진행공정 : 해당없음

○ 잔여공정 : 해당없음

<현장사진> - 2016.11.15. 현재

4. 발주전 계약심의 내용

○ 심사요청일 : 2016. 3. 30

○ 심사결과 통보일 : 2016. 4. 8

○ 주요 심사내용

주요공종	개요	계약심의 금액(단위 : 천원)			주요심사 내용
		당초	변경	증감
A-파쇄물 운반	지세할증 삭제	1,094,392	1,071,400	22,992	자재단가조정 일위대가등조정

※ 붙임 :

5. 설계변경내역                                             (단위 : 천원)

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금액	증감액
최종 (2016.11.15.)	935,940	증)12,520	◯ 공사현장 여건 변동에 따른 신규공종 발생 - 주철직관 부설공(D300㎜) 주간 등 68건 - 사급자재 강 이음관(SP800㎜) 등 22종 - 기존관 폐쇄 충진(야간) ◯ 기타 물량 증․감에 따른 변경 - 주철직관 부설공(D300㎜) 야간 등 24건 - 강관 절단(D800㎜) 야간 등 69건

※ 검토서(실정보고서 등) 및 품의서 별첨

※ 공사 및 감리용역 포함

6. 현장 실정보고 현황                                       (단위 : 천원)

연번	제목	변경내용	공사비 증감			발주청 승인일	비고
			당초	변경	증감
1	횡단굴착에 따른 공법 및 노선변경	기존관 철거방법 변경	-	6,600	증)6,600	2016.7.7
		구조물BOX 주변 관로선형 변경	-	2,127	증)2,127
2	지장물에 따른 부설 노선 재변경	구조물BOX 주변 관로선형 재 변경	2,127	5,522	증)3,395	2016.9.9
	합계		2,127	14,249	증)12,122

7. 기성지급 현황                                            (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
준공	2016.11.23	935,940,000	935,940,000	상수도관 부설
합계		935,940,000	935,940,000

※ 붙임 : 관련서류

1) 안전관리비 지급 현황                                     (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
준공	2016.11.23	7,062,000	7,062,000	안전용품
합계		7,062,000

※ 붙임 : 관련 서류

2) 환경보전비 지급 현황(부대공 환경관리비 항목의 00%로 정산)

(단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요지급내용
해당사항없음	미지급

※ 붙임 : 관련서류

8. 하도급 현황                                           단위: 백만원

공종	수급인	하수급인	하도급통지기간		도급금액	하도급 금액	하도급율	기술자 자격현황	비고
			계약일자	통지일자
	해당사항없음

※ 변경내역 포함하여 작성

※ 특허, 신기술 등에 의한 계약건 표시

9. 공정(공사기간)

구분	사업기간	변경사유/기타
최초	2016.5.20. ~ 2016.11.15
예정준공일	2016.11.15
공정율	100%

※ 공사지연 사유 / 지연대책 및 만회계획 : 해당없음

10. 감독, 시공책임자, 감리원 변경/교체 현황

구분	소속 및 분야	성명	근무기간	교체사유	비고
현장대리인	㈜건설넷	김택수	2016.05.04 ~현재	-
상주감리원	서울시시설관리공단 공사감독2처	이지환	2016.04.04. ~현재	-

※ 붙임 : 관련서류

11. 재해발생 현황

구분	2013	2014	2015	비고
발생건수	해당없음
재해종류별
등급별
조치결과

※ 붙임 : 관련서류

12. 타 기관 감사현황(수사내용 포함)

일자	수행기관	감사내용	조치사항	비고
해당없음

※ 관련 서류 일체 준비

13. 주요 민원처리 현황(5인이상 다수인 민원)

일자	민원인	민원내용	조치사항
해당없음

※ 관련서류 일체 준비

14. 주요담당연락처

구분	분야	성명	소속	전화	휴대폰	비고
감독 (현장지원)	토목	정수용	강서수도사업소	3146-4021	*************
시공	소장	김택수	㈜건설넷	3443-8766	*************
감리	토목	이지환	서울시시설관리공단	2290-6033	*************
기타

15. 관리기간 조서(착공시부터 ~ 현재까지)

구 분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재 직 기 간	담당업무	비고
	행위시	현 재
현 장 대리인	㈜건설넷	㈜건설넷	직원	김택수 (82.03.26)	2016.5.20. ~현재	소장
책 임 감리원	서울시 시설관리공단	서울시 시설관리공단	6급	이지환 (83.05.10)	2016.5.20. ~현재	감리업무 총괄
업 무 담당자	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	시설7급	정수용 (73.01.14)	2016.5.20 ~현재	주무관	담당자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	팀장	김근용 (73.8.25)	2016.5.20. ~현재	팀업무총괄	1차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이자원 (56.10.15)	2016.5.20. ~2016.6.30.	과업무총괄	2차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이병운 (61.1.25)	2016.7.18. ~현재	과업무총괄	2차 관리자

작성자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설7급  성명  정수용(인)

확인자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설5급  성명  이병운(인)