[※ 사전 작성 목록]

강서구청사거리~가양역외 1개소

배수관 정비공사

안전감사 자료

배급수관 정비공사

2016.  11.

배급수관 정비공사

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 강서구청사거리~가양역외 1개소 배수관 정비공사

○ 위    치 :  강서구 등촌1동 656-17~628번지, 가양3동 449-19

○ 사업내용 : 배수관 부설 D=600mm, L=540m

○ 사업기간 : 2016. 4. 29.~ 2016. 10. 26.

- 계약일 : 2016. 4. 29.

- 착공일 : 2016. 4. 29

- 준공일 : 2016. 10. 26.

○ 도 급 비 : 313,521,670원

○ 시 공 사 : 거야건설㈜  대표 김성환

○ 공사감독 : 서울시 시설관리공단

2. 공정율(2016.11.30. 현재기준)

○ 계획 : 100% ,  실시 100%

3. 진행공정

○ 완료공정 : 토목(관로부설 100%)

○ 진행공정 : 해당없음

○ 잔여공정 : 해당없음

<현장사진> - 2016.11.30. 현재

4. 발주전 계약심의 내용

○ 심사요청일 :  2016. 3. 24.

○ 심사결과 통보일 :  2016. 3. 24.

○ 주요 심사내용

주요공종	개요	계약심의 금액(단위 : 천원)			주요심사 내용
		당초	변경	증감
토공 부대공 제비율	D=600mm L=540m	382,202	361,050	감 21,155	굴삭기작업효율 E값: 0.19→0.3 잔토처리 효율 E값: 0.3→0.5 하도급 발급수수료 0.07%→0.081%

※ 붙임 :

5. 설계변경내역                                            (단위 : 천원)

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금액	증감액
최종 (16.10.26.)	313,321	증1,129	· 공사현장 여건 발생에 따른 신규공종 발생 - 저소음 아스팔트 포장절단등 77건 · 물량 증·감에 따른 변경 - 증가 인력터파기 0-1m등 55건 - 감소 파쇄물 기계상차(집하장) 유압식 백호우 0.7㎥등 68건

※ 검토서(실정보고서 등) 및 품의서 별첨

※ 공사 및 감리용역 포함

6. 현장 실정보고 현황                                      (단위 : 천원)

연번	제목	변경내용	공사비 증감			발주청 승인일	비고
			당초	변경	증감
1	굴착 심도 증가	지장물로 인한 부설심도 증가			증)7,420	16.6.2.
2	기존관 연결 제외	하수도공사 일정 지연으로 연결공사 제외(D600×2개소))			감)51,000	16.6.28.
3	공사구간 변경 (차도⇒보도)	지장물로 인해 도종변경(A1⇒보도)			증)4,800	16.6.28.
4	누수다발시설물 추가 정비 지시	D700㎜ L=300m 추가 부설 부단수 차단공법 (D700㎜×1, D500㎜×1)			증)200,000	16.8.18.

7. 기성지급 현황                                           (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
1차기성	16.8.18.	128,650,000	128,650,000	D600㎜ L=415m 부설
준공	16.10.31.	186,001,000	314,651,000	D200㎜ L=50m 부설 및 부단수차단 (D700㎜×1, D500㎜×1)

※ 붙임 : 관련서류

1) 안전관리비 지급 현황                                    (단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
준공	16.10.31.	2,638,600	2,638,600	안전장비 구입비, 안전관리원 노임등

※ 붙임 : 관련 서류

2) 환경보전비 지급 현황(부대공 환경관리비 항목의 00%로 정산)

(단위 :  원)

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요지급내용
해당사항없음	미지급

※ 붙임 : 관련서류

8. 하도급 현황                                           단위: 백만원

공종	수급인	하수급인	하도급통지기간		도급금액	하도급 금액	하도급율	기술자 자격현황	비고
			계약일자	통지일자
	해당사항없음

※ 변경내역 포함하여 작성

※ 특허, 신기술 등에 의한 계약건 표시

9. 공정(공사기간)

구분	사업기간	변경사유/기타
최초	2016.4.29 ~ 2016.10.26	변경없음
예정준공일	2016.10.26
공정율	100%

※ 공사지연 사유 / 지연대책 및 만회계획 :

10. 감독, 시공책임자, 감리원 변경/교체 현황

구분	소속 및 분야	성명	근무기간	교체사유	비고
현장대리인	거야건설(주)	김형준	2016.04.29 ~10.26.	-
상주감리원	서울시시설관리공단 공사감독2처	이지환	2016.04.04. ~10.26.	-

※ 붙임 : 관련서류

11. 재해발생 현황

구분	2013	2014	2015	비고
발생건수				해당없음
재해종류별
등급별
조치결과

※ 붙임 : 관련서류

12. 타 기관 감사현황(수사내용 포함)

일자	수행기관	감사내용	조치사항	비고
				해당없음

※ 관련 서류 일체 준비

13. 주요 민원처리 현황(5인이상 다수인 민원)

일자	민원인	민원내용	조치사항
			해당없음

※ 관련서류 일체 준비

14. 주요담당연락처

구분	분야	성명	소속	전화	휴대폰	비고
감독 (현장지원)	토목	강은영	강서수도사업소	3146-4020	*************
시공	소장	김형준	거야건설(주)	2061-2831	*************
감리	토목	이지환	서울시시설관리공단	2290-6033	*************
기타

15. 관리기간 조서(착공시부터 ~ 현재까지)

구 분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재 직 기 간	담당업무	비고
	행위시	현 재
현 장 대리인	거야건설(주)	거야건설(주)	소장	김형준	2016.4.29. ~ 현재	과장
책 임 감리원	서울시 시설관리공단	서울시 시설관리공단	6급	이지환 (83.05.10)	2013.8.23. ~현재	감리업무 총괄
업 무 담당자	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	시설7급	강은영 (74.01.25)	2016.4.29 ~현재	주무관	담당자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	팀장	김근용 (73.8.25)	2016.4.29. ~현재	팀업무총괄	1차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이자원 (56.10.15)	2016.4.29. ~2016.6.30.	과업무총괄	2차 관리자
	강서수도사업소 (시설관리과)	강서수도사업소 (시설관리과)	과장	이병운 (61.1.25)	2016.7.18. ~현재	과업무총괄	2차 관리자

작성자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설7급  성명  강은영(인)

확인자 : 소속 강서수도사업소 시설관리과  직급 시설5급  성명  이병운(인)