소방관서 보수보강 공사

< 마포소방서 >

Ⅰ. 사업개요

□  사업내역 : 마포소방서 본서 옥상 방수공사 등 4개소

- 소방관서 환경개선(본서-체력단련장, 성산,서교,염리-식당)

- 마포소방서 본서 옥상 방수공사

- 마포소방서 본서 화장실 노후배관(오수 및 배수) 교체공사

- 내진성능평가(염리119안전센터)

□  사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 7.

□  총사업비 : 178,360천원

□  예산집행계획

(단위 : 천원)
예산액 (통계목별 작성)	계	1분기			2분기			3분기			4분기
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	178,360			9,560	68,000	39,000	4,800	60,000
시설비	176,560			9,560	68,000	39,000		60,000
자산취득비	4,800						4,800

Ⅱ. 추진계획

□  내진성능평가(염리119안전센터)

-  ’16.01.~02. : 기본계획수립

-  ’16.02.~03. : 계약 및 용역시행

-  ’16.03.~04. : 준공, 예산집행정산(정산, 대금지급)

□  소방관서 환경개선(본서-체력단련장, 성산,서교,염리-식당)

-  ’16.01.~02. : 기본계획수립

-  ’16.02.~03. : 공사발주 및 계약

-  ’16.03.~04. : 준공, 예산집행정산(정산, 대금지급)

□  마포소방서 본서 노후배관 교체공사

-  ’16.02.~03. : 업체견적 및 공사발주

-  ’16.03.~04. : 계약, 공사시행

-  ’16.04.~05. : 준공, 예산집행정산(정산, 대금지급)

□  마포소방서 본서 노후 집기류 교체

-  ’16.05. : 기본계획수립

-  ’16.05 : 조달계약(제3자단가)

-  ’16.06 : 납품 및 검사, 대금지급

□  마포소방서 본서 옥상 방수공사

-  ’16.05.~06. : 업체견적 및 공사발주

-  ’16.06. : 계약, 공사시행

-  ’16.07. : 준공, 예산집행정산(정산, 대금지급)

작 성 자	소방행정과장 : 000 ☎000-0000 장비회계팀장 : 000 ☎0000 담당 : 000 ☎0000