(소방관서 유지보수 세부 집행대책)

<관악소방서 소방행정과>

Ⅰ.  사업개요(편성기준)

○  시설비

- 자가주유취급소 개선공사 : 104,000천원(집행률 : 3%)

- 현장대응단 사무실 재배치 공사 : 28,000천원(집행률 : 00%)

- 내진 보수보강 공사(1건) : 100,000천원(집행률 : 5%)

- 본서 환경개선 공사 : 28,000천원(집행률 : 00%)

- 훈련시설 설치공사 : 33,000천원(집행률 : 00%)

- 소방관서 환경개선공사 등 : 18,000천원(집행률 : 100%)

○ 사무관리비

- 청사유지관리 소모품 구입 : 8,000천원(집행률 : 1%)

○ 공공운영비

- 보일러 세관 공사 : 4,500천원(집행률 : 00%)

- 청사 유지관리 공사 : 7,300천원(집행률 : 100%)

(단위 : 백만원, ‘18.5.14.기준)

구분	’18년 예산현액				원인행위		집 행
	계	시설비	공공 운영비	사무 관리비	금액	예산액 대비 %	금액	예산액 대비 %
계	335	306	21	8	53.6	16	45.2	13.5

※ 예산과목별 집행내용

∘ 시설비 : - 관악소방서 복지동 정밀안전진단 용역

- 온수가열기 교체설치공사

- 내진보강공사 및 자가주유취급소 개선공사 설계용역

∘ 공공운영비 : 차고 온풍기 교체, 식당 전기온수기, 차고문 수리 등

∘ 사무관리비 : 청사위생용품 구매

Ⅱ.  주요 추진경과 (예산집행 관련 사항 중점 기재)

○  ‘18. 2. ~ 18. 4. : 본서(복지동) 정밀안전진단 및 온수가열기(노후파손) 교체공사

○  ‘18. 3. ~ 18. 5. : 내진보강공사 설계 완료 및 공사 계약

○  ‘18. 3. ~ 18. 5. : 자가주유취급소 개선공사 설계

Ⅲ.  예산집행 저조 사유

○ 내진보강공사 설계 완료 및 공사 계약 완료(6월 중 집행 완료)

○ 자가주유취급소 개선공사 설계에 따른 사업진행 지연

- 설계완료 6월 중 공사 및 집행 완료 예정

○ 현장대응단 재배치공사 - 예산 부족으로 인하여 타 공사 진행후 예산 반영하여 공사 예정

Ⅳ.  시설비 및 공공운영비(청사 보수보강 공사) 집행 대책 및 향후계획

○  예산집행대책(시설비 : 306,000천원)

- 현장대응단 사무실 재배치 공사 : 28,000천원

⇒ 18. 6. 2.까지 기본계획 수립 ⇒ 18. 6. 10.까지 수의계

⇒ 6월말까지 집행완료

- 내진보강공사 : 100,000천원

⇒ 기본계획 수립 완료 ⇒ 18.5.17. 수의계약 ⇒ 6월말까지 집행완료

- 자가주유취급소 개선공사 : 104,000천원

⇒ 기본계획 수립 ⇒ 18. 5. 30.까지 공개입찰

⇒ 6월말까지 집행완료 등

- 훈련시설 설치공사 : 33,000천원

⇒ 18. 6. 30기본계획 수립 ⇒ 18. 7. 30.까지 공개입찰

⇒ 8월말까지 집행완료 등

- 본서 환경개선 공사 : 28,000천원

⇒ 18.7.31기본계획 수립 ⇒ 18. 8. 31.까지 공개입찰

⇒ 9월말까지 집행완료 등

○  향후계획

-  ‘18. 6. : 내진보강 공사 및 자가주유취급소 개선공사

-  ‘18. 7. : 현장대응단 사무실 재배치 공사

-  ‘18. 8. : 훈련시설 설치공사

-  ‘18. 9. : 본서 환경개선 공사

※ 월별 집행계획                                            (단위 : 백만원)

예산 현황		4월까지 집행액	집행률	향후 집행예상액
예산과목	예산액			소계	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계
시설비	306	33	10.8		3	181	28	33	28
공공 운영비
사무 관리비

※ 시설비만 집행이 부진한 기관(6.15.기준 ⇒ 집행률 40% 미만)에 대해서 집행대책 회의 할 예정

작성자	소방행정과장:왕상욱 ☎ 874-3119 장비회계팀장:남기범 ☎ 884-1192 담당:이영범 ☎884-1192