문서번호	도시철도설비부-10064
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
협 조
	시설전기과장
	주무관
	주무관
	주무관

9호선 2단계 기계설비분야 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 공정회의 결과보고

9호선 2단계구간(915~917공구) 기계설비분야 공사추진현황 및 현안사항 등에 대하여 협의코자 10월 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 공사개요

공구별	915 (926,927정거장)	916 (928,929정거장)	917 (930정거장)
계 약 금 액 (백만원)	99,630 (기계 13,263)	152,603 (기계 20,939)	113,194 (기계15,532)
공 사 기 간	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31
시 공 사	경남기업(주) 외 1	현대산업개발(주) 외 2	GS건설산업(주) 외 2
감 리 사	범창종합건설(주)	㈜대흥종합엔지니어링 건축사사무소	㈜유탑엔지니어링 건축사사무소

□ 회의개요

○ 일  시 : 2014. 10. 31(금). 14:00 ~ 17:30

○ 장  소 : 915공구 감리단상황실

○ 안  건

- 기계설비공사 추진현황 점검

- 미진 및 현안사항 협의 등

○ 참석자 : 15명

- 본부(5명), 감리단(4명), 시공사(3명), 자동제어공사 및 시스템업체(3명)

□ 회의결과

○ 926정거장 공사추진현황 점검(참석자 전원)

○ 각 공구별 기계설비분야 공사추진현황 및 현안사항 등 보고

(915~917공구 기계감리원) : 따로붙인 공정회의자료 참조

- 기계설비공사 추진현황 : 공사중(공정율 89.6%)

▹ 배관 및 닥트 설치공사, 승강 및 소방설비, 송풍기 및 배수설비 등

- 자동제어설비공사 추진현황 : 공사중(배관‧배선 및 시스템 설치 등)

- 주요 현안사항

▹ 915공구

‧ 926정거장 #2번 외부출입구 토목구조물이 기존 일정보다 계속 지연

(사유 : 지장물 이설 및 민원발생) 되고 있어 E/S 설치 공정 지연

▹ 916공구

‧ 928정거장 외부출입구(#2,#3,#5,#6)와 929정거장 외부출입구(#2,#3,#6)      토목구조물 지연(사유 : 지장물)으로 승강설비 공정저조, 정거장 환기구       (#1,#2) 구조물 미완료로 냉동기 및 장비시운전 지연(냉동기는               ‘15.5~6월경 시운전계획)

▹ 917공구

‧ 환승통로 토목구조물 지연으로 승강설비 입고 및 설치불가(‘14.11.13 입고 가능), 정거장 천정마감 지연으로 장비 및 냉동기 시운전 지연(’14.11월말부터 층별 시운전, 냉동기는 ‘15년에 실시계획)

※ 각 공구별 기계실 장비설치는 완료되었으나, 환기구 구조물 설치 및 건축마감 추진지연으로 장비설치 및 시운전 곤란

○ 자동제어설비 설치 및 시운전계획 추진에 따른 제반사항 협의

- 기계설비 공정추진에 맞게 향후 추진계획 수립‧제출 및 공사시행

(915공구는 종합사령실설비 조속설치, 기타설비는 공구별 추진)

○ ‘14.12월말 준공 및 ’15.3월초 개통대비 선행공정 및 운영사 등과 적극 협의․조치하여 인력투입, 돌관작업 등 강구시행(설비계획과장, 공사관리관)

- 공사기한내 공사 마무리 못할 경우에는 지체상금 부과계획임으로 이점 각별히 유의하여 선행공정 완료 즉시 기계설비공사 마무리 할 수 있도록 미진공정 파악 해당분야(토목,건축 등)에 사전조치요구

- 설계변경사항은 실정보고 등 준공기한내 사전조치 등 절차이행

- 불시점검에 대비하고 안전사고 없도록 공사관리 철저

○ 운영기관 요구사항 처리협조 및 특별점검 등에 대비 철저

- 운영기관 요구자료 제출, 특별점검 및 운영요원 교육에 적극 협조

- 냉동기 관리자 선임 및 검사실시 등은 운영사와 추후 협의․처리

- 우선 인수․인계 건은 우선 인계하고, 운영기관 요구사항은 추가설치 가능여부 등 사전협의 정리

○ 공구별 설비 통일화 협의결과

- 소화전함 및 소화기함(망입유리) : 남산체 빨간색

- 위생기구(유아용) 변기색상 : 백색 (색상이 있는 제품 미생산)

○ 타공정 협조사항

- 외부출입구, 정거장 환기구 구조물 완료 및 청소실시(토목부)

- 기계장비 시운전시 대비 개별점검을 위한 전원투입, 가설전기 철거시점에 맞춰 정거장 전기공급 시기조정 및 투입(정거장 전기)

- PSD 종합시운전에 따른 승강장 바닥 건축마감 및 외부 E/S 설치에 대한 캐노피 설치(건축부)

○ 기타 지시(당부)사항 등

- 지하철개통대비 기술심사담당관 점검결과 지적사항 조치 및 결과보고

- One-PMIS에 의한 업무(일일, 주간, 월간)보고 철저

- 수해 및 화재사고에 대비 및 동파방지대책 강구 시행 등

- 하도급대금 및 임금체불 없도록 조치(현장근로자 면담 및 표지판 정비)

□ 조치계획

○ 공정회의결과는 각 감리단 및 해당부서(도철토목부, 도철건축부)에 통보하여 준공기한내 설비공사 추진공정에 지장 없도록 조치요구

○ 향후 2주마다 공정회의 실시하되 회의자료는 미진부분 위주로 일정을 구체화 하여 종합시운전 실시토록 작성‧제출

○ ‘14.12월말 준공대비 기계설비공사 공정추진상황 관리(공구별 공사 관리관이 점검‧조치)

- 지연된 선행공정 완료시 기계공사가 바로 추진될 수 있도록 사전준비 및 공정만회대책 수립․제출(전 공구)

- 우수유입 등에 의한 수해설비는 원인 및 문제점 등 리스크를 조속히 파악하여 준공에 문제 없도록 수해복구 조치계획 수립․제출(915공구)

- 자동제어설비공사 추진현황 및 향후 추진계획 수립‧제출(전공구)

붙임 : 공정회의자료(915~917, 자동제어) 각 1부. 끝.