문서번호	도시철도설비부-6985
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
협 조
	시설전기과장
	설비공사과장
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

(9호선 2단계)

기계분야 시설물 점검 회의 결과 보고

추진 근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.7

도시기반시설본부 도시철도국

(도시철도설비부)

(9호선 2단계)

기계분야 시설물 점검 회의 결과 보고

지하철 9호선 2단계 기계분야 인수인계와 관련하여 시설물 점검 지적사항 완료여부 확인 및 합동점검 등에 대하여 관계자간 협의하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

❍ 일  시 : 2015. 7. 8(수) 14:30~16:00

❍ 장  소 : 916공구 감리단 회의실

❍ 참석자 : 총16명(본부 설비계획과장외 5명, 서울메트로 3명, 감리단 3명, 시공사 4명)

❍ 회의내용

- 시설물 합동점검을 위한 일정  시설물 점검 지적사항 조치내용 확인 및 협의

- 운영사 및 시공사 상호 협조 요청사항 등

Ⅱ		회의결과

❍ 점검지적사항 조치내용중 상이부분에 대하여 합동점검을 실시키로 협의하고 합동점검 세부일정 확정 통보

▷ 916공구 : 7.14(화)~15(수)  917공구 : 7.13(월)

※ 915공구는 별도로 유선협의후 점검 시행

❍ 예비품 인수인계는 917공구는 완료 및 916공구는 승강설비 인계 후 완료 통보예정

❍ 준공도서류는 준공시 토목, 건축, 기계, 전기 전체 인수인계 예정

※ 운영을 위해 준공도면은 1부 기지급함

❍ 기타 협조사항

▷ 잔여작업 및 시설물 점검는 가능한 주간에 실시하기로 협의함

Ⅲ		향후 조치계획

❍ 회의결과를 서울메트로, 감리단 및 시공사에 통보

붙임 : 참석자 명부 1부.  끝.