서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

열차무선설비

1단계연동 작업계획서

2014. 03. 11

	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품 구매설치	문서번호
		개정일자	2014. 03. 10
	시공계획서	개정번호	1.00

목   차

1. 개요	2

2. 구성도	3

2.1 코어라우터 구성	3

2.1.1 기존구성	3

2.1.2 변경후 구성	3

2.2 MTIG(EC포함) 구성	4

2.1.1 기존구성	4

2.1.2 변경후 구성	4

3. 시험계획	5

3.1 코어라우터 구성 변경	5

3.2 전화접속장치(MTIG) 설치	6

4. 예정공정표	7

5. 출입자 명단	8

6. 안전관리 및 환경관리 계획.......................................................................................................................................9

6.1 안전관리 계획.......................................................................................................................................................9

6.2 안전교육...................................................................................................................................................................9

6.3 환경관리 계획.......................................................................................................................................................9

6.4 사고보고계통도...................................................................................................................................................10

1. 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(2, 3단계) 정보통신설비 구축
2. 공정명	열차무선설비 신규 MTS4(기지국) 등록 및 MTIG(EC포함) 설치
3. 공사위치	관제 통신기계실
4. 공사목적	서울지하철 9호선 연장건설(2~3단계) 정보통신설비(열차무선 설비)의 MTS4(기지국) 등록 및 MTIG(EC포함) 신규 설치를 위해 기존 1단계 설비의 코어라우터 구성파일 변경 작업과 MTIG를 설치하여 시험 및 적용하기 위함.
5. 주요공종	1. 코어라우터 구성 변경 작업 코어라우터 구성 변경 임시 테스트용 TSC 시험 ZCM에 기지국 등록 및 시험 2. MTIG(EC포함) 설치 및 시험 신규 MTIG(EC포함) 설치 및 LAN 스위치간 케이블링 ZCM에 신규 MTIG 구성 임시 PABX를 이용한 테스트 시험
6. 공사기간	1. 2014. 03. 17 AM 10 : 00 ~ 2014. 03. 20 PM 22 : 00 2. 2014. 03. 31 AM 10 : 00 ~ 2014. 04. 09 PM 22 : 00
7. 주요자재목록	- 임시 테스트용 TSC, PSU 각 1개 - 임시 테스트용 PABX 1개 - 1단계 휴대용단말기 2대 임대요청 - 통신기계실내 테스트용도

2. 구성도

2.1 코어라우터 구성

2.1.1 기존 구성

4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L
SITE1	SITE2	SITE3	SITE4	SITE5	SITE6						원격 터미널
5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H	5I	5J	5K	5L

2.1.2 변경후 구성

4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L
SITE1	SITE2	SITE3	SITE4	SITE5	SITE6	2단계SITE7	3단계SITE8	3단계SITE9			원격 터미널
5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H	5I	5J	5K	5L

* SITE 7번은 2단계용 기지국, SITE 8번과 9번은 3단계용 기지국

* 코어라우터에 신규로 추가 구성만 하기 때문에 1단계 설비에 영향을 주지 않음

* 1단계 운영에 지장이 우려될 경우 즉시 중단하고 원상복구함

* E1선 연결추가 구성도

2.2 MTIG(EC포함) 구성

2.1.1 기존 구성

2.1.2 변경후 구성

*통화 채널 증설을 위한 MTIG 증설

*코어 LAN 스위치~MTIG, MTIG~EC, EC~PABX 는 E1으로 연결함

*신규로 MTIG 및 EC 추가 구성이 되기 때문에 기존 1단계 설비에 영향을 주지 않음

3. 시험계획

3.1 코어라우터 구성 변경

1) 작업일시 : 3/17(월)~20(금) 예정

2) 작업장소 : 관제 통신기계실

3) 작업예정사항

① 시스템 점검(3/17-주간업무)

: 현재 시스템 상태를 NMT 터미널을 이용하여 구성 상태 확인

② 코어라우터 구성파일 변경 구성 (3/19-야간업무)

: 신규 기지국 7번~9번까지 각 기지국당 256Kbps (4 타임슬롯) 으로 구성된 파일을 NMT 터미널을 이용하여 업로드 및 코어라우터 리셋 실시

③ 기지국 구성 확인 (3/20-주간업무)

: ZCM에 기지국 7~9번 구성

: 임시 테스트용 TSC를 신규로 구성 된 코어라우터(CWR 장치 이용)에 로컬 E1 인터페이스를 하여 각 기지국 구성이 정상적임을 확인

④ CWR 장치 7번 포트와 전송설비에서 제공하는 MDF 포트에 E1 연결(UTP케이블 포설)

⑤ 임시 테스트용 TSC를 이용한 구성도

4) 요청사항(운영사 협의하에 진행)

① 임시 테스트용 TSC 및 PSU 통신기계실 반입 허가

② 코어라우터 리셋시 열차무선 통화망 단절이 순간적으로 발생가능 하니, 관제에 작업시간       통보요청

* 코어라우터 작업 일시 : 3/19(수) 새벽 02:00~03:00

③ NMT 터미널 사용 허가 : 코어라우터 구성 파일 업로드 및 기지국 구성용

④ 기지국 7~9번을 시스템에 연결 테스트 하기 위하여 ZCM에 구성 테스트 허가

⑤ 관제 통신기계실 출입 허가

⑥ 2단계 열차무선 기지국 망개통을 위한 E1 포트 제공 및 개통 협조 요청(KVL 포함)

3.2 전화접속장치(MTIG) 설치

1) 작업일시 : 3/31(월)~4/9(수) 예정

2) 작업장소 : 관제 통신기계실

3) 작업예정사항

① 시스템 점검(3/31-주간업무)

: 현재 시스템 상태를 NMT 터미널을 이용하여 구성 상태 확인

② 전화접속장치 설치 (4/1~2-주간업무)

: 신규 전화접속장치, 에코캔슬러와 코어 LAN 스위치간 LAN 케이블링 및 E1 라인 포설

③ 전화접속장치 구성 (4/3~4-야간업무)

: ZCM에 신규 전화접속장치 구성,  통신기계실에 임시 테스트용 PABX 장치를 신규로 구성된 전화접속장치에 로컬 E1-QSIG 인터페이스를 하여 전화접속장치 구성 테스트 실시

④ 전화접속장치 구성 확인 (4/8~9-야간업무)

: 신규 전화접속장치에 로컬 E1-QSIG 인터페이스를 시켜 전화통화기능 테스트 실시

⑤ MTIG 테스트 구성도

4) 요청사항(운영사 협의하에 진행)

① 임시 테스트용 소형 PABX를 통신기계실에 반입 허가

② NMT 터미널 사용 허가: 전화접속장치 구성용

③ 야간 전화접속통화 테스트 시 전화접속용 휴대용무전기 2대 임대

④ 관제 통신기계실 출입 허가

4. 예정공정표

일정	시간	작업인원	항목	세부 작업	위치	비고
3/17	10:00~18:00 (주간)	정용범외 4명	시스템 환경 점검 및 임시 테스트 장비 반입	NMT를 이용하여 시스템 구성 상태 확인	종합관제 통신기계실
3/19	01:00~03:00 (야간)	정용범외 4명	1단계 코어라우터 환경 설정	코어라우터 1,2번 구성파일 업로드	종합관제 통신기계실	*유사시 기존 1단계 환경 원상 복구 *작업시간 통보 02:00~02:05, 02:30~02:35
			1단계 코어라우터 변경 구성 적용	코어라우터 2번 리셋 코어라우터 1번 리셋	종합관제 통신기계실
3/20	10:00~18:00 (주간)	정용범외 4명	신규 기지국 구성 확인 및 임시 테스트 장비 반출	ZCM에 기지국 추가 구성 임시 TSC를 이용한 구성 확인 CWR ~ 2단계 기지국 E1 연결	종합관제 통신기계실
3/31	10:00~18:00 (주간)	정용범외 4명	시스템 점검 및 임시 테스트 PABX 반입	현재 시스템 구성 상태 확인	종합관제 통신기계실
4/1 ~ 4/2	10:00~18:00 (주간)	정용범외 4명	신규 전화접속장치 및 에코캔슬러 설치	-전화접속장치 설치 -에코캔슬러장치 설치 -E1라인 포설	종합관제 통신기계실
4/3~4	02:00~04:00 (야간)	정용범외 4명	신규 전화접속장치 구성 추가	ZCM을 이용하여 전화접속장치 구성 추가	종합관제 통신기계실	*유사시 기존 1단계 환경 원상 복구
4/8~9	02:00~04:00 (야간)	정용범외 4명	전화접속장치 구성확인 및 임시 테스트 PABX 반출	임시 PABX 연결 테스트	종합관제 통신기계실

* 상기일정은 운영사 일정에 따라 협의를 통해 조정가능합니다.

* 시험장비 반입/반출시 운영사 관리하에 진행합니다.

5. 출입자 명단

□ 공사명 : 서울지하철9호선 연장건설 통신설비 구축(열차무선설비)

번호	이름	주민번호	주소	소속	핸드폰	비고
1	정용범	861216 – 1******	경기도 안양시 동안구 관양1동 1415-12	㈜현대정보기술	#############
2	서동록	780115 – 1******	서울 강서구 염창동 242-8 예성그린캐슬 101동 1301호	(주)리노스	#############
3	한승혁	681208– 1******	서울 중구 신당5동 래미안신당하이베르아파트 108동 501호	모토로라솔루션즈	#############

* 감독자(서울시, 감리단)는 명단 제외

6. 안전관리 및 환경관리 계획

6.1 안전관리 계획

(1) 합동안전관리

2단계 열차무선설비 작업원으로 인하여 1단계 영업운전에 지장을 주는 사항발생시 모든 민,형사상의 책임과 영업손실(이행 과징금등) 일체 배상을 책임진다.

(2) 관리감독

담당감리원 및 현장공사 관계자 입회하여 안전대책에 최선을 다한다.

(3) 안전점검구분

안전점검관리자 구분

총괄 책임자 : 현장대리인

공사관리 및 안전관리자 : 담당관리자

작업장별 관리자 : 현장투입 직원(관리감독자)

6.2 안전교육

(1) 작업 전 각 호의 안전교육 실시

1) 당일작업내용

2) 위험용인 및 방지대책

3) 참여기술자 및 작업자 개인별 임무 숙지

4) 안전사고 발생시 응급조치 요령

(2) 안전보호구 착용

1) 안전모, 안전화, 보안경등 개인보호구를 반드시 착용

(3) 사전점검

1) 전기용품 사용시 접지를 하여 작업원의 감전사고 예방

2) 작업원 적합성 점검(신체이상유무, 음주여부)

6.3 환경관리 계획

1) 작업 전, 주변 정리정돈 및 작업후 작업 폐기물을 수거후 분리 배출

6.4 사고보고 계통도