건축한계 측정자 명단 및 세부일정

1. 건축한계측정 담당자 명단 및 업무분장

부서명	직책	성 명	담당업무	비 고
도시철도토목부 도시철도설비부	과 장 주무관	윤방식 김용선	건축한계 측정 총괄지휘
	주무관	김찬오 문병종	진행 및 통제
	주무관	엄상민	측정장비 조작 확인
	주무관	공구별 토목 공사관리관	검측 수행	정거장 구 간
		김근수 최경호	검측 협조
	주무관	분야별 공사관리관	저촉시설물 검측 수행
	주무관	조태현	검측 기록
	주무관	한재호	검측현황 사진촬영

2. 세부일정

◦ 2017.11.12.(일) 01:00 ~ 04:00 : 건축한계 측정틀 현장반입

<1일차> -2017.11.14.(화)

◦ 08:30 ~ 09:00 : 도철토목부 측정담당자 사전 연습(931정거장 하선 시점부)

◦ 09:00 ~ 11:50 : 918~920공구(하선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

◦ 11:40 ~ 13:00 : 점심식사 및 휴식

◦ 13:00 ~ 17:50 : 918~920공구(하선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

<2일차> -2017.11.15.(수)

◦ 09:30 ~ 11:50 : 921~923공구(하선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

◦ 11:40 ~ 13:00 : 점심식사 및 휴식

◦ 13:00 ~ 17:50 : 921~923공구(하선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

<3일차> -2017.11.16.(목)

◦ 09:30 ~ 11:50 : 923~921공구(상선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

◦ 11:40 ~ 13:00 : 점심식사 및 휴식

◦ 13:00 ~ 17:50 : 923~921공구(상선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

<4일차> -2017.11.17.(금)

◦ 09:30 ~ 11:50 : 920~918공구(상선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

◦ 11:40 ~ 13:00 : 점심식사 및 휴식

◦ 13:00 ~ 17:50 : 920~918공구(상선) 본선 및 정거장 건축한계 측정

※ 측정시간 및 측정위치는 상황에 따라 조정가능

3. 준 비 물 (도시철도토목부)

◦ 레이져 측정기, L자형 측정자, 줄자(5m, 30m)

◦ 손전등(5개), 스프레이(백, 적색 각 3개), 안전봉 2개, 청테이프 10개

◦ 개인 안전 장구류, 관련도서, 체크리스트, 마스크 등