9호선 3단계 공정관리 현황(철도설비부)

분야	작업내용		마일스톤 완료예정일	완료 예정일
	주공정	세부공정		918	919	920	921	922	923
역사 전기	배관배선		‘18.9.30	외부 출입구, 승강기,sign	933정거장 #7,8번 출입구	#1출입구	대합실, 기능실, 승강장	#1번 출입구	완료
				‘18. 3.25.	‘18.5.14	‘18.5.27	‘18.3.31	‘18.9.30
	등기구 설치		‘18.5.31	‘18. 3.31	‘18.5.14	‘18.5.27	‘18.3.31	‘18.9.30	완료
	전열설비 설치		‘18.5.31	‘18. 3.31	‘18.5.14	‘18.5.27	‘18.3.31	‘18.9.30	완료
기계	환기시설 설치		‘18.2.28	‘18. 1.31	‘17.12.31	‘18.2.28	‘18.3.31	‘18.2.28	완료
	소방시설 설치		‘18.3.25	‘18. 3.25.	‘18.6.14	‘18.3.25	‘18.2.28	‘18.3.25	완료
	E/V 설치		‘18.4.15	‘18. 3.31.	‘18.6.14	‘18.6.30	‘18.3.31	‘18.9.30	‘18.01.30
	소방시설 완성검사		‘18.6.14	‘18. 4.30.	‘18.6.14	‘18.6.14	‘18.6.14	‘18.6.14	‘18.03.31
	E/S 설치		‘18.7.20	‘18. 3.31.	‘18.6.14	‘18.6.30	‘18.3.31	‘18.9.30	완료
	승강기 완성검사 필증 완료		‘18.9.30	‘18. 6.30.	‘18.6.30	‘18.6.30	‘18.6.30	‘18.9.30	‘18.03.31
통신	열차무선/복합통신	종합인터페이스 시험	‘18.8.30	‘18.8.30
	AFC설비	설치완료	‘18.6.30	‘18.6.30
		시험완료	‘18.10.5	‘18.10.5
	화상설비	장비반입	‘18.1.31	‘18.1.31
		승강장 CCTV설치	‘18.3.30	‘18.3.30
		시험완료	‘18.5.30	‘18.5.30
		출입구CCTV 설치	‘18.7.30	‘18.7.30
		종합인터페이스 시험	‘18.9.30	‘18.9.30

9호선 3단계 공정관리 현황(철도설비부)

분야	작업내용		마일스톤 완료예정일	완료 예정일
	주공정	세부공정		918	919	920	921	922	923
통신	방송설비	장비 설치완료	‘17.12.31	완료
		대합실 등 스피커 설치	‘18.5.30	‘18.5.30
		출입구 스피커 설치	‘18.7.30	‘18.7.30
		종합인터페이스시험	‘18.9.30	‘18.9.30
신호	지상~차상시험 연계시험 완료	선로데이터 측정시험	’18.5.31	‘18.2.28
		저속시험		‘18.4.30
		고속시험		’18.5.31

※ 919정거장 : 933정거장 #3,4,7,8번 환승역 출입구 토목공정(구조물설치) 지연

※ 920정거장 : 934정거장 #1번 출입구 토목공정(구조물설치) 지연

※ 921정거장 : 935정거장 #2환기실 토목공정(구조물설치) 지연

※ 922정거장 : 937정거장 #1번 출입구 토목공정(구조물설치) 지연