주요기계설비 설치 및 시운전계획

(926정거장)
(완료:◉, 설치중:▲, 미완료:×)                                                          ’14.09.18 현재

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
926	지하1층 환기실-1
	외기용 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	좌측 승강장 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	좌측 대합실 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	선로측 상부 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	선로측 하부 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	환기실-1 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	환기실-1 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	화장실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	전실 제연 급기팬 (좌측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	전실 제연 배기팬 (좌측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	저수조 (소화수조 겸용)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	급수펌프	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	소화 주펌프	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	소화 보조펌프	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	소화 압력탱크	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	정화조 관리층 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	정화조 관리층 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	좌측 승강장 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	좌측 승강장 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	좌측 대합실 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	좌측 대합실 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
926	지하2층 환기실-2
	냉각탑①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
926	지하2층 환기실-2
	환기실-2 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	환기실-2 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	외기용 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	CO2실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	CO2실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	전기실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	전기실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	통신기계실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	통신기계실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	우측 승강장 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	우측 대합실 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	선로측 하부 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	우측 승강장 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	우측 승강장 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	우측 대합실 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	우측 대합실 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	전실 제연 급기팬 (우측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	전실 제연 배기팬 (우측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	시스템 에어컨 실외기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	팩케이지 에어컨 실외기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
926	지하3층 환기실-3
	냉동기①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.15)	× (10.30)	× (11.15)	× (11.15)
	냉수순환펌프 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	냉각수순환펌프 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	냉수공급헤더	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	냉수환수헤더	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
926	지하3층 환기실-3
	냉수용 팽창탱크	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	선로측 상부 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	환기실-3 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	환기실-3 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
926	925E2 집수정
	지하수 배수펌프 ①②③④	◉	◉	◉	◉	◉	◉	완료	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	생활하수배수펌프 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.05)	× (10.15)	× (11.15)	× (11.15)
	재활용 펌프①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.15)	× (10.30)	× (11.15)	× (11.15)
926	정화조 관리층
	오수펌프①②							× (10.30)	× (11.05)	× (11.15)	× (11.15)
정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기 MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
926	본선 송풍기실
925	E2 배기팬 ①②③	× (10.30)	× (11.15)	× (11.15)	◉	× (11.15)	× (11.15)	× (11.15)	× (11.30)	× (11.30)	× (11.30)
	E1 배기팬 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (11.05)	× (11.30)	× (11.30)
	S1 급기팬 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (11.05)	× (11.30)	× (11.30)

□에스컬레이터                                        (완료:◉, 설치중:▲, 미완료:×) ’14.09.18 현재

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (에스컬레이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적사항조치	종합 시운전	비 고
		형식	높이 (H)	동력 (kW)			장비 반입	구조부설치	판넬 마감 (건축)	비계 해체 (건축)	핸드 레일	외장 마감
926	외부#1	1200형	18.5		2	× (9.30)	× (11.13)	× (11.14)	× (12.25)	× (12.30)	× (11.23)	× (11.30)	미정					공장 제작중
	외부#2	1000형	12.9		2	◉	× (10.23)	× (10.24)	× (10.30)	× (11.5)	× (11.03)	× (11.13)	미정					“
	외부#3	1000형	12.1		2	◉	× (10.23)	× (10.24)	× (11.30)	× (12.5)	× (11.03)	× (11.13)	미정					“
	외부#4	1200형	11.9		2	× (10.20)	× (11.08)	× (11.09)	× (12.25)	× (12.30)	× (11.18)	× (11.28)	미정					“
	외부#5	1200형	11.9		2	◉	× (11.03)	× (11.04)	× (12.20)	× (12.25)	× (11.13)	× (11.23)	미정					“
	외부#6	1000형	14.7		2	× (10.10)	× (10.01)	× (10.02)	× (12.10)	× (12.15)	× (10.10)	× (10.20)	미정					“
	외부#7	1000형	11.9		2	◉	× (10.01)	× (10.02)	× (11.15)	× (11.20)	× (10.10)	× (10.20)	미정					“
	외부#8	1200형	14.5		2	× (10.30)	× (11.08)	× (11.09)	× (12.25)	× (12.30)	× (11.18)	× (11.28)	미정					“
	외부#8-1	1200형	2.7		1	◉	× (10.28)	× (10.29)	× (11.30)	× (12.5)	× (11.08)	× (11.18)	미정					“
	내부계단#1	1200형	18		3	◉	◉	◉	× (11.10)	× (11.15)	◉	× (11.30)	미정					설치중
	내부계단#2	1200형	5.5		2	◉	◉	◉	× (9.30)	× (10.5)	× (10.15)	× (10.25)	미정					“
	내부계단#3	1200형	5.5		2	◉	◉	◉	× (9.30)	× (10.5)	× (10.15)	× (10.25)	미정					“
	내부계단#4	1200형	5.5		2	◉	◉	◉	× (9.30)	× (10.5)	× (10.15)	× (10.25)	미정					“
	내부계단#5	1200형	5.5		2	◉	◉	◉	× (9.30)	× (10.5)	× (10.15)	× (10.25)	미정					“
	소	계			28

□엘리베이터

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (에스컬레이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적사항조치	종합 시운전	비 고
		인승	정지층	동력 (kW)			건축철골설치	장비 반입	레일 설치	카조립	출입문 설치	건축유리마감
926	외부#2	15	2		1	◉	미정											공장 제작중
	외부#6	15	2		1	× (9.30)	미정											“
	내부상선	15	3		1	◉	× (9.30)	× (10.02)	× (10.10)	× (10.15)	× (10.20)	× (10.30)	미정					“
	내부하선	15	3		1	◉	× (9.30)	× (10.02)	× (10.10)	× (10.15)	× (10.20)	× (10.30)	미정					“
	소	계			4

주요기계설비 설치 및 시운전계획

(927정거장)
(완료:◉, 설치중:▲, 미완료:×)                                                          ’14.09.18 현재

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
927	환기실-1 (좌측공조실)
	좌측 승강장 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	좌측 대합실 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	좌측 승강장 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	좌측 승강장 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	좌측 대합실 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	좌측 대합실 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	외기용 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	선로측 상부 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	선로측 하부 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	환기실-1 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	환기실-1 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	통신기계실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	통신기계실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉수순환펌프 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉각수순환펌프 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉수공급헤더	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉수환수헤더	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉수용 팽창탱크	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉동기①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	냉각탑①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	시스템 에어컨 실외기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	팩케이지 에어컨 실외기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	전실 제연 급기팬 (좌측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	전실 제연 배기팬 (좌측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
927	환기실-2 (우측공조실)
	환기실-2 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	환기실-2 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	외기용 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	CO2실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	CO2실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	전기실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	전기실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	용역대기실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	우측 승강장 공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	선로측 상부 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	선로측 하부 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	우측 승강장 공조기 습식 데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	우측 승강장 공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	전실 제연 급기팬 (우측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	전실 제연 배기팬 (우측 특피계단)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	시스템 에어컨 실외기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
927	물탱크실
	저수조 (소화수조 겸용)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	급수펌프	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	소화 주펌프	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	소화 보조펌프	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
	소화 압력탱크	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)

정거장	장비명	펌프설치	펌프~배관연결	레벨스위치 설치 (현장판넬)	자동제어 DDC설치	장비~자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무식시운전 (2차)	정거장~사령실간시운전 (3차)
927	생활하수 집수정
	생활하수배수펌프 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.02)	× (10.16)	× (11.16)	× (11.16)
정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기 MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선(2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~사령실간 시운전 (4차)	비 고
927	본선 송풍기실
926	E2 배기팬 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (11.05)	× (11.30)	× (11.30)
	E1 배기팬 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (11.05)	× (11.30)	× (11.30)
	S1 급기팬 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (11.05)	× (11.30)	× (11.30)

□에스컬레이터                                        (완료:◉, 설치중:▲, 미완료:×) ’14.09.18 현재

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (에스컬레이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적사항조치	종합 시운전	비 고
		형식	높이 (H)	동력 (kW)			장비 반입	구조부설치	판넬 마감 (건축)	비계 해체 (건축)	핸드 레일	외장 마감
927	내부계단#1	1200형	19.5		2	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	미정					설치 완료
	내부계단#2	1200형	19.5		2	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	미정					“
	내부계단#3	1200형	19.5		2	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	미정					“
	내부계단#4	1200형	19.5		2	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	미정					“
	환승계단#1	1200형	6.5		2	◉	◉	◉	× (10.30)	× (11.5)	× (11.15)	× (11.20)	미정					설치중
	환승계단#2	1200형	6.5		2	◉	◉	◉	× (10.30)	× (11.5)	× (11.15)	× (11.20)	미정					“
	소	계			12

□엘리베이터

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (엘리베이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적사항조치	종합 시운전	비 고
		인승	정지층	동력 (kW)			건축철골설치	장비 반입	레일 설치	카조립	출입문 설치	건축유리마감
927	내부상선	15	2		1	◉	◉	× (9.19)	× (9.30)	× (10.15)	× (10.30)	× (11.10)	미정					반입 준비중
	내부하선	15	2		1	◉	◉	× (9.19)	× (9.30)	× (10.15)	× (10.30)	× (11.10)	미정					“
	환승상선	15	2		1	◉	◉	× (9.19)	× (10.11)	× (10.30)	× (11.10)	× (11.20)	미정					“
	환승하선	15	2		1	◉	◉	× (9.19)	× (10.11)	× (10.30)	× (11.10)	× (11.20)	미정					“
	소	계			4