주요기계설비 설치 및 시운전계획

(928,929정거장,본선)
(완료:◉, 설치중:▲, 미완료:×)                                                          ’14.09.18 현재

정거장	장비명	장비설치		자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)		정거장역무실자동제어 시운전 (2차)		화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)		정거장~ 사령실간 시운전 (4차)		비 고
928	B1층 좌측공조실
	냉동기①②	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	냉각탑①②	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	냉수순환펌프 ①②③	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	냉각수순환펌프 ①②③	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	냉각수살균장치①②	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #1	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #3	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	히트펌프공조기	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #1 자동세정필터	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #3 자동세정필터	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #5 자동세정필터	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #1 데미스터 필터	◉		◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	(좌)기계실+물탱크실 급기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	전기실+비상전원실 급기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	신호기계실+신호취급실 급기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	통신기계실 급기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	CO2+용역원창고등 급기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	승강장 선로부 급기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	(좌)기계실+물탱크실 배기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	전기실+비상전원실 배기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	신호기계실+신호취급실 배기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	통신기계실 배기팬		◉	◉	◉	◉	◉	◉		× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)

정거장	장비명		장비설치		자동제어 DDC설치		장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선		전기MCC설치		전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)		정거장역무실자동제어 시운전 (2차)		화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)		정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
928	B1층 좌측공조실
	CO2+용역원창고등 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	승강장 선로부 하부 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	실외기 배기용 배기팬(에어컨)		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	실외기 배기용 배기팬(AHU-5)		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
928	B1층 우측공조실
	공조기 #2	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (10.20)	× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #4	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (10.20)	× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #2 자동세정필터	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (10.20)	× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #4 자동세정필터	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (10.20)	× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #2 데미스터 필터	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (10.20)	× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	(우)기계실 급기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	정화조 관리층 급기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	승강장 선로부 급기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	(우)기계실 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	정화조 관리층 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	승강장 선로부 하부 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	화장실 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
928	B2층 PSD UPS실
	PSD기계실 배기팬		◉		◉		◉		◉		◉	◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
928	B1층 물탱크실
	급수 펌프	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (09.25)	X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	스프링클러 주펌프	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (09.25)	X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	스프링클러 보조펌프	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (09.25)	X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	옥내소화전 주펌프	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (09.25)	X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	옥내소화전 보조펌프	◉		◉		◉		◉		◉		◉	× (09.25)	X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
928	정거장 정화조 관리층
	오수펌프①②	◉		◉		◉		◉		◉		◉	X (10.10)	× (10.25)		X (11.05)		× (11.30)
	배수펌프①②	◉		◉		◉		◉		◉		◉	X (10.10)	× (10.25)		X (11.05)		× (11.30)

정거장	장비명		장비설치		자동제어 DDC설치		장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선		전기MCC설치			전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)			장비~전기배선결선 (2차측)			장비,자동제어,전기 시운전 (1차)		정거장역무실자동제어 시운전 (2차)		화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)		정거장~ 사령실간 시운전 (4차)		비 고
929	B1층 좌측공조실
	공조기 #1		◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #3		◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #1 자동세정필터		◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #3 자동세정필터		◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
	공조기 #1 데미스터 필터		◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		(좌)기계실 급기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		정화조 관리층 급기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		승강장 선로부 급기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		(좌)기계실 배기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		정화조 관리층 배기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		승강장 선로부 하부 배기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
		화장실 배기팬	◉		◉		◉		◉			◉			◉			× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
929	B1층 변전실
		변전실 급기팬		◉		◉		◉			◉			◉			◉	× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
		변전실 배기팬		◉		◉		◉			◉			◉			◉	× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
929	B2층 PSD UPS실
		PSD기계실 배기팬		◉		◉		◉			◉			◉			◉	× (10.20)		× (11.05)		X (11.20)		× (11.30)
929	B1층 물탱크실
	급수 펌프		◉		◉		◉			◉			◉			◉			× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	스프링클러 주펌프		◉		◉		◉			◉			◉			◉			× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	스프링클러 보조펌프		◉		◉		◉			◉			◉			◉			× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	옥내소화전 주펌프		◉		◉		◉			◉			◉			◉			× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
	옥내소화전 보조펌프		◉		◉		◉			◉			◉			◉			× (09.25)		X (10.10)		× (10.25)		× (11.30)
929	정거장 정화조 관리층
	오수펌프①②		◉		◉		◉			◉			◉			◉			X (10.10)		× (10.25)		X (11.05)		× (11.30)
	배수펌프①②		◉		◉		◉			◉			◉			◉			X (10.10)		× (10.25)		X (11.05)		× (11.30)

정거장		장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
929		B1층 우측공조실
	냉동기①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	냉각탑①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	냉수순환펌프 ①②③		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	냉각수순환펌프 ①②③		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	냉각수살균장치①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	공조기 #2		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	공조기 #4		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	히트펌프공조기		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	공조기 #2 자동세정필터		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	공조기 #4 자동세정필터		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	공조기 #5 자동세정필터		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
	공조기 #2 데미스터 필터		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		(우)기계실+물탱크실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		전기실+비상전원실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		통신기계실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		CO2+용역원창고등 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		승강장 선로부 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		(우)기계실+물탱크실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		전기실+비상전원실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		통신기계실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		CO2+용역원창고등 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		승강장 선로부 하부 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		실외기 배기용 배기팬(에어컨)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		실외기 배기용 배기팬(AHU-5)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)

정거장	장비명		장비설치		자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기 MCC설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
본선		본선 송풍기실
		927E2 배기팬 ①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.25)	X (10.10)	× (11.30)
		928E1 배기팬 ①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.25)	X (10.10)	× (11.30)
		928S1 급기팬 ①②③		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.25)	X (10.10)	× (11.30)
		928E2 배기팬 ①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.25)	X (10.10)	× (11.30)
		929E1 배기팬 ①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.25)	X (10.10)	× (11.30)
본선		928 본선 집수정
		지하수 배수펌프 ①②③④		◉	◉	◉	◉	◉	◉	X (11.20)	× (11.30)	X (12.10)	× (12.20)
		생활하수배수펌프 ①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	X (11.20)	× (11.30)	X (12.10)	× (12.20)
		재활용 펌프①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	X (11.20)	× (11.30)	X (12.10)	× (12.20)
본선		929 본선 집수정
		지하수 배수펌프 ①②③④		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		생활하수배수펌프 ①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)
		재활용 펌프①②		◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.20)	× (11.05)	X (11.20)	× (11.30)

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황		설치공사 (에스컬레이터)						전력 공급		개별 시운전	완성 검사	지적 사항 조치	종합 시운전	비고
		형식	높이 (H)	동력 (kW)				장비 반입	구조부설치	판넬 마감 (건축)	비계 해체 (건축)	핸드 레일	외장 마감
9 2 8	에스컬레이터
	#1 하부	1200형	8,92	15	2	◉	◉		◉	× (09.30)	× (10.05)	× (10.15)	× (10.25)	× (11.10)	× (11.20)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	설치중
	#1 상부	1200형	8,3	15	2	▲ (10.02)	× (10.03)		× (10.05)	× (10.30)	× (11.15)	× (11.20)	× (11.30)	× (12.10)	× (12.30)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#2 하부	1200형	9,171	15	2	▲ (10.25)	× (10.30)		× (11.05)	× (12.05)	× (12.10)	× (12.15)	× (12.25)	× (12.25)	× (12.30)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#2 상부	1200형	8.599	15	2	▲ (11.30)	× (11.30)		× (12.05)	× (01.05)	× (01.15)	× (01.20)	× (01.30)	× (01.30	× (02.05)		× (02.10)	× (02.10)	× (02.10)	제작 완료
	#3	1200형	20.086	15x2	2	▲ (11.20)	× (11.22)		× (11.25)	× (12.25)	× (01.10)	× (01.15)	× (01.25)	× (01.30	× (02.05)		× (02.10)	× (02.10)	× (02.10)	제작 완료
	#4	1200형	16,5	15x2	2	▲ (09.26)	× (09.28)		× (09.30)	× (10.30)	× (11.05)	× (11.10)	× (11.15)	× (11.15)	× (11.20)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#5	1200형	13,5	22	2	▲ (10.20)	× (10.22)		× (10.25)	× (11.25)	× (11.30)	× (12.05)	× (12.10)	× (12.15)	× (12.20)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#6	1200형	14	22	2	▲ (10.08)	× (10.10)		× (10.20)	× (11.20)	× (11.25)	× (11.30)	× (12.10)	× (12.10)	× (12.20)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#7	1200형	16,2	15x2	2	◉	◉		▲ (09.22)	× (10.15)	× (10.20)	× (10.30)	× (11.10)	× (11.10)	× (11.20)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	설치중
	내부	1200형	5,05	7.5	4	◉	◉		◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.21)	× (11.10)	× (11.20)		× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)
	소계				22

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황		설치공사 (엘레베이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적 사항 조치	종합 시운전	비 고
		인승	정지층	동력 (kW)				건축 철골 설치	장비 반입	레일 설치	카조립	출입문 설치	건축 유리 마감
928	엘리베이터
	외부#1	15	1	6.2	1	▲ (11.20)	× (12.11)		× (12.14)	× (12.18)	× (12.23)	× (12.27)	× (12.30)	X (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	공장 제작중
	외부#2	24	1	9.9	1	▲ (10.20)	× (11.20)		× (11.25)	× (12.05)	× (12.15)	× (12.15)	× (12.20)	X (12.20)	× (12.25)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	“
	내부#1	15	1	6.2	2	◉	◉		◉	◉	◉	◉	× (10.30)	× (11.10)	× (11.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	설치중
	소계				4

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황		설치공사 (에스컬레이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적 사항 조치	종합 시운전	비고
		형식	높이 (H)	동력 (kW)				장비 반입	구조부설치	판넬 마감 (건축)	비계 해체 (건축)	핸드 레일	외장 마감
9 2 9	에스컬레이터
	#1	1000형	11.1	18.5	2	▲ (10.20)	× (10.22)		× (10.25)	× (11.25)	× (11.30)	× (12.05)	× (12.10)	× (12.15)	× (12.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#2	1200형	10.7	18.5	2	▲ (10.20)	× (10.22)		× (10.25)	× (11.25)	× (11.30)	× (12.05)	× (12.10)	× (12.15)	× (12.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#3	1200형	16.4	15 x 2	2	▲ (10.20)	× (10.22)		× (10.25)	× (11.25)	× (11.30)	× (12.05)	× (12.10)	× (12.15)	× (12.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#4	1000형	15.1	22	2	▲ (09.30)	× (10.02)		× (10.05)	× (10.30)	× (11.05)	× (11.10)	× (11.20)	× (11.20)	× (11.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	#6 하부	1200형	9.435	15	2	▲ (10.10)	× (10.15)		× (10.20)	× (11.20)	× (11.25)	× (11.30)	× (12.20)	× (12.20)	× (12.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	제작 완료
	내부	1200형	5.08	7.5	8	◉	◉		◉	◉	◉	◉	× (10.15)	× (11.10)	× (11.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	설치중
	#1,2	1200형	6.05	11	2	◉	◉		◉	× (10.05)	× (10.10)	× (10.15)	× (10.25)	× (11.10)	× (11.20)	× (12.30)	× (12.30)	× (12.30)	설치중
	#6 상부	1200형	5.536	11	2	▲ (11.30)	× (11.30)		× (12.05)	× (01.05)	× (01.15)	× (01.20)	× (01.30)	× (01.30	× (02.05)	× (02.10)	× (02.10)	× (02.10)	제작 완료
	연결 통로	1200형	9	-	2	▲ (02.10)	× (02.10)		× (02.15)	× (03.15)	× (03.20)	× (03.25)	× (03.30)	× (04.05)	× (04.10)	× (04.15)	× (04.20)	× (04.20)	도면 미확정
	소계				24

정 거 장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (엘레베이터)										전력 공급	개별 시운전		완성 검사			지적 사항 조치	종합 시운전	비 고
		인승	정지층	동력 (kW)			건축 철골 설치	장비 반입		레일 설치		카조립	출입문 설치		건축 유리 마감
9 2 9	엘리베이터
	외부#1	15	1	16.4	1	▲ (10.20)	× (11.20)		× (11.25)	× (12.05)	× (12.15)			× (12.15)		× (12.20)	X (12.20)		× (12.25)		× (12.30)	× (12.30)		× (12.30)	공장제작중
	내부# 1,2	15	1	5.1	2	◉	◉		◉	◉	◉			◉		× (10.30)	× (11.10)		× (11.20)		× (12.30)	× (12.30)		× (12.30)	설치중
	연결 통로	15	1	15	1	▲ (12.10)	× (12.20)		× (12.25)	× (01.05)	× (01.15)			× (01.15)		× (01.20)	X (01.20)		× (01.25)		× (01.30)	× (01.30)		× (01.30)	도면미확정
	소계				4