주요기계설비 설치 및 시운전계획

(930정거장)
(완료:◉, 설치중:▲, 미완료:×)                                                           ’14.09.18

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기 MCC 설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
930	B2층 공조실
	냉동기①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	냉각탑①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	냉수순환펌프 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	냉각수순환펌프 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	냉각수살균장치①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30))	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #1	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30))	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #2	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	히트펌프공조기	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #1 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #2 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	히트펌프공조기 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #1 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #2 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	히트펌프공조기 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #1 제연 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #1 제연 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #2 제연 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #2 제연 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	정화조급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	정화조배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	피난계단(상) 제연급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	피난계단(상) 제연배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기 MCC 설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
930	B2층 공조실
	피난계단(하) 제연급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	피난계단(하) 제연배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	화장실 배기팬 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
930	B3층 공조실
	공조기 #3	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #4	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #5	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #3 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #4 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #5 습식데미스터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #3 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #4 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #5 중성능 필터	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #3 제연 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #3 제연 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #4 제연 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #4 제연 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #5 제연 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	공조기 #5 제연 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	선로 급기팬(상)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	선로 배기팬(상)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	선로 급기팬(하)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	선로 배기팬(하)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	전기실 급기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)
	전기실 배기팬	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (10.10)	× (10.15)	X (10.20)	× (11.30)

정거장	장비명	장비설치		자동제어 DDC설치		장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선		전기 MCC 설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)		장비~전기배선결선 (2차측)		장비,자동제어,전기 시운전 (1차)		정거장역무실자동제어 시운전 (2차)		화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)		정거장~ 사령실간 시운전 (4차)		비 고
930	B3층 공조실
	신호,통신 기계실 급기팬	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	신호,통신 기계실 배기팬	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	통로, 물탱크실 급기팬	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	통로, 물탱크실 배기팬	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	MCC실 급기팬	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	MCC실 배기팬	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	신호기계실 에어컨	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
	통신기계실 에어컨	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (09.30)		× (10.15)		X (10.20)		× (11.30)
930	물탱크실
	옥내소화전 펌프	◉		◉		◉		◉	◉		▲(9.20)		× (09.30)		× (10.15)		× (11.10)		× (12.10)
	옥내소화전 충압펌프	◉		◉		◉		◉	◉		▲(9.20)		× (09.30)		× (10.15)		× (11.10)		× (12.10)
	스프링클라 펌프 ①②	◉		◉		◉		◉	◉		▲(9.20)		× (09.30)		× (10.15)		× (11.10)		× (12.10)
	스프링클라충압 펌프	◉		◉		◉		◉	◉		▲(9.20)		× (09.30)		× (10.15)		× (11.10)		× (12.10)
	부스터펌프	◉		◉		◉		◉	◉		▲(9.20)		× (09.30)		× (10.15)		× (11.10)		× (12.10)
930	E2 집수정
	지하수 배수펌프 ①②③④	× (10.15)	◉		◉		◉		× (10.15)	◉		× (10.15)		× (10.15)		× (11.10)		× (11.30)		교체
	생활하수배수펌프 ①②	◉	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (10.15))		× (11.10)		× (11.30)
	재활용 펌프①②	◉	◉		◉		◉		◉	◉		◉		× (10.15)		× (11.10)		× (11.30)
930	정거장 정화조 관리층
	오수펌프①②	◉	x (9.30)		× (10.20)		× (10.25)		X (10.30)	X (11.03)		× (11.05)		× (11.10)		× (11.15)		× (12.10)
	배수펌프①②	◉	x (9.30)		× (10.20)		× (10.25)		X (10.30)	X (11.03)		× (11.05)		× (11.10)		× (11.15)		× (12.10)
930	환승통로 정화조 관리층
	오수펌프①②	× (10.19)	x (10.20)		× (10.25)		× (10.30)		X (11.03)	X (11.05)		× (11.10)		× (11.30)		× (11.30)		× (12.10)
	배수펌프①②	× (10.19)	x (10.20)		× (10.25)		× (10.30)		X (11.03)	X (11.05)		x (11.10)		× (11.30)		× (11.30)		× (12.10)

정거장	장비명	장비설치	자동제어 DDC설치	장비~ 자동제어 (DDC)간 배관배선	전기 MCC 설치	전기MCC~장비간 배관배선 (1차측)	장비~전기배선결선 (2차측)	장비,자동제어,전기 시운전 (1차)	정거장역무실자동제어 시운전 (2차)	화재수신반 자동제어 연동시운전 (전기주관 3차)	정거장~ 사령실간 시운전 (4차)	비 고
930	본선 송풍기실
	S1급기팬 ①②③	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.30)	× (11.30)
	E1 배기팬 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.30)	× (11.30)
	E2 배기팬 ①②	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	× (09.30)	× (10.30)	× (11.30)

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (에스컬레이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적사항조치	종합 시운전	비고
		형식	높이 (H)	동력 (kW)			장비 반입	구조부설치	판넬 마감 (건축)	비계 해체 (건축)	핸드 레일	외장 마감
930	에스컬레이터
	내부#4	1200형	12	22	8	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	▲ 10.30	× 11.25	× (11.30)	× (12.10)	× (12.20)	설치중
	내부#3	1200형	8	15	4	◉	◉	◉	× (9.30)	× (10.05	× (10.07	× (10.10	▲ 10.30	× 11.25	× (11.30)	× (12.10)	× (12.20)	“
	내부#2 (환승통로)	1200형	15	30	2	× 10.30	× (10.30	× (11.03	X 11.10	X 11.15	X 11.20	X 11.22	▲ 11.23	× (11.25)	× (11.30)	× (12.10)	× (12.20)	공장 제작중
	내부#1 (연결통로)	1200형	6	15	2	◉	◉	▲ (9.20)	X 10.10	X 10.15	X 10.20	X 10.30	▲ 11.05	× (11.15)	× (11.30)	× (12.10)	× (12.20)	설치중
	외부#1	1200형	14	33.6	2	◉	◉	▲ (9.20)	X 10.10	X 10.15	X 10.20	X 10.30	▲ 11.05	× (11.25)	× (11.30)	× (12.10)	× (12.20)	“
	외부#2 (2호선 #8)	1200형	6	18.6	1	× (10.30	× (10.30	× (11.03	X 11.10	X 11.15	X 11.20	X 11.22	▲ 11.23	× (11.25)	× (11.30)	× (12.10)	× (12.20)	공장 제작중
	소	계			19

정거장	설치 위치	규 격			수량	구조물현황	설치공사 (엘레베이터)						전력 공급	개별 시운전	완성 검사	지적사항조치	종합 시운전	비 고
		인승	정지층	동력 (kW)			건축철골설치	장비 반입	레일 설치	카조립	출입문 설치	건축유리마감
930	엘리베이터
	외부#1	24	1	16	1	× (10.20)	X 10.30	X 11.01	X 11.10	X 11.20	X 11.22	X 11.30	▲ (11.30)	X (12.01)	× (12.10)	X 12.20	× 12.25	공장 제작중
	내부#2	17	1	13	4	◉	◉	◉	◉	◉	◉	X 11.30	▲ (11.30)	X (12.01)	× (12.10)	X 12.20	× 12.25	설치중
	내부#3 (환승통로)	17	1	13	1	× (10.30)	X 11.05	X 11.06	X 11.07	X 11.12	X 11.15	X 11.30	▲ (11.30)	X (12.01)	× (12.10)	X 12.20	× 12.25	공장 제작중
	소	계			6