휴 일 주 간 작 업 계 획

(`16.8.6~16.8.7)

1. 사업명 : 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자
			감리단	시공사
8월 6일(토)	본선터널 본선1구간	현장정비 방수 및 되메우기	권일순	전수영
	938정거장 본선2구간	구조물 철근조립 및 거푸집 설치 방수 및 되메우기 외부출입구#1,2 기초방수 및 구조물 철근조립 정거장 복구#1단계 가시설 및 되메우기 구조물 철근조립 및 거푸집 설치 방수 및 되메우기
8월 7일(일)	본선터널 본선1구간	현장정비 방수 및 되메우기	김창섭	박찬진
	938정거장 본선2구간	구조물 철근조립 및 거푸집 설치 방수 및 되메우기 외부출입구#1,2 기초방수 및 구조물 철근조립 정거장 복구#1단계 가시설 및 되메우기 구조물 철근조립 및 거푸집 설치 방수 및 되메우기

3. 휴일작업 근무자 명단

2016.8.6.(토)				2016.8.7.(일)
구 분	직 무	성 명	비 고	구 분	직 무	성 명	비 고
감리단	감리원	권일순		감리단	감리원	김창섭
시공사	공 사	전수영		시공사	공 사	양대경
	공 무	최문규			공 무	강서경
	안 전	원효섭			안 전	정재환
	품 질	김종우			품 질	박찬진

□ 장비현황

구 분	장 비	규 격	등록번호	비 고
본선터널	-
본선1구간	카고크레인	15T	서울08바7735	이지호
	굴삭기	06	경기02파6108	정정환
	바브캣	-	서울03나6318	이동규
	진동롤러	10T	서울09가5235	윤선남
938정거장	카고크레인	18T	서울87아4944	박희조
	굴삭기	06	서울02하6491	박우승
	굴삭기	015	서울02거5442	박인수
	굴삭기	02	서울02파8158	박신영

□ 휴일 작업사유

- 구조물 공사의 연속성 확보 및 예정 공정 추진

□ 작업 시간

- 07:00~18:00 (주간)