업무연락전
지시번호	SMIH-14-27770	연번(문서번호)	SMIH-14-27770
지시일자		작성일자	2014-06-02
지 시 자	성원배	처리기한
제 목	928 역무종합관리실 구조물 설치 긴급 요구 처리 지시
내 용
1. 도시철도설비부 설비계획과 긴급 요청 사항입니다. 2. 지하철9호선 2단계 916공구 건설공사 928정거장 #1 출입구 부분에 역무종합관리실에 종합제어반 시설(기계, 전기, 통신 등)을 설치코자 하나, #1 출입구 상부가 완료되지 않아 우기시 설비 및 건축 시설 설치 관리에 어려움이 있어 3. 역무종합관리실 연동시운전(종합제어반)이 2014.06.20.～06.30로 계획되어 있고, 우기시 건축 및 설비 시설이 우수로부터 안전하게 설치되어 연동시운전이 될 수 있도록 928정거장 #1 출입구 상부 구조물을 조속히 마무리 설치하여 달라는 긴급 요청 사항을 통보하니 4. 책임감리원은 도시철도설비부 설비계획과 긴급 요청과 관련 928 정거장 #1 출입구 상부 구조물 마무리에 대하여 관계분야 감리원과 협의하고 처리안을 마련하여 2014.06.09.까지 제출하시기 바랍니다. 끝..
붙임 : 도시철도설비부 설비계획과 긴급 요청 사항 1 부. 끝.

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부