919공구 933정거장 구조물 일부변경 협조요청 검토

[협조요청 사항]

∘ 933정거장 실시설계 과정에서 지장물에 대하여 유관기관 조사시 확인되지 않은 폐공동구가 시공 시 확인됨

∘ 지장물 조사는 계약자의 사전 조사 미흡으로 인하여 발생되었다고 판단됨

∘ 서울시상수관과 광역상수관이 폐공동구 구간을 하부로 통과함에 따라 9호선 구조물에 저촉 발생

∘ 상수관의 유지관리 부서와 이설 협의 결과 토피고 부족 등에 따른 이설 불가 회신이 통보됨에 따라 상수관의 존치 후 구조물 시공시 일부 구조물 변경이 발생되어, 이에 따른 구조물의 기능성 및 사용성 등에 대한 의견 협조 요청

[토목분야 검토의견]

1. 지하철 구조물은 내구년한이 100년 이상인 대단위 기반시설물로 관련 지장물을 이설하여 당초 설계도서에 의하여 시공하는 것이 바람직하다고 판단되며, 서울시 및 광역  상수관의 이설불가로 부득이 구조물의 변경이 필요하다면, 토목구조기술사의 구조검토를 철저히 거쳐 정거장의 기능과 안전성 및 내구성 저하가 없도록 검토

2. 구조물 변경 설계시에는 지하철 9호선 2단계 설계기준에 적합하도록 설계실시(특히 내공높이 기준 준수 등)

3. 상수관(D2000) 저촉으로 인해 변경되는 구조물 구간에 대하여는 상부슬라브에 지하수 등이 체수되지 않고 원활히 배수 되도록 방안 검토