수돗물 단수 및 공사안내

공사 중 단수로 불편을 드려 대단히 죄송합니다 ○ 단수 지역：성북구 길음동 518-17번지, 동소문로43길 12주변 (60세대) ○ 단수 일시：2020년 08월 18일~2020년 08월 19일(야간공사) ○ 단수 시간：6시간( 오후 11시 ~ 익일 05시 ) ○ 단수 사유：노후밸브 교체공사 ▶ 공사로 인하여 단수되었다가 공사완료 후 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 수돗물을 흘려보낸 후 사용해주세요.
▶ 공사구간 내 주차된 차량 중 공사시간 내에 이동주차 계획이 있으신 분께서는 아래 연락처로 사전에 연락 주시면 차량 소통에 지장 없도록 조치해 드리겠습니다.(우천시 연기)
공사 문의	주간(담당자) : 3146-2208 야간(당직실) : 3146-2000	현장소장 : 이일태 *************

중부수도사업소장

홈페이지 단수 안내문 표준

▣ 수돗물 단수안내

○ 단수지역 : 성북구 길음동 518-17 약 60세대 (첨부파일 참조)

○ 단수시간 : 6시간 (2020년 08월 17일  오후 11시 ~ 익일 05시까지)

○ 공 사 명 : 2020-1 종로, 성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

○ 단수사유 : 노후밸브 교체공사

<안내사항>

▶ 현장여건에 따라 단수시간이 다소 단축 또는 지연될 수 있으니 물을 충분히 받아놓고 사용하시기 바라며, 단수 종료 후 통수시 녹물이 나올 수 있으니 잠시 물을 흘려보낸 후 사용하시기 부탁드립니다.

▶ 공사구간 내 민원사항 및 주차문제가 있으신 분께서는 아래 연락처로 연락 주시면 조치해 드리겠습니다.

중부수도사업소(주간) : 02-3146-2208(담당자 : 유형근), 야간 : 02-3146-2000

현 장 소 장 : 이일태 *************,  공사감독자 손진곤 *************

# 1

단수작업 계획서(안)

담 당	과장	소장

20  .    .    .

담당자 : 직급

성명

□ 공사명 : 2020-1 종로, 성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

◦ 위    치 : 성북구 길음동 518-17

공사개요 : 노후밸브교체공사

□ 공사상세도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	40 분	5개
퇴 수	40 분
기존관절단	40 분
배관(용접)	40 분
제수밸브설치	40 분
세척 및 통수	40 분
합 계	4시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	제수변	200	조	1
2	이탈방지압륜	200	조	4
3	이음관	200	개	2
4	1F 단관	200	개	2
5
6

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호	0.15	대	1
2	덤프	2.5T	대	1
3	트럭	1T	대	2
4

□ 인력확보계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부 (용접공)
계	3명
용접공
배관공	김일식	서울시 동대문구 이문로9길 69, 301호	*******1******
특수인부	정성수	경기도 의정부시 호국로954번길 81	*******1******
인 부	박용철	서울시 강북구 삼양로87길 12, 301호	*******5******

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

◦ 수계조정 계획 :

◦ 퇴수작업 계획

- 퇴수잔량 산출 :  D= 100 ㎜,  L= 1.8 m,   Q= 150 x 2 = 300㎥

총퇴수량 = 108 ㎥

- 펌프대수 산출 : 퇴수밸브 퇴수 (300㎜)

총퇴수량-퇴수변사용퇴수량=펌프가동 퇴수량

수중펌프( 65 ㎜) 시간당 퇴수량 =96 x 2 = 192㎥

□ 단수 및 통수시 조절방법 : 따로붙임

□ 아파트 등 다량급수처 인입밸브 개ㆍ폐 담당자 지정 : 따로붙임

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

◦ 관계기관 공문발송 및 승인 현황 :

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독자 : 직 성명 책임자 : 직 성명
업 체	회 사 명 : (주)예일건축 현장소장 : 직 부장 성명 이일태 현장대리인 : 유대원 대 표 자 : 주한식

□ 시험굴착계획 :

◦ 2020 . 00. 00. 시험굴착 계획

◦ 2020 . 00. 00. 시험굴착 확인

- 관경 :100mm          관종 : 주철관

- 심도 : 관상단  1.2 m

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

◦ 공사안내간판, 현수막

◦ 휀스, 유도등

◦ 교통안내원 배치 등

□ 기타사항 :